합 의 서

계약번호

12152097900

문서번호

공사명

관급자재 구매설치(남산1호터널 전력설비 교체공사)

납품장소

남산1호터널 설치

당사는 귀 사업소와 계약을 체결한 상기 물품에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기에 합의하고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 확약합니다.

합의내용

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한	2015.06.28	2015.07.15
계약금액	155,000,000원	155,000,000원

2015년  6월  17일

회 사 명  : 대신파워텍(주)

주    소  :  경기도 포천시 신북면 청신로 2097길 85-28

대    표  :  김  춘  원  (인)

서울특별시 서부도로사업소장 귀하