합 의 각 서

1. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모 지하안전영향평가 용역

2. 계약금액 : 일금 51,104,400원(금오천백십만사천사백원 부가세포함)

3. 준공금액 : 일금 51,104,400원(금오천백십만사천사백원 부가세포함)

4. 계약기간 : 2018년 11월 22일 ~ 2019년 12월 31일

5. 변경사항

계약기간 변경	당초	2018년 11월 22일 ~ 2019년 12월 31일까지
	변경후	2018년 11월 22일 ~ 2020년 04월 30일까지
	증감일	120일
계약금액 변경	당초	일금 ￦51,104,400 (부가세포함)
	변경후	일금 ￦137,324,400 (부가세포함)
	증감액	일금 ￦86,220,000 증

6. 변경사유 : 비개착구간에 대한 지하안전영향평가 용역을 추가로 수행함.

2019년 11월 26일

담 당 자 경유
소 속	도로계획과
직 급	토목6급
성 명	이 일 주 (인)

위계약자

주 소 :

서울시 관악구 관악로 37길 56 (봉천동,동아아파트B상가)

상     호 : 주식회사 다산이엔지

대표자 : 이    상   헌 (인)

서울시 (분임)재무관  귀하