(예시) 900 공구 자재투입구(레일, 침목·레미콘 등) 현황

구분(위치)	내용			비고
○ 자재투입구 레일투입구 - 위치 : STA : 00km 00m)	○ 2016.12.08. : 지하1층 상부슬라브 타설 완료 ○ 2016.12.20. : 거푸집 및 동바리 철거 ○ 2016.01.30. : 중앙파일 철거 ○ 2016.02.15. : 주변정리 및 청소 ○ 2017.02.20. : 레일투입구 합동(토목, 궤도) 점검 ○ 2017.02.24. : 레일투입구 인계 인수
○ 위치도
○ 사진
상부		중부	하부

구분(위치)	내용			비고
○ 자재투입구 - 침목·레미콘 투입구 - 위치 : STA : 00km 00m)	○ 2016.12.08. : 지하1층 상부슬라브 타설 완료 ○ 2016.12.20. : 거푸집 및 동바리 철거 ○ 2016.01.30. : 중앙파일 철거 ○ 2016.02.15. : 주변정리 및 청소 ○ 2017.02.20. : 침목·레미콘투입구 합동(토목, 궤도) 점검 ○ 2017.02.24. : 침목·레미콘 투입구 인계 인수
○ 위치도
○ 사진
상부		중부	하부