		중계본동(백사마을) 주택재개발 정비

( 주거재생과 )

노원구 중계본동 104번지 일대(백사마을) 주택재개발정비구역 일부를 저층 임대주택으로 건립하여 주거지 보존 및 마을공동체를 보존 재생하는 개념의 정비사업 추진.

□ 사업 개요

❍ 위  치 : 노원구 중계본동 30-3번지 일대(42,773㎡)

❍ 규  모 : 지상1~3층 임대주택 615세대 및 부대복리시설

※ 주택재개발구역 : 지상20층(평균16층) 아파트 27개동(1,720세대)

❍ 기  간 : 2013.12 ~ 2017.12.

❍ 총 사업비 : 197,340백만원(국비 21,642, 시비 141,578, 기타 34,120)

‣ 연차별 집행(투자)계획                                       (단위 : 백만원)

구분	총사업비	단기		중기			장기	비고
		기 투자액	’14년	’15년	’16년	’17∼’19년	’20년이후
총계	197,340		2,202	45,150	122,260	27,728
국비	21,642			6,500	8,656	6,486
시비	141,578		2,202	28,414	99,956	11,006
기타(기금)	34,120			10,236	13,648	10,236

※ 재개발구역내 임대주택 부지 매입하고, 시가 직접 임대주택 건설하는 방식

□ 추진 사항

❍ 2009. 5 : 중계본동 주택재개발정비구역 지정(2012.  6 구역변경 지정)

❍ 2012. 6 : 백사마을 주거지보전사업 시행계획 수립(2013. 11 시행계획 변경)

❍ 2013.12 : 임대주택 건설 설계용역 시행

□ 향후 계획

❍ (단  기)

- 2014.10 : 사업시행인가

- 2014.12 : 임대주택 건설 설계용역 준공

❍ (중장기)

- 2015. 9 : 관리처분계획인가

- 2015.10 : 철거 및 이주

- 2017.12 : 공사완료(입주)

작 성 자	주거재생과장 : 안재혁 ☎2133-7155 / 재개발팀장 : 김재겸 ☎7173 / 담당 : 이의신 ☎7174

□ 위 치 도

□ 현황사진 또는 조감도 등