세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업

행정2부시장 현안업무 보고 결과

세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 사업의 준공 시기 도래에 따라 현안 업무에 대한 행정2부시장(직무대리) 보고 결과임

□ 회의개요

○ 일  시 : ´18. 7. 16 (월) 11:00 ~11:30

○ 장  소 : 도시재생본부장실(11층)

○ 참석자 : 12명

- 행정2부시장(직무대리), 지역발전본부장, 서북권사업과장, 개발관리팀장외 1,

- 도시공간개선단장, 도시공간개선반장, 도시건축센터장외 1,

- 도시기반시설본부 시설국장, 건축부장외 1

□ 보고내용

○ 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 관련

- 도시건축박물관 개관일정 조정

- 도시디자인위원회 심의결과에 따른 포장재(PC블록) 설치범위 결정

- 업무이관 시기 조정

⇒ 세부내용 : 붙임 보고자료 참조

□ 주요 논의사항

(안건1) 도시건축박물관 개관일정 조정 : ’18.10.5 → ’19. 1월

○ 도시기반시설본부(건축부)

- 도시공간개선단 추진일정을 따를 경우 바닥마감 공사를 제외하고 공사준공이 필요함

□ 전시공사와 바닥마감공사(레진테라조) 병행시 공사의 품질확보가 어려우므로 바닥공사를 전시공사에서 받아서 하는 것이 타당한 것으로 판단

- 바닥마감 공사를 위해 공기 연장시 간접비 및 추가감리비 등 약3.2억원 추가 소요 예상

- 바닥마감을 준공 이후에 하는 경우는 별도 발주 필요

○ 도시공간개선단

- 그동안 일정 문제로 건축공사 부분을 전시공사에서 많이 받아서 추진하고 있음

- 전시업체의 업무범위가 아니어서 건축분야인 바닥마감공사를 하는 경우 품질이 우려됨

※ 전시공사에서 받더라도 간접비는 발생

(안건2) 통합 패턴의 포장재(PC블록) 설치 범위 결정

○ 도시기반시설본부(건축부)

- 차도에 PC블록 설치시 하자발생 우려

- 원안대로 시공시 공사기간 약5개월 소요로 금년 내 공사완료 어려움

○ 서북권사업과

- 그동안 계속적으로 인근을 포함한 전체를 PC블록으로 설치하도록 요청

(안건3) 업무이관 시기 조정

○ 부서간 논의사항 없음

□ 회의결과

(안건1) 도시건축박물관 개관일정 조정 : ’18.10.5 → ’19. 1월

○ 바닥마감을 제외한 나머지 부분은 준공하고 임시개관 이후 도시기반시설본부에서 공사를 마무리하는 것으로 결정

- 도시공간개선단의 전시용역에서 바닥마감을 수행하기는 어려움

(안건2) 통합 패턴의 포장재(PC블록) 설치 범위 결정

○ 전체 통합하여 포장재 설치하는 것으로 수차례 보고 된 사항임

○ PC블록이 안된다면 (차도로 써도 깨지지 않는)다양한 기술적인 다른 대안을 제시해서라도 전체를 하는 방안을 재검토하기 바람

- 도기본 의견은 광장의 완성도가 떨어짐

※ 종묘보행로 및 세운 사례 참조(필요시 설계자 협조)

(안건3) 업무이관 시기 조정

○ 바닥 공사까지 끝내고 이관

첨  부 : 회의자료 1부.  끝.