공정회의 회의자료(9.14)

☐ 진행사항

○ 건축공사 : 옥탑층 거푸집 탈형, (기타, 모빌렉 발주)

○ 기계공사 : 화장실 위생 배관 설치

○ 전기공사 : 전열 등 배선공사

☐ 현안사항

○ 증축동 연결통로 개설을 위한 남자화장실 철거공사

- 공사대상 : 지상1~지상4층 남자화장실

- 공사기간 : 철거 ~ 준공시까지

- 공사내용 : 보양 및 철거 → 연결통로 공사

→ (임시조치) 3층 여자화장실 사용, 지상1층 외부 간의화장실(대변2,소변3)

▶ 시공사 요청사항 : 최소 다음주 토요일 작업개시 요구

‧보양(9.23) → 마감철거 → 내부설비철거 → 조적공사 → 마감공사

○ 지상1층 당직실(침실) 철거

- 공사기간 : 미정~준공시까지

- 공사내용 : 보양 및 철거 → 장애인화장실, 민원실 등

→ 수질검사 아줌마 집합장소(컨테이너)

○ 기존건물 리모델링공사 시기 도래에 따른 철거

- 공사대상 : 식당, 체력단련실 및 샤워장, 휴게실 등

- 공사내용 : 보양 및 철거 → 현장직원 탈의실 등 신설

→ 주방기구, 헬스시설, 사무가구 등 이전