용산구 한강로 방재시설 확충

□ 사업목적

○ 2010년 침수지역인 용산구 한강로 일대와 반복적인 침수피해를 해소하고 치수안정성을 도모함으로써 시민의 안정적인 편의를 제공키 위함

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017. 7.(장기계속공사)

◦ 총사업비 : 30,958백만원

◦ 사업내용 : 빗물펌프장 신설, 관거신설(유역분할), 관로정비

◦ 위    치 : 산구 한강대교 북단 ~ 남영역 간

□ 당해연도 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

예산과목	당해년도 예산집행현황
	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)
계	14,292	11,210	3,041	41
시설비	13,287	10,596	2,691	-
감리비	995	614	350	31
시설부대비	10	-	-	10

□ 사업실적 및 향후대책

◦ `10.09.21. : 집중호우 침수피해 발생

◦ `11.09.08. : 기본 및 실시설계 용역 착수

◦ `13.12.26. : 한강로 일대 방재시설 확충사업 계약

◦ `14.04.24. : 빗물펌프장 설치 반대 집단민원발생

◦ `14.12.26. : 하천점용허가 완료[서울지방국토관리청]

◦ `15.01.~   : 한강로 일대 방재시설 확충사업 공사추진

◦ `17.07.     : 공사완료 예정

작 성 자	하천관리과장 : 이진용 ☎2133-3860 치수계획팀장 :손경철 ☎3362 담당 : 진학성 ☎3863

□ 현장·시설 사진

1.	2.
3.	4.