문서번호	토목부-4658
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

현장사무실 기간연장 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2017. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

현장사무실 기간연장 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

총차 공사기간이 10개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장에 대하여 검토 보고드림

관련근거

○ 현장사무실 기간연장 실정보고(선사고덕0420-35호, ‘16. 2.16.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

검 토

○ 실정보고 이유

- 공사구간내 현장사무실 신축부지가 없어 개인건물을 임대하여 사용중임.

- 총차 공사기간이 10개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장 필요

○ 임대기간 연장 변경

공 종	규격	수량	단위	단가 (천원)	직접 공사비(천원)		비고
					당초	변경
가설사무소	24개월,조립식	1	식	68,600	68,600	68,600	4차로공사 (2009.01.06.~2011.01.06)
가설사무소	72개월,임대	72	월	6,230	448,560	-	72개월 ( ~2016.12.31.)
가설사무소	82개월,임대	82	월	6,230	-	510,860	82개월 ( ~2017.10.31.)
합계					517,160	579,460	96개월→106개월 (증 62,300천원/10개월)

- 최초 설계(4차로) 및 도급 계약시 조립식(24개월)로 계약

- 2011년 6차로 추가 확장시 서울시 지역실정 고려 현장사무실을 임대로 반영(현장사무실 임대기간(72개월→82개월) 10개월 연장)

○ 단가검토 : 「지방자치단체 예산 및 계약집행기준」 제7절 실비산정에 해당

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증‧ 감	비 고
		수 량	금 액	수 량	금 액
가설사무소	식	1	448,560	1	510,860	62,300	임대기간 72개월→82개월
제 경 비	식		22,440		25,540	3,100
공사원가	식		471,000		536,400	65,400
부가가치세	식		47,100		53,640	6,540
도급공사비	식		518,100		590,040	71,940

감리단 검토의견

○ 2016.12.26. 9차공사 설계변경시 공사기간이 10개월 연장되었으며, 공사기간 연장에 따른 현장사무실 임대기간 변경은 ‘공사계약 일반조건 제7절 4. 그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정’ 사유에 해당하므로, 현장 사무실 임대기간을 10개월 연장하여 도급내역에 반영함.

○ 본 내역서, 수량산출서 및 단가산출서는 제반 설계기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ 총차 공사기간이 10개월 연장됨에 따라 감리단 검토의견과 같이 현장사무실의 임대기간 연장 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 71,940천원에 대하여는 추후 본부 설계변경 자문위원회(소위원회) 자문 결과에 따라 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.