문서번호	토목부-17605
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

현장사무실 기간연장 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2015. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

현장사무실 기간연장 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장에 대하여 검토 보고드림

□ 관련근거

○ 현장사무실 기간연장 실정보고(선사고덕0420-348호, ‘15.8.18.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

□ 검 토

○ 실정보고 이유

- 공사구간내 현장사무실 신축부지가 없어 개인건물을 임대하여 사용중임.

- 총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장 필요

○ 임대기간 연장 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
현장사무실 기간연장	‘09.1.6.~’14.12.31 (72개월)	‘09.1.6.~’15.12.31 (84개월)	증)12개월

○ 단가검토

- 낙찰률 81.14%

- 강제협의율=(설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가+동 단가에 낙찰률 곱한 금액)/2

= (100 + 81.14) / 2 = 90.57%

- 단가산출내역

구 분	단위	당초(천원)	변경(천원)	협의율(%)	비고
가설사무소(48개월, 임대)	1식	299,900	299,900	92.34	기계약분
가설사무소(12개월, 임대)	1식	-	73,900	90.57	추가분
계	1식	299,900	373,800

※ 최초 설계(4차로) 및 도급 계약시 조립식(24개월)로 계약하여 종결됨.

□ 공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증‧ 감	비 고
		수 량	금 액	수 량	금 액
가설사무소	식	1	299,900	1	373,800	73,900	임대기간 48개월→60개월
제 경 비	식		14,100		18,200	4,100
공사원가	식		314,000		392,000	78,000
부가가치세	식		31,500		39,200	7,800
도급공사비	식		345,500		431,200	85,800

□ 감리단 검토의견

○ 2014.12.29. 전체(7회) 설계변경시 공사기간이 12개월 연장되었으며, 공사기간 연장에 따른 현장사무실 임대기간 변경은 ‘공사계약 일반조건 제7절 4. 그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정’ 사유에 해당하므로, 현장 사무실 임대기간을 1년 연장하여 도급내역에 반영함.

○ 본 내역서, 수량산출서 및 단가산출서는 제반 설계기준에 맞게 작성됨.

□ 조치계획

○ 총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 감리단 검토의견과 같이 현장사무실의 임대기간 연장 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 85,800천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.