현 장 실 정 보 고 서

이준북부1708 - 53                                         2017.08.29

수   신 : 북부수도사업소장

참   조 : 급수운영과장

제   목 : 폐콘크리트 폐기물 처리 및 운반관련 실정보고

•공사명 : 공릉배수지(5.6지) 내부방식공사

상기 공사를 예의 시공 중 따로 붙임과 같이 현장 실정을 보고하오니               검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 현장 확인 점검내역 1부.

2. 현장사진 1부. “끝”

(주) 이준엔지니어링

대표이사 나 석 근

건설사업관리자	손진곤인

담 당	선 임	팀 장	결 재

현 장 확 인 점 검 내 역
공사명	공릉배수지(5.6지) 내부방식공사
위 치	노원구 공릉동 141-1 (공릉배수지 5.6지 내부)
현장확인	2017.08.28.	점검자	손진곤 인
□ 현장 확인 및 점검내용 0 공릉배수지 5.6지 벽체 도류벽 기둥 바닥 등 내부방식공사와 관련하여 열화균열 구간에 단면보수 및 그라인딩 작업 시 발생한 공사용 폐기물 처리비 및 운반비가 설계 내역서에 제외되어 있어 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. - 아 래 - □ 현 황 0 계약업체 : 신봉건설(주) 대표 최기병 0 공사기간 : 2017년 6월 26일∼11월30일 0 계약금액 : 일금1,831,863,760원(사급자재 포함) 0 공사내용 : 방수방식 및 표면처리 등(32,710㎡) □ 문제점 0 공릉배수지 5.6지 벽체 도류벽 바닥 등 그라인딩공사와 관련하여 발생한 공사용 폐기물 물량 초과가 예상 됨(당초:120톤,변경358톤) 0 폐기물 야적 구간의 협소와 공원부지 야적으로 미관을 저해하고 있으며 후속 공종에 필요한 자재(시트) 등 반입공간 부족 □ 보고자 의견 0 본 공사에서 발생한 폐기물에 대하여는 공사의 시급성을 감안하여 우리사업소 와 건설 폐기물처리 년간 단가계약업체인 (주)방태 기업에게 작업지시하고 추후 계근 수량에 의거 정산처리 함이 타당하다고 사료 됨 0 공사개요 및 공사비 - 당 초 : 폐기물 소운반비 120톤*58,864=7,063,680원 - 추가예상물량 : 폐기물 소운반비 238톤*58,864=14,009,632원 - 산출근거 : 15,635*2*0.005=156㎥, 156*2.3=358톤

누수복구 현장점검 사진
	위치 (공사명)			공릉배수지 5지								사진설명					폐기물(폐콘크리트)처리
	위치 (공사명 )			공릉배수지 5지								사진설명					폐기물(폐콘크리트)소운반
														1

누수복구 현장점검 사진
	위치 (공사명)			공릉배수지 6지								사진설명					폐기물(폐콘크리트)처리
	위치 (공사명 )			공릉배수지 6지								사진설명					폐기물(폐콘크리트)수집
														1