남산숲어린이집 녹색자금사업

현장실정사항 검토결과

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산숲어린이집 녹색자금사업

○ 위    치 : 중구 동호로 5길 193 남산숲어린이집

○ 공사기간 : 2014. 7. 30 ~ 10. 15

○ 도 급 액 : 금93,598,000원

○ 도 급 자 : 현도종합건설(주) 최태진

□ 검토내용

구 분	현황 및 문제점	조치의견	비 고
이식공사	▶ 도면과 현장 여건이 상이함 (설계누락 및 오류 등)	▶ 현장에건에 맞추어 재조사 후 이식 - 이식수량 : 교목 16주→22주 관목 0주→370주
앉음벽A,B	▶ 하자발생 및 내구성 향상을 위하여 앉음벽A의 골조 재료변경 및 앉음벽의 각관 규격변경 ▶ 앉음벽A 하부의 기초콘크리트는 불필요	▶ 앉음벽A 골조재료 변경 : 방부각재 → 구조용각관 각관 규격 변경 : 30x30xT1.4 → 50x50xT2.3 ▶ 앉음벽A의 기초콘크리트 삭제
목재계단, 데크A,B	▶ 하자발생 및 내구성 향상을 위하여 각관 규격 변경	▶ 각관 규격 변경 - 50x50xT1.6 → 50x50xT2.3
데크A	▶플랜터B 하부 데크(발판)공간이 협소하여(W300) 이용시 불편하므로 데크포장면 확폭 검토 필요	▶ 데크포장 부분을 넓혀 이용자들의 불편 해소 - 데크 포장 : 2.08㎡ → 5.08㎡
데크B	▶계단 하단부와 상부 트렌치 설치 공간에 원활한 배수와 현황여건에 맞게 데크포장을 추가시공 필요	▶ 목재데크B 구간의 물량을 축소하고, 계단하부 및 상부 트렌치 부분 포장면 추가시공 조정 - 데크 포장 : 7.81M2→11.29M2
계단돌 쌓기	▶ 현장내 조경석을 이용 경사면 정비 필요	▶ 현장내 조경석 쌓기 위치 및 물량 조정 - 계단돌 쌓기 : 12m → 25m
휀스도색	▶ 기존 메쉬휀스 도색	▶ 미관불량으로 휀스 철거 (어린이집 요구사항)
마사토 포장	▶ 현장의 토사가 마사토로 되어있어 별도의 포장 불필요	▶ 마사토 포장 삭제 - 마사토 포장 : 26㎡ → 0㎡
집수정 설치	▶ 배수구가 없어 자갈배수로 설계	▶ 굴착시 배수구 확인으로 자갈배수로 삭제 - 자갈깔기: 8㎡ → 0㎡ - 연결관(D200): 0m → 20m - 집수정(600x600): 0개소 → 3개소

□ 검토의견

○ 당초 설계된 내용에서 설계도서상의 오류정정, 어린이집측 요청, 시공중 실정사항 등으로 현 실정에 맞게 검토한 사항으로 향후 설계 변경에 반영하고, 추가 소요예산은 본 사업의 집행잔액을 활용.