보 고 서
			담당	팀장
				전결 10/18
문서번호	공사감독3처-9207
보존기간	준영구		협 조	차장
결재일자	2017.10.18.
공개여부	공개
제 목	현장 실정보고서 검토보고-한강이촌권역 자연성회복사업(제9회)

1. 공사 개요

○ 공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

○ 공 사 비 : 5,443,142,450(도급비4,089,690,000,관급비1,353,452,450)

○ 공사기간 : 2016. 2.29 ~ 2017.12.19

○ 도 급 자 : 임원개발(주) 대표이사 이대성

○ 발 주 청 : 한강사업본부 생태공원과

2. 검토 내용

○ 발주처 검토요청 사항

구분	검토요청 사항	검토결과	비고
토공	▶이촌5주차장 새남터 순교성지 방문차량(대형버스) 진입요청 민원 발생에 따른 주차장 차량동선 변경요청 (도면참조)	▶당초 승용차 전용주차장으로 설계되어 있으나 새남터 순교성지 방문 대형차량 주차와 관련 발주부서로 민원이 발생되는바, 발주부서 의견대로 대형버스 겸용 주차장으로 도면에 의거 시공코자함. -개략공사비:증)2,200천원(재경비포함) ▶도면상 버스출구 동선내 느티나무(근원직경약30cm)가 저촉되어 진출입로를 일부 변경으로 느티나무를 존치시키고자 하며, 주변 마운딩 부분에 대하여는 공사중 현장상황에 맞게 시공후 설계변경시 반영 코자함.	생태공원과-2835 (17.10.11)

※ 상기내용 중 시공시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

3. 개략공사비 변경 현황(총차)

구 분	금 액(천원)					비고
	최초계약	공사비 증감			변경
		전회까지	금회(9회)	누계
도급비계	3,315,472	490,067	12,070	502,137	3,817,609
공급가액	3,014,066	445,516	10,973	456,489	3,470,555
부 가 세	301,406	44,551	1,097	45,648	347,054

4. 조치 계획

○ 상기 내용에 대하여 발주처의 승인을 득하여 추후 설계변경 시행

붙 임 : 개략공사비 내역서 1부. 끝