2015. 10. 19.~11. 01.

이 보도자료를 2015 10월 19부터 보도하여 주시기 바랍니다.

홍보자료

담당부서 :

도시안전본부 교량안전과

교량안전과장

이 용 심

2133-1940

교량기획팀장

하 현 석

2133-1942

사진없음 ▣

사진있음 □

쪽수 : 3 쪽

담당자

김귀용

전봉재

2133-1943

2133-1947

제 목 : 성산대교 포장공사에 따른 교통통제

서울특별시 교량안전과에서는 오는 10월 19일부터 11월 01일까지 14일간 22시부터 익일 06시까지 성산대교 포장공사를 시행하기 위하여 성산대교 마포구 망원동↔영등포구 양평동 양방향 구간에 대하여 3개차로 중 2개차로를 야간 8시간 동안 부분적으로 교통통제를 실시하오니 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드립니다.

□ 교통 통제계획

통 제 일 시	통 제 구 간	통 제 내 용	비 고
2015. 10. 19(월) ～ 2015. 11.01(화) 공사시간 22:00 ～익일 06:00	성산대교 본선구간 상,하행선 3개차로중 2개차로씩 교통통제 (부분통제)	성산대교 본선구간 마포구 망원동 ↔ 영등포구 양평동 상,하행선 양방향 3개차로중 2개차로 야간 8시간 교통통제 (부분통제)	시공사 천웅기연㈜ (☎02-425-4455) 현장대리인 장판호 ************* 감리원 김석원 *************

※ 기상상황 및 작업여건에 따라 교통통제일이 변경 될 수 있습니다.

□ 시민 협조사항

2015년 10월 19일 22시부터 2015년 11월 01일까지 14일간 22시부터 익일 06시까지 성산대교 포장공사를 시행하기 위하여 성산대교 마포구 망원동↔영등포구 양평동 양방향 구간에 대하여 3개차로 중 2개 차로를 야간 8시간 동안 부분적으로 교통통제를 실시하오니, 성산대교를 이용하시는 운전자께서는 공사 구간 내 서행 및 안전운전을 당부 드리며 공사기간 중 실시간 교통정보를 확인하시고 가급적 혼잡구간을 피하거나 우회도로를 이용하여 주시기 협조 부탁드립니다.

성산대교 포장공사 위치도

►공사구간◄

성산대교

영등포구 양평동 방향

3개차로 중

2개차로 부분통제

►공사구간◄

성산대교

마포구 망원동 방향

3개차로 중

2개차로 부분통제

	성산대교 포장공사

□ 단계별 포장 작업계획

□ 위    치 : 서울특별시 마포구 성산동 ~ 영등포구 양평동(성산대교)

□ 규    모 : 차도폭 7.4m, 연장 1,080m(상,하행선)

□ 공사기간 : 2015. 10. 19. ~ 2015. 11. 01. (14일간)

일 자	공 법	시공위치	시공물량 (a)	비 고
10월 19일	PNA COAT	하행선 Joint1~Joint5	9.87	평삭및표면처리
10월 20일	PNA COAT	하행선 Joint1~Joint5	9.87	교면방수포장
10월 21일	PNA COAT	하행선 Joint5~Joint9	10.08	평삭및표면처리
10월 22일	PNA COAT	하행선 Joint5~Joint9	10.08	교면방수포장
10월 23일	PNA COAT	하행선 Joint3~P6	5.12	평삭 및 포장
10월 24일	슈프림데크코트	상행선 P9~Joint7	11.76	평삭및표면처리
10월 25일	슈프림데크코트	상행선 P9~Joint7	11.76	교면방수포장
10월 26일	슈프림데크코트	상행선 Joint12~Joint7	10.24	평삭및표면처리
10월 27일	슈프림데크코트	상행선 Joint12~Joint7	10.24	교면방수포장
10월 28일	HS BRIDEG COAT	하행선 Joint9~Joint19 J2램프	6.16	평삭 및 포장
10월 29일	HS BRIDEG COAT	상행선 Joint19~Joint13	5.04	평삭 및 포장
10월 30일	HS BRIDEG COAT	상행선 Joint14~Joint12	5.12	평삭 및 포장
10월 31일	HS BRIDEG COAT	L2램프 J2램프	3.57	평삭 및 포장
11월 01일	슈프림데크코트	상행선 Joint1~Joint2	3.15	평삭 및 포장
합 계	70.11

◆ 성산교 단계별 포장계획 일정