(주)홍익설비

서울시 은평구 통일로 89길 5(갈현동,수연빌딩)  전화:02-355-1104  펙스:02-352-1135

부서 : 공사 팀 / 담 당 정경호

문서번호 HE2016 - 36 시행일자 2016. 09. 23. 수 신 서울시설공단 공사감독2처장 참 조	선결			지시
	접수	일자 시간	. . :
				결재 ․ 공람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제 목  준공기한 연기원 제출

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 공사감독중인 “거마가압장∼거마배수지간 송배수관 정비 공사” 와 관련하여 공사 중 야간공사 중 소음민원발생으로 공사중지 및 주간공사

전환에 따른 협의, 폭염 및 공사범위외 추가작업지시등으로 지연사유가 발생하여 준공기한 연기원을 제출하오니 검토 후 처리하여 주시기 바라며, 남은 기한동안 조속히 공사가 완료될 수 있도록 만전을 다 하겠습니다.

첨부 : 준공기한 연기원 1부, 끝.

(주)홍익설비  강 오 영