“국민과 함께하는 시설안전 글로벌 리더”
		한국시설안전공단
수신	북부도로사업소장
(경유)
제목	홍지문터널 정밀안전진단용역 과업기간 연장 요청

1. 귀소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 홍지문터널 정밀안전진단용역(2014.04.22 계약) 수행중 외관조사가 완료된 구간에 보수공사(균열주입보수)가 실시되었기에 이를 반영한 용역을 완료하기 위해서는 과업연장이 필요하므로 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

당초 : 2014. 4. 30 ∼ 2015. 2. 23(300일)

변경 : 2014. 4. 30 ∼ 2015. 3. 31(336일).  끝.

							한국시설안전공단이사장
부장										일반철도실장										시설안전본부장
협조자
시행			시설안전본부-1608									(	2014.12.29.					)		접수			교량보수과-8894								(	2014.12.29.					)
우	411-758					경기 고양시 일산서구 대화동 2311															/			http://www.kistec.or.kr
전화		031)910-4067						/전송			031)910-4175					/	dyryu@kistec.or.kr												/	공개