문서번호	시설보수과-4576
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
협조

화랑고가 성능개선공사 실정보고

2014. 6

북부도로사업소

[시설보수과]

화랑고가성능개선공사 실정보고 검토

우리사업소에서 시행중인 『화랑고가 성능개선공사』에 대하여 강북 공사감독2처-9293호(2014.06.19)로 공사 실정보고가 접수되어  이에 대한 검토 보고사항임.

공사현황

공 사 명 : 화랑고가 성능개선공사

공사개요 : 교량받침설치 - 68개소, 연단보강 - 14개소

공사기간 : 2013.05.08 ~ 2014.06.30

도 급 비 : 837,529,000원

도 급 자 : 현근이엔씨(주)

감 독 자 : 서울시설관리공단(강북공사관리처)

보고내용

화랑고가 연단보강에 따른 추가 검토 내용

- 교각부 교량점검로 철거(L=170m) 및 재설치(L=160m)

□ 연단보강 추가로 기존 교량점검로 철거부분에 재설치가 필요한 실정임

구 분	난간,발판 재사용	난간재사용	신규설치
시공형태	난간,발판재사용 신규 250mm	난간재사용
시공성 및 문제점	- 재사용으로 신규자재 혼재 시공시 시공성 불량(용접,도금) - 현장 제작부분으로 공기 길어짐 - 공사비 증가(STS)	- 재사용으로 신규자재 혼재 시공시 시공성 불량(용접,도금) - 현장 제작부분으로 공기 길어짐 - 공사비 증가(STS)	- 신규설치시 시공성 양호 - 공장제작으로 공기단축 - 공사비 절감(알루미늄)
공사비	□ m당 533,885원 □ 전체구간 적용L=160m, 133,610,000원(재경비포함)	□ m당 419,641원 □ 전체구간 적용 L=160m, 100,340,000원(재경비포함)	□ m당 374,777원 □ 전체구간 적용L=160m, 83,873,000원(재경비포함)
적 용			○

□ 연단보강 설계사 검토결과 따른 규격변동으로 변경이 필요한 실정임

공 종 명	규 격	단위	수 량		증,감	비 고
			당 초	변경
콘크리트구멍뚫기 및 케미컬주입 (1단)	Φ35. L=270mm	공	2,340	1,164	감) 1,176
콘크리트구멍뚫기 및 케미컬주입 (2,3단)	Φ35 L=210mm	공	-	1,176	증) 1,176
콘크리트구멍뚫기 및 케미컬주입 (4단)	Φ35 L=140mm	공	-	348	증) 348

□ 교좌장치 교체시 보단부 하부에 사용되는 철판자재가 수량산출 오류로         내역서에서 누락되어 사급자재 추가 정산반영 함이 필요한 실정임

단부보강 상세도(도면)	사급자재	규격	수량(ton)		비 고
			당초	변경
	철 판	T=30mm (SM490)	0.785	13.42	설계도면 참조

□ 연단보강 추가시공으로 발생된 점검로 철거자재 고재대 반영이 필요함

· 고철(발판 1m당 36.184Kg), 스텐레스(난간 1m당 37.975Kg)

· 점검로자재 실무게 계근중량표에 근거하여 정산 반영

공사비 증,감 현황

연번	구 분	금 액		증ㆍ감	비고
		당 초	변경
1	교량점검로 철거 (기존)	-	18,447,000	증) 18,447,000
2	콘크리트천공 및 케미컬주입	46,519,000	50,100,000	증) 3,581,000
3	사급자재(철판)	939,000	16,063,000	증) 15,124,000
4	사급자재(기점검로) (고재대 반영)	-814,000 (교좌장치분)	-18,091,000 (교좌+점검로)	감) 17,277,000
계(재경비 포함)				증) 19,875,000

검토결과

기존 점검통로는 교각 연단보강 추가 발생(P1,P2,P3,P6,P7,P8,P9)으로 철거

점검통로 P2,P3,P6 구간은 본 공사에서 설치하고 P7,P8 구간은 일상유지보수공사로 실시

연단보강부 안전성 확보를 위해 콘크리트 천공 등 추가

교좌장치 교체에 필요한 보 단부 하부에 설치하는 고정철판 수량이 산출 오류로 누락되어 사급자재 반영

기존 교량점검로 철거로 추가 발생되는 고재대를 계근하여 정산

조치의견

보고내용이 상기내용과 같이 타당하다고 사료되어 본 사업시공에   반영하고 추후 설계변경시 예산범위내에서 정산 처리코자 하며,

점검통로 P7, P8 구간은 일상유지보수공사에 설치 의뢰하여 조치   코자 함.

따로붙임 : 공사 실정보고서 1부.  끝.