	화랑로~별내지구간 BRT사업 추진계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 화랑로～별내지구간 BRT구축사업

❍ 위    치 : 서울 노원구(석계역)～경기도 남양주시 별내지구(별내역)

❍ 사업규모 : 연장 8.1㎞(서울시 5.2㎞, 경기도 2.9㎞)

❍ 사업기간 : 2010. 4. 20 ～ 2013. 12. 31

❍ 총사업비 : 115억원

- 설계비 7.2억, 공사비 101.4억, 감리비 6억, 시설부대비 0.4억

※ 예산비용 : LH공사 별내지구 광역교통개선 분담금

□ 추진배경

❍ 남양주 별내지구 택지개발사업 광역교통개선대책의 일환으로, 수도권교통본부에서 추진한「수도권 BRT 기초조사 및 확충계획수립」용역 수행

❍ 화랑로 석계역∼별내지구간 BRT(간선급행버스체계)의 도입이 절실히 요구됨

□ 추진현황

❍ 2006.07. :「남양주 별내지구 광역교통개선대책」수립(국토해양부)

- 별내지구~태릉입구역~동1로지하차도(8.1km) BRT구축 계획

❍ 2009.12. :「수도권 BRT 기초조사 및 확충계획(수도권교통본부)

- 별내지구~태릉입구역~석계역(8.1km) ※ 우선추진 1순위로 선정

❍ 2010.04. :「화랑로~별내지구간 BRT 구축사업 기본계획 및 기본ㆍ   실시설계」용역 발주 및 착수(수도권교통본부)

❍ 2010.05. : 기본계획(안) 수립(차로운영, 정류소 계획, 회차방안 등)

❍ 2010.05.~06. : 실무협의(2회, 서울시, 경기도, 남양주, 구리시, LH공사)

- BRT 노선 및 기본계획(안) → 석계역, 별내 회차대안 마련

❍ 2010.07.06 : 착수보고(국토해양부, 서울시, 경기도, 남양주시, 구리시, 노원구, LH공사)

- 별내지구~동1로지하차도 → 별내지구~석계역으로 노선변경 필요성 제기

❍ 2010.08.20 : 노원구청장 보고

❍ 2010.09. : 광역교통개선대책(변경) 및 별내역 환승 관련 업무회의
(경기도, 남양주시, LH공사, 기타 관련 업체)

❍ 2010.10. : 기본설계(안) 실무협의(서울시, 노원구)

- 차로운영계획, 우회처리대책 등

❍ 2010.11. : 유관기관 설명 및 협의(서울시, 노원구, 경기도, 남양주시, 구리시, LH공사)

- 기본계획 및 기본설계(안) 설명 및 협의

❍ 2010.12. : 전문가 자문(국토연구원 임영태외 6명)

❍ 2010.12. : 중간보고(서울시, 경기도, 남양주시, 구리시, 노원구, LH공사)

❍ 2011.01. : 별내지구 내부 BRT 운영 및 광역교통개선대책(변경) 관련

업무회의 (남양주시, LH공사)

❍ 2011.01. : 실시설계 관련 서울시 교통운영과 협의

❍ 2011.03.~04. : 실시설계(안) 협의(국토해양부, 서울시, 노원구, 경기도,    남양주시, LH공사)

❍ 2011.05.24 : 실시설계(안) 보고회의(서울시, 경기도, 남양주시, LH공사)

- 서울구간 BRT 계획 변경(중앙버스전용차로 → 가로변버스전용차로)

❍ 2011.08.24 : 관계기관 회의(서울시, 노원구, 남양주시, LH공사)

- 가로변버스전용차로 계획(안) 설명 및 협의

❍ 2011.08.~09. : 관계기관 협의(서울시, 노원구, 경기도, 남양주시, 구리시, LH공사)

- 가로변버스전용차로 설계시 반영사항 의견 수렴

❍ 2011.10. : 관계기관 협의(서울시, 서울지방경찰청, 북부도로사업소,

노원구, 경기도, 남양주시, 구리시, LH공사)

- 가로변버스전용차로 실시설계(안) 관계기관 의견 수렴

❍ 2011.10.25 : 관계기관 회의(서울시, 서울지방경찰청, 노원구, 노원경찰서, 경기도, 남양주시, 구리시, LH공사)

- 가로변버스전용차로 실시설계(안) 설명 및 협의(최종보고회)

❍ 2011.12.08 : 설계 자문회의 개최

- 위원장(수도권교통본부 김경한), 부위원장(수도권교통본부 이수각), 위원(서울특별시 마국준, LH공사 최재영, 동부엔지니어링 고종섭, 홍익대학교 추상호, 선진엔지니어링 정세진, 도로교통공단 고광용, 인천시립대학교 배선기)

❍ 2012.02 : 실시설계 완료 용역 준공

❍ 2012.04 : BRT구축 사업시행에 대한 유관기관 회의

- (서울시, 경기도, 노원구, LH공사)

❍ 2012.04 : BRT구축 사업시행에 대한 주민설명회(구리시)

❍ 2012.05 : BRT구축 사업시행에 대한 주민설명회(노원구)

❍ 2012.06∼07 : ‘13년 사업예산 편성협의(서울시)

❍ 2012.06∼08 : 교통안전시설심의(안) 관계기관 사전협의

- BRT 구축사업 협의(서울시 교통운영과, 노원경찰서, 노원구청)

- 석계역 교통처리, BRT 운영노선, 정류장, 횡단보도, 신호등

❍ 2012.10∼11 : 별내역 환승정류소 사업시행 및 디자인쉘터(안) 협의

- 사업시행 : 별내역사 개통관련 LH공사에서 직접시공

- 쉘터 (안) : 남양주시에서 주민의견수렴 등을 통한 디자인(안) 결정 등

❍ 2012.11   : 교통안전시설 심의결과 “원안가결”

❍ 2012.12  : BRT 구축사업 관련 사업시행 협약체결 추진

❍ 2013.01  : ‘13년 도로굴착심의 기간조정 협의 완료

□ 향후 추진현황

❍ 2013. 02 : BRT 구축사업 관련 사업시행 협약체결

❍ 2013. 02 : 사업예산 배정요청(수도권교통본부⇒서울시)

❍ 2013. 02 : 공사, 감리용역 발주

❍ 2013. 04 : 공사, 감리용역 계약 및 착수

❍ 2013. 12 : 화랑로~별내지구간 BRT 개통

□ 기대효과

❍ 서울 북동부지역과 경기도 남양주 지역에 수준 높은 대중교통 서비스 공급

❍ 위치도