「2023년 제11차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  5.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제11차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 5. 18.(목) 15:00~17:30

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 홍지연, 박준, 신기숙, 최승각, 박상섭 위원

- 시 행 사: 서울시설공단 김홍정 차장 등

- 설 계 사: ㈜선트래픽 박병선 부사장 등

ㅇ 심의결과: 조건부 4건

연번	공사명	심의결과
1	월드컵대교 남단 연결로 설치공사(성산대교 남단 월드컵대교 진입램프 분기점)	조건부
2	퇴계로 배수관 정비공사 외 2개소	조건부
3	2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사	조건부
4	2023년 홍제천고가교 교면포장 정비공사(1구간)	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업 시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행하시기 바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치하여 교통안전을 도모해주시기 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 포함

□ 안건별 의견

1. 월드겁대교 남단 연결로 설치공사 - 조건부

□ 권고 의견

ㅇ 노들길 공사 담당기관과 협의하여 계획된 버스 정류장 위치를 횡단보도 후방(far side)로 이전하고 버스베이 형태로 운영하는 방안을 검토하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 안내표지 문안은 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ(1단계) 차로 축소에 따른 노면표시 추가를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 제시된 단면의 수치를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사내용에 비해 공사기간이 과대하므로 공사기간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 본선차로 감소에 따른 병목현상 발생이 예상되므로 공사 이후 야간시간대 진행 차량의 혼란이 없도록 안내체계를 검토해주시기 바람

2. 퇴계로 장기사용 배수관 정비공사 외 2개소 - 조건부

□ 공통 의견

ㅇ 교통소통대책 도면 내 제시된 우회동선에 대해서는 전면 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 점용구간의 단면을 제시해주시기 바람

ㅇ 지정검토위원(박준, 홍지연 위원)에게 자문결과 보완내용 검토받은 후 보완보고서를 제출바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (퇴계로 1 ~ 2단계) 교통소통대책 도면 내 제시된 공사안내표지판의 시인성을 고려하여 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로 3 ~ 4단계) 버스 등 이용차량을 고려하여 완화구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로 7단계) 제시된 교통안내표지판의 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로 10단계) 점용부 전방 도류화 방안 재검토 및 보행자 안전을 고려 임시 보행통로 위치 대안 검토 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사를 위해 퇴계로 점용 시 공사시간을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 교차로 분석결과 표현오기(통행속도→지제도) 수정해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 6단계) 교통소통대책 내 제시된 임시보행통로를 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 7단계) 운전자의 안전을 위해 임시노면표시 추가 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 8 ~ 9단계) 보행공간 확보 및 보행동선을 재검토해주시기 바람

ㅇ (소월로, 전단계) 교통소통대책 도면 내 남산도서관 주차장 이용차량 현황 주차장 점용에 따른 대첵 등을 검토하여주시기 바람

ㅇ (소월로, 19 ~ 22단계) 점용구간 인근 주차장 진·출입 불가 및 버스 운행을 고려하여 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 길안내 서비스 업체 등과 사전 협의를 통해 공사에 따른 교통통제가 사전에 안내 가능하도록 검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 3 ~ 4단계) 공사시간에 대해 재검토해주시고, 교통안전시설물(라바콘 등)을 활용하여 차로 수 확보 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 7단계) 점용시 통제되는 도로를 우회동선을 보완 바람

- 유턴폐지 내용을 지하차도 상부에 배너 형태로 추가 부착

ㅇ (소월로, 9단계) 합류방향에 대해 재검토해주시기 바람

ㅇ (소월로, 27단계) 교통소통대책 단계를 세분화하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (퇴계로, 10 ~ 11단계) 교통소통대책 도면 내 점용면적을 고려하여 단면을 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 5단계) 버스운행 동선을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (퇴계로, 5 ~ 6단계) 장비제원 및 공사규모를 고려하여 점용면적을 재검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 5 ~ 6단계) 점용구간의 단면을 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사 전 관할 경찰서와 사전협의를 해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 7단계) 교통안내표지판 방향을 재검토해주시고 운전자의 안전을 위해 표지판 추가를 검토해주시기 바람

ㅇ (소월로) 양방향 교행 불가 시, 공사 구간 시·종점 신호수 배치하여 교행차량의 소통관리를 철저히 해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (퇴계로, 1 ~ 6단계) 공사시작 시간을 연기하는 방안 검토바람

ㅇ (퇴계로, 1 ~ 2단계) 단계를 통합하여 공사기간 단축을 검토해주시기 바람

ㅇ (퇴계로, 5~6단계) 합류처리 및 우회전 대체경로를 재검토해주시고, 필요 시 중앙차선 해제 등을 검토바람

ㅇ (퇴계로, 13단계) 임시보행동선을 재검토해주시기 바람

ㅇ (소월로, 1~5단계) 공사시간대 남산도서관 주차장 진입 차단방안 사전 협의 시행 필요

ㅇ (소월로, 1단계) 점선부 시점이 곡선부에서 시작되지 않도록 검토바람

ㅇ (소월로, 3단계) 버스운행동선을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (소월로, 5단계) 공사시간대 좌회전 금지를 검토바람

ㅇ (소월로, 7단계) 버스정류장 임시 이전을 검토바람

ㅇ (소월로, 26 ~ 27단계) 케이블카 인근 공사로 인해 교통소통대책 단계를 재검토해주시기 바람(남산케이블카 주차장 공사시간대 운영중단방안 사전 협의 실시)

3. 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사 - 조건부

□ 공통 의견

ㅇ 이면도로 진출입부 점용부를 진출입 회전반경을 고려하여 재검토하고, 차단이 불가피할 경우 우회경로 안내 방안 제시

ㅇ 지정검토위원(박상섭)에게 자문결과 보완내용 검토받은 후 보완보고서를 제출바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1 ~ 2단계) 점용 시점부에는 로봇 신호수 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (9단계) 전방 완화구간을 추가하여주시기 바람

ㅇ (10-1단계) 전방 완화구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (19, 28단계) 공사구간을 나눠서 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

ㅇ (21-1단계) 점용 완화구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (21-2단계) 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (24 ~ 25단계) 용산방향 완화구간 설치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (26단계) 점용 완화구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 굴착 단면을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차량정체 및 차로 변경시 운전자의 혼란이 없도록 본선 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 공사 시 신호수 배치 및 야간 공사로 인한 발광형 표지판을 설치하여 시인성을 확보할 수 있도록 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사구간 전방 점용부는 교통불편 해소를 위해 과도한 점용을 지양하고 우회전 차로로 활용가능한 점용부는 우회전차로로 활용하는 방안을 재검토해주시기 바람

ㅇ (19단계) 마지막 공사일에는 백범로 방면 우회전이 곤란하므로 별도 소통대책 마련

ㅇ (20~21-1단계) 애오개역→공덕오거리 교차로 우회전이 현실적으로 어려운 점을 감안 우회경로 안내 대책 마련마지막 공사일에는 백범로 방면 우회전이 곤란하므로 별도 소통대책 마련

ㅇ (22단계 이후) 유도선 설치 여부를 명확히 표현

ㅇ (28~31단계) 우회전 차로 공사로 인한 사전 우회경로 안내 방안 제시 및 31단계 도류화 재검토(만리재로 합류부)해주시기 바람

- 필요 시 일방통행인 P턴도로를 공사시간대 일시 양방통행후 안전지대를 이용하여 만리재길 진입차로 확보하는 방안 검토 바람

4. 2023년 홍제천고가교 교면포장 정비공사(1구간) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 합류부 완화곡선은 최대한 길게 연장하는 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2-2단계) 로봇통제수 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차량 운행을 위한 임시포장을 할 경우, 완화구간 길이를 충분히 검토하여 안전한 차량운행이 진행될 수 있도록 교통소통대책을 수립하여주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 착공 전 관할 경찰서와 사전 협의를 이행하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도로 곡선부에 점용 시점부 설치를 지양해주시고 교통안내시스템(VMS 등)을 활용하여 서부간선 지하도로를 포함한 인근 간선도로에 사전안내를 철저히 해주시기 바람

ㅇ 합류부 처리는 발표시 제시된 대안을 중심으로 재작성 바람

ㅇ (2-2, 4단계) 공사기간을 검토하여 동시 공사 여부를 검토해주시기 바람

ㅇ (1-2, 2-2, 4, 5단계) 램프차단 공사시행시에는 충분한 시간을 두고 사전 공사 사전 안내를 추가하여 주시기 바람

- 서부간선도로 및 서부간선지하도로 포함하여 사전안내 실시