「2023년 제19차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  8.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제19차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 8. 10.(목) 15:00~17:20

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 박종란, 정현정, 한상민, 신기숙, 김정환 위원

- 설 계 사: ㈜글로벌메타 홍승라 부사장 등

ㅇ 심의결과: 조건부 4건

연번	공사명	심의결과
1	2022년 중앙지사 열수송관 개선 및 추가공사(사평대로)	조건부
2	2023년 강남지사 열수송관공사	조건부
3	2023년 청담대교 외 1개소 포장보수공사	조건부
4	창경궁로 도로공간재편사업	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 이를 구분하여 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석도 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 2022년 중앙지사 열수송관 개선 및 추가공사(사평대로) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (11단계) 교통량을 고려하여 중앙차선 이동을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계) 안전지대 최소화 및 점용공간 축소를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 지하차도 진출부 안전지대 축소방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 진출부 차로 축소 시 진입 전 사전 안내표지 추가 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 반포1교 교차로 좌회전 불가에 따른 우회경로 제시 및 사전안내체계 강화를 검토해주시기 바람

2. 2023년 강남지사 열수송관공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 남부순환로 도곡역 방면 버스정류장 이설을 검토해주시고 이에 따른 홍보대책을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사내용 등을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사시간, 점용시간을 구분하여 제시해주시기 바람

ㅇ 차로 운영 계획에 따라 공사 및 점용시간을 탄력적으로 운용하는 방안을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 안전한 도로주행을 위해 교차로주변 차로폭원 조정을 검토하여 점용구간으로 인한 주행선형이 개선될 수 있도록 재검토 바람

3. 2023년 청담대교 외 1개소 포장보수공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 전면통제에 따른 우회경로 안내 방안을 원거리 대안경로에서부터 추가로 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 2차로를 점용할 경우 차선이 단계적으로 축소될 수 있도록 완화구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (청담대교 본선 A,B) 교차로 전방 차로 축소를 검토해주시고 이에 따른 교차로 운영방안을 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공정을 고려하여 소요 일수별 단계를 세분화하여 제시해주시기 바람

ㅇ 차로 축소에 따른 부착식 노면표지 추가 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 연속류 도로의 특성을 고려하여 도로 축소 정보와 변경되는 도로선형정보가 원거리 전방에서 명확하게 전달될 수 있도록 교통안전시설 보강을 검토해주시기 바람

ㅇ 연결로 접속 및 진출부의 충분한 가·감속차로와 안전휀스, 주행차로 간 측방여유폭이 충분히 확보될 수 있도록 공사구간 면적 최소화를 검토해주시기 바람

ㅇ 전면통제(야간) 교통정보는 네비게이션 등 다양한 매체를 통해 사전 홍보를 강화해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (청담대교 램프 5) 청담대교 본선 A, B를 활용한 우회경로를 재검토해주시기 바람

ㅇ 동일방향 공사구간의 경우 작업팀을 추가투입하여 전체 공사일정을 줄일수 있는 방안을 검토해주시기 바람

4. 창경궁로 도로공간재편사업 - 조건부

<공통의견>

ㅇ 주간점용의 경우, 필수 점용이 아니면 최소화하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 차로 축소 및 차로운영 계획을 고려하여 부착식 노면 표지 추가설치를 검토해주시기 바람

ㅇ 주간 시간대에는 직진 2개 차로 운영가 보장될 수 있도록 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ 본 공사구간 차로수 축소를 감안하여 종로4가 교차로의 남향 접근로 차로수 배분을 재검토하여 주시기 바람

ㅇ 이면도로 진출입의 경우, 교통처리계획에 대한 예시도를 제시해주시기 바람

ㅇ 횡단보도 및 도로 반폭 공사의 경우, 교통소통대책 도면 내 예시도를 첨부해주시기 바람

ㅇ 차로 축소 및 변화에 따른 부착식 노면표지 추가 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-1단계) 교차로 내 직진 차로 수를 고려하여 점용 시점부 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (3-4단계) 버스정류장 이전 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (4-3단계) 점용구간 삭제 및 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (5-4, 6-3단계) 운전자들의 안전한 도로주행 및 차로운영계획을 고려하여 최소도로폭(6.0m이상)을 확보해주시기 바람

ㅇ (7-1단계) 지하철 출입구 점용에 따른 보행자 이동동선 등을 검토해주시기 바람

ㅇ (7-3단계) 좌회전 차로 운영 계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (10-6, 11-8단계) 안전지대(도류화) 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (11-8단계) 점용공간 삭제를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-1단계) 주간점용에 따른 통제수 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (5-4단계) 횡단보도 반폭공사 시 예시도를 추가해주시기 바람

ㅇ (9-2단계) 버스정류장 위치를 재검토해주시기 바람

ㅇ (9-4단계) 버스 이동동선을 고려한 점용공간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (11-3, 4단계) 동서 방면 직진 차량동선을 고려하여 안내표지 및 경광등 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-1단계) 종로 4가 교차로 내 차로운영계획 및 도로점용 계획을 검토해주시고 이를 교통소통대책 도면 내 제시해주시기 바람

ㅇ (1-1단계) 교차로 점용에 따른 접근로 처리방안을 추가로 제시해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 이면도로 점용에 따른 도로 폭을 제시해주시기 바람

ㅇ (4-5단계) 이면도로 내 교통처리계획을 추가로 제시해주시기 바람

ㅇ (6-1단계) 이면도로 내 교통처리계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (10-1 ~ 2단계) 점용 공간 내 노면표시를 삭제해주시기 바람

ㅇ (10-3 ~ 4단계) 이면도로 반폭공사 시 최소 폭(3.0m 이상)을 확보해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-2단계) 장비 제원 등을 고려하여 야간 공사 시 점용공간을 최소화해주시기 바람

ㅇ (2-4단계) 장비 제원 등을 고려하여 점용공간을 최소화해주시기 바람

ㅇ (3-4단계) 버스정류장 이전에 따른 안내표지를 추가해주시기 바람

ㅇ (4-1단계) 직진차로 수를 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (7-2단계) 공정을 고려하여 단계를 세분화해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 직진차로 폭은 최소폭원(3.0m)를 확보해주시기 바람

ㅇ (2-6단계) 차로운영계획에 따른 노면표시 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (9-6단계) 노면표시계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ LED 조명시설을 사용하는 공사단계 시 주/야간 점용지점이 동일한 경우 공사 유무와 관계없이 ‘일몰 후 ~ 일출 전’ 조명시설을 유지하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 야간점용만 하는 경우 주간 시간 차로 및 보도 미점용을 준수하여주시기 바람

ㅇ (7-4 ~ 6단계) 넓은 하위차로 이용 차량들의 2열 운행이 예상되므로 명확한 진행경로 구분을 위한 임시 차선 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ (8-1 ~ 3단계) 2개 차로 폭 불균형으로 인해 차로 분리시설, 라바콘 등을 활용하여 동일 차로폭 조정을 검토해주시기 바람

ㅇ (10-5, 6, 9단계) 우회전 도류화 구간 점용 중 우회 안내표지 설치 보강을 검토해주시기 바람

ㅇ (11-7, 8단계) 서 → 동 방면 양방향 통행이 가능하도록 차로분리시설, 라바콘 등 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 점용이 발생하는 횡단보도 인접지점의 경우 주간시간대에도 보행안전도우미 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ (10-5단계) 단계를 세분화해주시고 도로 차단에 따른 우회경로 사전 안내체계를 검토해주시기 바람

ㅇ (10-7 ~ 8단계) 단계 통합을 검토해주시기 바람