「2023년 제32차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  12.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제32차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 12. 14.(목) 14:30~18:00

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 박 준, 박종란, 강희범, 김영일, 김정환 위원

- 용 역 사: ㈜글로벌메타 문승라 부사장 등

- 발 주 처: 도시기반시설본부 토목부 김종혁 주무관 등

ㅇ 심의결과: 5건(조건부 5건)

연번	공사명	심의결과
1	수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업(연신내역)	조건부
2	동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사	조건부
3	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계	조건부
4	범안로 장기사용 송배수관 정비공사	조건부
5	영동대로 지하공간 복합개발 건설공사	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 주요 공사현장을 파악할 수 있도록 CCTV를 설치하고 교통운영과에서 교통상황 영상을 파악할 수 있도록 조치바람

ㅇ 1년이상 장기공사장에 대해서는 공사착공후 월 1회 교통상황 모니터링을 실시하고 그 결과를 교통운영과에 통보할 것

- 모니터링 결과 통보후 점용구간에 변화가 없는 달의 경우는 모니터링 생략 가능

□ 안건별 의견

1. 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 통일로 내 직진 방향이 우선차로가 될 수 있도록 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 차로운영계획에 맞춰 노면표시를 재검토해주시기 바람

2. 동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 휘문고사거리 인근 점용에 따른 2단 횡단보도 설치 여부를 재검토해주시기 바람

ㅇ (4단계) 휘문고 사거리 인근 도로 선형을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보행자의 안전을 위하여 횡단보도 인근 점용을 지양해주시기 바람

ㅇ (2-1단계) 휘문고 삼거리 인근 점용에 따른 사전안내표지를 강화해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 점용에 따른 도로 선형을 고려하여 통행속도 하향을 검토해주시고 이에 따른 도로안전시설물 보강을 검토해주시기 바람

ㅇ (1단계) 교통소통대책 도면 내 녹지대 철거 단면을 추가해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 보행동선을 추가하여 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 삼성역 인근 설치예정인 작업구의 위치는 교통운영과와 사전협의

ㅇ 삼성역 주변 교통소통대책은 ‘영동대로 지하공간 복합개발 건설공사(22차 변경)’을 반영하여 교통소통대책 도면을 재검토 바람

ㅇ (2-1단계) 대치우성APT삼거리 지장물 이설 점용 단계를 세분화하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (4, 5단계) 휘문고사거리 내 횡단보도 현시를 고려하여 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2-2단계) 일원방면 차로선형을 고려하여 안내체계를 추가해주시기 바람

3. 국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 - 조건부

<공통의견>

ㅇ 1년이상 장기공사임이며, 교통영향평가 변경등 관련계획 수정이 예정되어 있으므로, 관련계획 변경발생시 교통소통대책을 재보고

ㅇ 교통소통대책 자문위원회 보고된 소통대책에 변경이 발생할 경우 교통운영과와 협의후 재보고 대상여부 확인후 시행

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3공구 1단계) 직진불가에 따라 사전안내체계를 강화해주시기 바람

ㅇ (3공구 2단계 ~ ) 도로 점용에 따라 보행동선 단절이 발생하여 이로 인해 보행자 사전안내 표시를 설치해주시기 바람

ㅇ (3공구 5단계) 교통량을 고려하여 탄천동로 내 차로운영체계를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1공구 3단계) 도로설계 기준에 맞게 교통소통대책 도면을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3공구 2, 4단계) 교통소통대책 도면 내 차로운영계획을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (올림픽우회도로 4단계) 설계속도 등을 고려하여 우회도로 선형을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1공구 3단계) 한가람로에서 신천나들목 방향 유턴 차로 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3단계 6단계) 점용공간을 재검토하여 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

4. 범안로 장기사용 송배수관 정비공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4-2단계) 시흥대로 금천구청 → 시흥IC 방면 도류화를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4-2단계) 횡단보도 이용자들의 안전을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (5-1단계) 공사 장비제원 등을 검토하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 범례와 도면 상 표현을 일치시켜주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4-2, 4-3단계) 장비제원 및 공사내용, 교통량을 고려하여 점용면적을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4-8단계) 공사중 차로 폭은 최소 폭(3.0m이상) 확보될 수 있도록 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 구간 점용 시 회전반경을 고려하여 가각정리를 검토해주시기 바람

ㅇ (6-2단계) 독산역 방면 좌회전 반경을 고려하여 정지선 후퇴를 검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 임시시설 설치 표현을 철저히 해주시기 바람

ㅇ (9-1단계) 설계기준을 참고하여 완화곡선을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4-5, 7-3단계) 차량 회전반경을 고려하여 교차로 내 점용 계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사 후 야간시간대 진행 차량 혼란이 발생하지 않도록 사전 안내 체계를 강화하고 교차로 인근 공사 시 모범운전자를 배치하여 차량 및 보행자 안전조치 할 수 있도록 검토해주시기 바람

ㅇ 횡단보도 공사 시 보행자 대기공간을 충분히 확보하고, 보행자의 안전을 고려하여 안전시설물 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 가로구간 내 1일 공사 물량을 표현해주시기 바람

ㅇ (4단계) 교차로 인근 점용 시 교통량을 감안하여 공사 일정을 23시 이후로 시작해주시기 바람

ㅇ (6-1단계) 교통량을 감안하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (8-2단계) 임시 차선 설치에 따른 교통안전시설물 설치를 명확히 표현해주시기 바람

ㅇ (9-1단계) 단계를 세분화하여 상부도로 차로 운영이 가능하도록 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

5. 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 현대백화점 인근 야간 공사 시 차로 운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (24-4 단계) 테헤란로 종합운동장 방면 중앙분리대 위치를 확인하여 도로 점용에 따른 차로 운영계획 및 선형을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 유도선 설치 계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 작업장 상세도를 추가해주시고 작업장 점용시간을 교통소통대책 도면 내 표시해주시기 바람

ㅇ (24-1-2-④ 단계) 공사 일정을 재검토해주시기 바람

ㅇ (24-3-3 단계) 테헤란로 삼성교 방면 점용 시 안전을 위해 안전지대를 활용하여 점용 계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (24-4 단계) 횡단보도 설치계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (24-1-2-③ 단계) 삼성역 교차로 내 정지선 설치 계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ “동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사” 의 교통소통대책과 상충되지 않도록 협의결과 보완보고서에 제시

ㅇ (24-1-1-① 단계) 테헤란로 종합운동장 방면 직진 선형을 재검토해주시기 바람