회 의 자 료

○ 일 시 : 2017. 2. 10.(금) 17:00

○ 장 소 : 기전과 사무실

○ 안 건 :

- 도로터널 방재훈련

- 터널, 지하차도 보행로 비상벨 설치

북부도로사업소

(기전과)

차 례

1.

2017 도로터널 방재훈련 추진

1

2.

도로기전설비 개선사업 현황 등

2

별첨 1 2017년 터널별 방재 합동훈련 일정표

4

별첨 2 터널내 위치번호판 설치 현황

5

별첨 3 터널 및 지하차도 보행로 비상벨 설치현황

6

별첨 4 언론취재 동향보고 8	6

1		2017 도로터널 방재훈련 추진

도로터널의 화재 등 사고발생시 신속한 초기대응, 피난대피, 소화 및 구조활동을 위해 유관기관과의 협업기능을 강화하는 방재훈련을 실시코자 함.

□ 기본방향

○ 화재사고시 대형피해 유발 가능성이 높은 장대터널의 훈련대상을 확대하여 실전위주의 훈련을 실시, 사고 대응능력 제고

○ 관할 소방서·경찰서 등 유관기관과의 사고현장 협업기능 숙달훈련을 통해 유기적 대응체계 강화

□ 훈련개요

○ 근 거 :「도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3」(국토부)

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 11월

○ 대 상 : 총 12개소(연장 1,000m 이상 – [붙임1] 2017년 터널별 방재합동훈련 일정표 참조하여 실시)

터널명	남산1호·2호·3호	위 례	홍지문·정릉·구룡	우면산·용마·관악·봉천·서초
관리기관	서 부	동 부	공 단	민자사업자

○ 주 관 : 도로사업소, 시설관리공단 등 유지관리기관

○ 참여기관 : 소방서, 경찰서, 대형병원 등

○ 내 용 : 화재 등 사고발생을 대비, 매뉴얼에 의한 유기기관 합동훈련 실시

- 터널위치 번호판을 활용한 훈련 및 시민 피난대피 모의훈련(정릉, 위례)

(직원들 수지)

□ 기타사항

○ 자체 방재훈련을 통한 터널 근무자의 반복 숙지훈련 실시

- 대상 및 시기 : 총 20개소(연장 500m 이상), 매월

※ 대 상 : 남산1·2·3호․위례․홍지문․정릉․구룡․북악․구기․호암2․상도․금화․오패산터널, 외발산․서부트럭터미널앞지하차도, 민자 5개소터널

- 방 법 : 화재, 정전 등을 가상하여 상황전파, 방재설비 가동 등 훈련 실시

※ 터널위치 번호판을 활용한 반복 훈련 실시

□ 협조사항

○ 도로터널 방재훈련 세부 추진계획 및 합동훈련 계획 제출

북부도로사업소 5월달 민관합동 훈련 계획

○ 방재훈련 실시 결과 매월 말일까지 제출

2		2017 도로기전설비 개선사업 현황 등

터널, 지하차도 등 도로시설에 설치된 노후 기전설비 개선사업을 조속히 추진하여 안정적 유지관리 및 대시민 서비스 제공

□ 현 황

① 도로기전시설물 일상유지보수

계	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서	비 고
예산액	2,970	223	694	420	425	410	258	- 사고 등 긴급상황시 집행예산 : 540
재배정액	1,451	153	290	250	280	220	258
잔 액	1,519	70	404	170	145	190	0	- 사고 등 긴급상황시 집행예산 : 540

≪예산 재배정 완료사업≫

② 도로시설물 경관조명 유지보수사업 : 500백만원

③ 도로터널 및 지하차도 재난방송중계설비 유지보수 : 168백만원

④ 일원터널외 5개소 노후 조명시설 개선 : 980백만원

⑤ 석촌지하차도외 12개소 노후배수시설 개량 : 947백만원

⑥ 남산2호터널외 7개소 노후 방재설비 보수 : 1,380백만원

⑦ 남산1호터널외 11개소 DMB 중계설비 설치 : 587백만원

≪예산 재배정 진행중 사업≫

⑧ 남산3호터널외 7개소 노후 전력설비 개량 :

- 예 산 : 2,250백만원,  - 배 정 : 1,800백만원, - 잔 액 : 450백만원

※ 예산재배정 미신청 사업소 조속 재배정 신청(방침서 첨부)

⑨ 강변북로 한강대교~성수대교구간 노후 조명시설 개선

- 예 산 : 600백만원,  - 배정신청 : 446백만원

□ 추진일정

○ ‘17. 2월 : 사업발주

○ ‘17.4월말 : 일부 부점등 경관조명 점등 조치완료

○ ‘17.5.15까지 : 석촌지하차도외 12개소 노후배수시설 개량사업 준공

○ ‘17.6월말 : 남산1호터널외 11개소 DMB 중계설비 설치 완료

□ 협조사항

○ 추진일정내 사업추진으로 조기발주 및 사업집행 철저

○ 기전설비별 전체 개량이 필요한 사업은 안전조치 선행 후 별도 단위사업으로 `18년도 예산 반영하여 추진

○ 도로기전시설물 일상유지보수 재배정 신청관련

- 기전시설물 일상유지보수 연간단가에 관급으로 지급하는 별도 물품구매비가 필요한 예산은 재배정신청(재배정신청서 및 구매품의서 첨부)

- 기전설비 등 방재시설에 대한 점검 후 장비교체 등이 필요한 사업은 즉시 예산재배정 신청(재배정신청서, 점검보고서 첨부)

- 유사시 사고 등으로 긴급 보수가 필요한 경우 유선통보 후 추후 예산재배정 신청서 제출(보고서 첨부)

○ 터널, 지하차도 보행로 비상벨 확대 설치 추진

- 설치대상 도로시설물 및 소요예산 조사 후 제출(`17.2.20까지)

(솔샘터널,방학,월계,창동,녹천지하차도)

- 비상벨 설치간격, 제품사양 검토 : 설치간격(50m), 인터폰 기능(삭제)

- 비상벨 운영방안 검토

: 자체 사업소 운영, 사설 경비업체 계약,

: 112종합상황실 연계방안 서울경찰청 협의 등

○ 기 타

- 도로터널 사고 현장조치 매뉴얼 위치번호판 사용 재정비(`17.3.10까지)

- 각종 자료제출 요청 철저 : 터널, 지하차도 관리대장(`17.2.24까지)

- 도로터널 환기휀 세부 가동기준 제출 : 동부․서부․강서도로사업소

※ 도로시설과-15206(2016.12.21.)참조

- 도로터널 사고 및 언론사 등 외부 점검시 상황 즉시보고

- 방재시설 등 기전설비가 항시 양호한 상태를 유지할 수 있도록 점검 등 유지관리 철저 화재출동시,오작동포함 – 배광희 통보

붙임1

□ 2017년 터널별 방재 합동훈련 일정표

월별	터널명	주관기관	유 관 기 관 (현장근무자 숙지)	비 고
3월	홍지문, 정릉	시설관리공단	- 종로‧성북소방서 - 성북‧서대문경찰서 - 고대안암병원 - 종로‧성북보건소	- 2개 터널 통합훈련 - 시민대피 모의훈련
4월	남산1호	서부도로사업소	- 중부소방서 - 중부경찰서 등
5월	용 마	용마터널(주)	- 중랑‧구리소방서 - 중랑‧구리경찰서 - 건대부속병원 등
6월	우면산	우면산인프라웨이(주)	- 서초소방서 - 서초경찰서 - 강남성모병원
7월	남산2호	서부도로사업소	- 중부소방서 - 중부경찰서 등
8월	위 례	동부도로사업소	- 수서‧산성소방서 - 수서‧수정경찰서 - 수정구(성남시)보건소 강남보건소	- 시민대피 모의훈련
9월	구 룡	시설관리공단	- 강남‧서초소방서 - 수서경찰서 - 삼성서울병원 - 강남보건소
10월	남산3호	서부도로사업소	- 중부소방서 - 남대문경찰서 등
11월	관악, 봉천, 서초	강남순환도로(주)	- 구로·관악·방배소방서 - 구로·관악·방배경찰서 등	- 3개 터널 통합훈련

붙임2

□ 터널내 위치번호판 설치 현황

○ 추진배경 : 시민제안에 따른 시장공약사업

○ 번호판 설치 대상 터널 : 연장 200m이상 32개 터널

- 번호판 설치 개소수 : 1,313개소

500mm×780mm	600mm×910mm
1~2차로	3차로 이상

계	공 단	도로사업소	구 청	민 자
32	4	21	2	5

○ 번호판 설치 방법(현장근무자 숙지)

- 설치간격 : 50m 간격

- 번호 부여 방식

· 상행선(서울시청 방향)

: 2,4,6,8,10,......

· 하행선(서울시청 반대방향)

: 1,3,5,7,9,.......

○ 협조사항

- 터널 근무자가 번호판 숫자만으로 정확한 위치를 알수 있도록 내용 주지

붙임3

터널 및 지하차도 보행로 비상벨 설치현황

□ 터널 : 보행로 설치 22개소 중 11개소 설치

No	터널명	준공일	통행 방식	연장(m)	형식	차선	보행로 (개소)	보차도분리벽 (개소)	비상벨 설치여부	관리기관
1	관 악	‘16.5.19	일방	4,990	쌍굴	3/3	-	-		강남순환도로(주)
2	봉 천	‘16.5.19	일방	3,230	“	3/3	-	-		강남순환도로(주)
3	서 초	‘16.5.19	일방	2,620	“	3/3	-	-		강남순환도로(주)
4	용 마	‘14.11.30	일방	2,567	“	2/2	-	-		㈜용마터널
5	우면산	‘03.12.31	일방	1,967/1,900	“	2/2	-	-		우면산인프라웨이(주)
6	홍지문	‘99.6.30	일방	1,890	“	3/3	-	-		시설관리공단
7	위 례	‘14.11.30	일방	1,814	“	2/2	-	-		동부도로사업소 (U-Type포함 2,362m)
8	정 릉	‘99.1.31	일방	1,650	“	3/3	-	-		시설관리공단
9	남산2호	‘70.12.24	대면	1,620	단굴	양방2	-	-		서부도로사업소
10	남산1호	‘70.8.15/ ‘94.2.26	일방	1,530	쌍굴	2/2	-	-		서부도로사업소
11	남산3호	‘78.3.31	일방	1,280	“	2/2	-	-		서부도로사업소
12	구 룡	‘98.4.30	일방	1,180	“	2/2	-	-		시설관리공단
13	북 악	‘71.8.31/ 91.12.7	일방	810	“	2/2	1	-		북부도로사업소
14	구 기	‘80.12.29	일방	610	“	2/2	1	1	설치	북부도로사업소
15	호암2	‘00.12.28	일방	605/ 581	“	2/2	1	-		남부도로사업소 (서울시/안양시, 310/281)
16	상 도	‘82.12.31	일방	566	“	2/2	2	2	설치	남부도로사업소
17	금 화	‘79.8.16	일방	555	“	2/2	1	1		서부도로사업소
18	방 화	‘16.1.31	일방	495	“	2/2	-	-		시설관리공단
19	자하문	‘86.8.30	일방	485	“	2/2	1	1	설치	북부도로사업소
20	동망봉	‘02.12.31	일방	482	“	2/2	-			북부도로사업소
21	화 곡	‘83.8.20	일방	442	“	2/2	2	2	설치	강서도로사업소
22	난 곡	‘92.6.20	일방	360	“	2/2	2	1	설치	남부도로사업소
23	금 호	‘84.2.29	일방	320	“	2/2	2	1	설치	성동도로사업소
24	국사봉	‘04.11.26	일방	310	“	2/2	-	-		남부도로사업소
25	월드컵	‘02.7.30	일방	305	“	2/2	2	-		서부도로사업소
26	삼 청	‘70.12.30	대면	303	단굴	양방2	-	-		북부도로사업소
27	일 원	‘93.12.31	일방	260	쌍굴	2/2	2	2		동부도로사업소
28	무지개	‘05.6.30	대면	255	단굴	양방4	2	-		성동도로사업소
29	매 봉	‘92.7.31	일방	250	“	2/2	2	2	설치	동부도로사업소
30	공 룡	‘94.3.31	일방	220	쌍굴	2/2	1	1	설치	북부도로사업소
31	솔 샘	‘02.4.30	일방	191	“	2/2	2	2		북부도로사업소
32	옥 수	‘84.2.29	일방	165	“	2/2	2	1	설치	성동도로사업소
33	사 직	‘67.5.30/ `80.8.16	일방/대면 /일방	140	삼련	2/양2/2	2	2		북부도로사업소
34	궁 동	‘01.8.31	일방	140	쌍굴	3/3	2	-		강서도로사업소
35	작 동	‘01.8.31	일방	130	“	3/3	2	-		강서도로사업소
36	산 복	‘90.12.20	일방	121	“	2/2	2	1	설치	남부도로사업소
37	호암1	‘00.12.28	일방	90	“	2/2	2	1	설치	남부도로사업소
38	항동생태	‘11.12.30	일방	80	“	3/3	2	-		강서도로사업소
39	범 박	‘11.12.30	일방	40	“	3/3	-	-		강서도로사업소
40	봉 산							-		서부도로사업소

□ 지하차도 : 총 20개소 중 9개소 설치

No.	지하차도명	준공 년도	연장 (m)	보도 설치 개소	방음벽 (격벽) 설치여부	비상벨 설치여부	관리기관
1	석촌지하보차도	1990	190	2	설치		동부
2	잠수교북단지하보차도	1976	223	2	미설치	설치	서부
3	증산지하차도	1991	221	2	설치	설치	서부
4	연희지하보차도	1994	70	1	미설치		서부
5	영등포지하보차도	1974	36	2	설치	설치	남부
6	대방지하보차도	1976	150	2	설치	설치	남부
7	잠수교남측지하보차도	1976	95	2	미설치	설치	남부
8	방학지하차도	1985	40	1	설치		북부
9	월계지하차도	1987	57	2	설치		북부
10	창동지하차도	1992	140	2	설치		북부
11	녹천지하차도	1993	140	1	설치		북부
12	능산길지하보차도	1995	152	2	설치	설치	성동
13	답십리굴다리지하차도	1987	49	2	미설치		성동
14	군자교동측지하차도	1983	66	2	설치		성동
15	신내지하보차도	2000	85	2	설치	설치	성동
16	마장지하보차도	2013	6	2	미설치		성동
17	구로역지하차도	1974	50	2	설치		강서
18	국회앞지하보차도	1977	292	2	설치	설치	강서
19	가마산지하보차도	1996	145	2	설치		강서
20	신도림지하보차도	2005	260	2	설치	설치	강서

붙임4