2014. 4.3.(목) 16:00 ∼

행복4구 추진 TF 회의자료

【행복4구 Plan 1차 T/F】

회의자료

【목      차】

1. ‘행복4구플랜추진단’ 조직 구성·운영계획(행복4구플랜추진단)	1

2. 창동·상계 광역중심 조성 추진(공공개발센터)	4

3. 광운대 역세권(민자역사,물류시설)개발 추진(공공개발센터)	6

4. 동북4구 발전 연구센터(도봉구 요청사항)	8

(참고자료) 행복4구 플랜 사업별 추진현황	9

1		‘행복4구플랜추진단’ 조직·구성 운영계획

《행복4구플랜추진단》

’14.3.27일 서울시「행복4구플랜추진단」조직이 정식 발족됨에 따라 시·자치구간 원활한 업무 협조를 통해 협력적 지역발전이 추진될 수 있도록 많은 협조를 당부 드림.

□ 추진 경과

❍ ’14. 3. 4 : ‘행복4구 플랜 추진계획’ 방침 수립

- 시·자치구, ‘행복4구 플랜 추진반’ 신설·운영

❍ ’14. 3.18 : 행복4구 플랜 추진을 위한 정원 배정(조직담당관)

❍ ’14. 3.27 : 행복4구플랜 전담기구 구성·운영계획 수립

❍ ’14. 3.27 : 행복4구플랜추진단장 보임 발령(도시관리정책관 겸임)

□ 조직 구성  * 향후 조직개편시 전담기구 확대 추진

❍ 인력 구성 : 행복4구플랜추진단장(도시관리정책관 겸임),

도시재생추진반장, 행복4구 추진팀(팀장 및 6급 이하 직원)

❍ 주요 기능

- ‘행복4구 플랜’ 세부 실행계획 수립 총괄

- 지역 현안 및 자원활용 실행·관리 총괄

- 주요 가용지 개발방안 수립 등 총괄

- 행복4구 플랜 추진체계(TF) 운영 등

< 현  행 >

< 조  정 >

								도시계획국장
																		도시관리정책관
								도시계획과장
																				도시재생추진반
도시행정팀			종합계획팀			지역계획팀					지구경관계획팀			광역계획팀			도시계획정보팀						도 시 재생정책팀				생활권계획팀

‣

								도시계획국장
																		도시관리정책관 (행복4구플랜추진단장)
								도시계획과장
																							도시재생추진반
																															`
도시행정팀			종합계획팀			지역계획팀					지구경관계획팀			광역계획팀			도시계획정보팀						도 시 재생정책팀			생활권계획팀				행복 4 구추진팀

□ ‘행복4구 플랜’ 추진체계(TF) 구성·운영 계획

행복4구 플랜 추진체계(T/F)를 구성하여 핵심과제별 실행계획 수립 등 계획의 실효성을 높이고자 함.

❍ ‘행복4구 플랜’ 추진체계(T/F)

(서울시)			행복4구 플랜 추진단장 (도시관리정책관)									동북4구협의체				동북4구연구단
도시재생추진반장				공공개발센터장				관련실·국부서장				(강북구청) (노원구청) (도봉구청) (성북구청) *기획(예산)과장 또는 도시계획과장 (필요시 소관과장)				(전문가 그룹) - 동북4구 연구단 책임 연구원 ※발전과제 발굴 등 필요시
사업총괄팀				기반시설팀				사업지원팀
팀장	행복4구추진팀장			팀장	공공설계팀장			팀장	주무 팀장
반원	행복4구 팀원 ‣실행계획 총괄 ‣추진체계 운영 등			반원	공공설계 팀원 ‣창동·상계 / 광운대 역세권 개발 추진			반원	업무 담당 (28개부서) ‣단위과제별 계획·실행
‣ 필요시 SH공사 직원 별도 파견
* (관련 실·국부서) 경제정책과, 일자리정책과, 교통정책과, 생활환경과, 자원순환과, 한양도성도감과, 문화정책과, 역사문화재과 공원녹지정책과, 체육진흥과, 도로계획과, 역사문화재과, 자연생태과, 문화예술과, 공원조성과, 장애인자립지원과, 하천관리과 서울도서관, 임대주택과, 관광정책과, 창업취업지원과, 학교지원과, 재정비과, 주거재생과, 지구단위계획과, 문화사업과 평생교육과,도시철도공사

❍ 주요 기능

- ‘행복4구 플랜’ 세부 실행계획 수립

- 지역 현안 및 자원활용 실행·관리

- 주요 가용지 개발방안 수립 및 협의

- 7개 핵심과제별 세부 실행계획 수립

- 발전과제에 대한 검토 및 협의․조정 등

❍ 운영주기 : 분기별 1회 (필요시 실무 TF 월 1회 이상 운영)

- 실무 TF 팀장 : 도시재생추진반장(또는 공공개발센터장)

- 실무 TF 팀원 : 관련실국 주무팀장 및 동북4구 협의체 기획예산과장

❍ 운영기간 : ‘행복4구 플랜’ 전담조직 확대개편시 까지

□ 자치구 협조 사항

❍ 자치구 공무원 발령(파견)이 4월 중 있을 예정이니 직원 발령에 차질이 없도록 협조 요청

- 6급 이하 공무원 발령(파견) : 강북,노원,도봉,성북 각 1 명

❍ ‘행복4구 Plan’ 계획에 포함된 사업(별첨자료 참조)은 市 주관부서와  긴밀히 협력하여 사업이 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조 요청

- 자치구와 마을이 주도하여 추진하는 지역현안 사업들은 관련부서에 적극 독려하여 사업성과가 가시화될 수 있도록 적극 협조

작 성 자	도시재생추진반장 : 임창수☎2133-8440 / 도시재생정책팀장 : 양병현☎8442 / 담당 : 한병찬☎8444

2		창동·상계 광역중심 조성 추진

《공공개발센터》

□ 추진 현황

❍ '12.10 ~ '13.12 : 동북4구 발전방안 수립용역 (노원,도봉,성북,강북)

❍ '13. 8  : 창동․상계 광역중심 계획구상 용역 착수 (아키플랜 + 동림피엔디)

❍ '13. 9   : 현장시장실 운영 (노원, 도봉 9.10~12)

❍ '13.10~ : △ 창동․상계 광역중심 계획구상 협의체 운영(8회)

△ 도봉면허시험장 이전 협의체 운영(5회) △ 하나로클럽 개발구상 실무회의(2회)

□ 향후 계획

❍ 부지확보, 선도사업 시행 등 부지별 현안사항 해결을 위한 협의체(TF) 운영

- 부지별 개발구상(안) 구체화를 위한 협의체 운영 및 외부전문가 전문검토(필요시)

‣ (창동차량기지) 이전추진을 위한 시비지원 등 지속협의 (교통정책과, 예산담당관)

‣ (도봉면허시험장) 대체부지 마련을 위한 협의체(TF) 지속운영 (시, 구, 경찰청)

‣ (창동환승주차장)부지축소(50%) 후 선개발 방안 논의 (주차계획과)

‣ (문화체육시설) 체육시설과 통합개발 가능성 및 개발계획 논의 (문화정책과, 구)

‣ (하나로클럽) 개발 공감대 형성 및 개발계획 구체화 논의 (시, 농협)

□ 자치구 협조사항

❍ 도봉면허시험장 이전 및 개발 (노원구)

- 면허시험장 이전관련 유관기관 협의 후 입장정리(경찰청, 의정부시, 자산관리과 등)

‣ 대체부지 위치, 면적, 토지구획 및 비용분담에 관한 사항 등

❍ 창동환승주차장부지 개발(도봉구)

- 푸드뱅크 이전부지(비용, 위치, 면적 등) 관련 유관부서와 협의 후 확보·정리(市 희망복지지원과)

- 환승주차장 부지축소(50%), 선개발 관련(주차면수,규모,운영 등) 유관부서와 협의(市 주차계획과)

❍ 문화체육시설 이전, 문화복합시설 개발에 대한 관련부서 협의·정리(도봉구)

- 체육시설부지 이전 및 민원처리 △문화복합시설 용도 및 규모 등 협의

- 도봉구청과 시 관련부서(市 문화정책과, 체육진흥과)간 충분한 협의를 거쳐 단계별 사업화 방안 등 구체적 의견 정리

작 성 자	공공개발센터장 : 이성창☎2133-8350 / 공공설계팀장 : 이기호☎8360 / 담당 : 장문희☎8368

3		광운대 역세권(민자역사,물류시설)개발 추진

《공공개발센터》

□ 추진 현황

❍ '09. 5          : 도시계획변경 사전협상 대상지 선정(조건부)

❍ '09.12 ~ '11. 2 : 성북․석계 지역종합계획 수립

❍ '11. 4 ~ '11. 6 : 사업제안서 접수 및 관련부서 협의

❍ '11. 9 ~ '12. 3 : 전문가 자문(2회) 및 협상조정협의회(5회)

❍ '13. 4 ～ 6 : 광운대 역세권 활용 관련 전문가 TF 구성․운영

❍ '13. 7. 3.  : 광운대 민자역사 코레일의 협상중단 요청

❍'13.10 ~ '14.3 : 광운대 역세권 개발가이드라인 마련 중

□ 향후 계획

【민자역사】

❍ 코레일 측의 정상화 대책 마련시 사전협상 후속절차 추진 예정

- 교통 부영향 검토 결과 협의(민자사업자 등)

- 정책회의 및 협상조정협의회

- 도시건축공동위원회 소위 자문 등 후속절차 이행

【물류시설】

❍ 물류시설부지 사업자 공모지침 협의(서울시-코레일)

- 개발가이드라인 마련 후 우리시와 코레일간 협의를 통해 공모지침 마련

□ 자치구 협조 사항

❍ 광운대 역세권 개발 협의체 구성·운영에 따른 적극적 참여·협의 필요

	《 TF 구성 》
‣ 정책TF : (서울시) 도시관리정책관, 교통정책과장, 도로계획과장, 공공개발센터장, 도시재생추진반장 (노원구) 기획재정국장, 도시관리국장, 코레일(역세권개발처장) ‣ 실무TF : (서울시) 공공개발센터장, 광역교통팀장, 도로시설계획팀장, 공공설계팀장, 도시재생정책팀장 (노원구) 기획예산과장, 도시관리과장, 코레일(역세권개발처 개발3부장) - 운영기간 : 2014. 4. ~ 6.(3개월간) - 검토내용 : 대상지별 건축계획 기본구상, 기반시설 설치계획, 공공기여 제공 등

작 성 자	공공개발센터장 : 이성창☎2133-8350 / 공공설계팀장 : 이기호☎8360 / 담당 : 강전남☎8361

4		도봉구 요청사항(동북4구 발전 연구센터 설립)

｢행복4구Plan｣이 지속가능한 발전을 위해 서울시와 동북4구가 협력하여 ｢동북4구 발전 연구센터｣ 설립･운영이 필요함

□ 추진경과

❍ 동북4구발전협의회 MOU 체결 : 2012. 5.

❍ 동북4구 발전 연구용역 실시 : 2012. 10. ~ 2013. 12.

❍ 동북4구 발전전략 ｢행복4구Plan｣ 발표 : 2014. 1.

❍ ｢행복4구플랜추진단｣ 구성･운영 : 2014. 3.

□ 설립 개요

❍ 명칭: 가칭｢동북4구발전연구센터｣

❍ 설립･운영 시기

- 연구센터 설립 추진 TF 운영: 2014. 4. ~ 5.

- 연구센터 설립: 2014. 5.

- 예산반영 및 운영: 2015. 1. ~

❍ 설립 위치: 동북4구 지역 내

❍ 규모: 2개팀 (지역발전연구팀, 사업협력팀)

- 지역발전연구팀: 지속적인 지역발전 연구용역 담당

- 사업협력팀: 서울시, 동북4구 자치구와 연계 협력 사무 담당

❍ 운영주체: 서울시-동북4구 공동협력기구

❍ 운영주관: 동북4구발전연구사업단

□ 예산 등 지원

❍ 서울시, 동북4구 50:50 공동 지원

❍ 지역기업, 대학교에서 인력 및 필요자원 지원, 각계 거버넌스 구축

작 성 자	(도봉구청)기획예산과장 : 권태규☎2091-2600 / 기획팀장 : 정홍균☎2601 / 담당 : 최승렬☎2602

참고자료

행복4구 Plan 사업별 추진현황

□ 추진사업(54개 사업)                                             (단위 : 백만원)

자치구		건 명	사업비 (‘14년)	현 진행사항 (’14.3.20기준)	향 후 계 획	비고
1	성북	홍릉벤처벨리 - 종암·월곡 창조문화 벨트조성	147,436 (149)	‣「홍릉단지 발전 실행방안」 연구용역 발주(2.25일)	‣ ‘14.3∼11 : 연구용역 시행 ‣ ‘14.11∼12 : 홍릉발전 기본 계획 수립·추진	경 제 정책과
2	성북	한양도성 북측 성북진경 탐방로 조성	290	‣국·공유지 탐방로(310m) 공사 중(‘14.2∼7)	‣사유지(550m)구간 → ‘한양 도성 마스터플랜’ 용역 결과에 따라 단계별 추진	한 양 도 서 도감과
3	성북	길음동 공공부지 문화복합시설 조성	2,550 (50)	‣‘13.12월 시청자미디어센터 건립 국비 확보 ‣연구용역 시행(‘14.3∼7)	‣연구용역 결과에 따라 시설 건립 추진 협의(‘14.7)	문 화 정책과
4	성북	정릉공영차고지 지화화 및 리모델링	50 (50)	‣차고지 활용방안 학술용역 심의 등 사전 행정절차 이행 중	‣‘14.5.∼9 : 학술용역 시행	문 화 정책과
5	성북	월곡 적환장 시설 지하화	11,517 (200)	‣월곡 적환장 개선 TF팀 구성(‘14.3)	‣적환장 실태조사 및 개선 방안 용역 시행(‘14.4)	생 활 환경과
6	성북	석관동 재활용 선별장 현대화	670 (670)	‣국비 지원 요청 (환경부, ‘14.2)	‣예산배정(국비 및 특별교부금) 및 시설개선 설계용역 시행(‘14.4)	자 원 순환과
7	성북	장위동 김진홍 가옥 보존	525	‣사랑채보수를 위한 설계용역 중(‘14.2∼3)	‣공사 발주 및 착공(‘14.4)	역 사 문화재과
8	성북	북악산 스카이웨이 산책로 정비 및 시민개방	750 (750)	‣설계 중(‘14.3∼10)	‣산책로 정비(‘14.12 완료)	공 원 녹 지 정책과
9	강북	시립 근현대사 기념관 건립	2,800	‣기본설계 용역중 (‘14.3.∼4)	‣행정절차 이행(‘14.4.∼5) - 개발제한구역 행위허가 등 ‣실시설계(‘14.7∼9) 착공(’14.11)	문 화 정책과
10	강북	강북 축구전용구장 건립	-	‣대체부지 물색 중 * 기존 수유동 599번지 일원은 국립공원·비오톱1등급지로 개발 곤란, 경제성이 낮음		체 육 진흥과

자치구		건 명	사업비 (‘14년)	현 진행사항 (’14.3.20기준)	향 후 계 획	비고
11	강북	빨래골길 도로확장 (폭 4∼8m→12m)	21,370 (3,000)	‣단계별 연차사업으로 시행 * 1단계 구간 ‘14.6월 준공 예정(공정 99%)	‣2단계 시급한 구간 우선 착수(‘14.4월)	도 로 계획과
12	강북	북한산 일대 청자가마터 원형복원	-	‣서울시 지정문화재 지정 고시(‘14.3.27) *기념물36호	‣보수·정비계획 수립 시행 -(상반기) 국립공원 협의 등 -(하반기) 보수·정비 시행	역사문화재과
13	강북	우이령길 정비	200 (200)	‣설계중(‘14.3.∼5)	‣‘14.6.∼10 : 우이령길 정비	자 연 생태과
14	강북	제2회 4.19 혁명 국민문화재 개최	550 (300)	‣시비보조금 교부(‘14.2) (3억원) ‣대시민홍보 요청 (메트로 등)	추진완료	문 화 예술과
15	강북	동네뒷산 공원조성 (오동,북한산)	8,678 (3,496)	‣(오동) 보상 중 ‣(북한산) 보상 및 공사중	‣’14.12월 완료 예정	공 원 조성과
16	도봉	창동 문화공연인프라 및 창조산업파크 구축	254	‣‘14.2∼ : 문화체육시설부지 개발 협의체(TF) 운영	‣(‘14년)협의체(TF)운영을 통한 개발계획 협의·정립 ‣(‘15년)지구단위계획 수립	공공개발센터
17	도봉	장애인 종합복지관 건립	5,907 (1,000)	‣도시관리계획 변경(‘14.3)	‣시 보조금 규칙 개정 추진(‘14.6) ‣’14.8∼’15.3 : 설계공모 및 설계 ‣’16.9 준공 및 개관 예정	장애인자 립 지원과
18	도봉	도봉2천 시설물 개선	1,000 (1,000)	‣설계 중(‘14.2∼6)	‣공사 시행(’14.7∼12)	하 천 관리과
19	도봉	유아숲 체험장 조성 (초안산)	317 (317)	‣설계 중(‘14.2∼6)	‣공사 시행(’14.7∼12)	공 원 조성과
20	도봉	도봉 기적의 도서관 건립(어린이전문도서관)	2,740 (1,600)	‣ 건립공사 중 (‘14. 3.18∼’15. 3. 6)	‣준공(‘15. 3) 및 개관(’15. 5)	서 울 도서관
21	도봉	연산군묘 주변 역사공원 조성	12,000 (2,000)	‣공공조경가 현장자문(’13.10) * 역사공원조서 타당	‣ 투융자 심사 예정(’14.5)	공 원 조성과
22	도봉	서울창포원 주변 동북권역 체육공원 조성(체육시설)	500	‣타당성 조사 용역(’14.2) ‣침수저감대책 수립 중	‣(14년 상반기)행정절차 이행 ‣(14 하반기) 설계용역	체 육 진흥과

자치구		건 명	사업비 (’14년)	현 진행사항 (’14.3.20기준)	향 후 계 획	비고
23	도봉	서울 창포원 주변 대전차 방호시설 환경개선	2,820 (35)	‣구조안전 전문가 자문 (’14.3) * 2010년 안전진단결과 ‘E등급’ 시설로 활용 곤란	‣ 장기 검토	문 화 정책과
24	도봉	창동시프트 건립 계획 제고	-	‣대체부지 마련, 다각적 검토	‣대체부지 마련 또는 동북4구 개발계획에 따라 추진	임 대 주택과
25	도봉	정의공주묘 주변 역사문화길 스토리텔링 관광자원화 개발	150 (150)	‣자치구 사업계획서 수립	‣사업검토 후 보조금 교부 ‣스토리텔링 자문단을 통한 지속적 집행 관리	관 광 정책과
26	도봉	둘리뮤지엄 및 어린이도서관 건립	4,928 (1,914)	‣ 건립공사 중 (‘12.12.14 ～ ’14.12. 3)	‣준공(‘14.12.) 및 개관(’15. 3)	서 울 도서관 문 화 정책과
27	노원	창동차량기지(면허시험장)이전·개발	-	‣지역행복생활권 선도사업 신청(’14.2, 지역발전위원회)	‣(’14년)이전 협의 및 선도 부지 계획 구체화 ‣(’15년이후)지구단위계획 수립 등 생활권계획 반영	공공개발센터
28	노원	경춘선 폐선지역 공원 및 자전거길 조성	44,000 (7,657)	‣1단계 착공(’13.10) * 육사삼거리∼공덕2철도건널목 ‣2단계 보완설계(’14.3) * 산업대∼경춘철교	‣1단계 ‘14.12월 완료예정 ‣2단계 공사 발주(‘14.10)	공 원 조성과
29	노원	북부지원·지청 이전부지 활용 및 공공시설 유치(창업센터)	2,614 (1,109)	‣리모델링 공사 중 (‘14.3 ∼ 4.20)	‣준공(‘14.4.20) 및 개관(’14.4.25)	창업취업지원과
30	노원	북부지원·지청 이전부지 활용 및 공공시설 유치(박물관몰)	18,200 (85)	‣전문가 자문(‘14.2∼3) * 건물공간활용, 전시 구성 등 ‣기본계획 수립 완료(‘14.3)	‣ 서울시 및 중앙투자심사 (’14.4∼7)	역사문 화재과
31	노원	초안산 가족캠핑장 조성	11,384 (1,219)	‣토지 보상(’14.1∼6)	‣’15년 이후 보상 및 공사	공 원 조성과
32	노원	서울시립 어울림 스포츠센터 건립	27,139 (500)	‣기본계획 수립 및 서울시 투자 심사(’14.3)	‣중앙 투자심사(’14.8) ‣’14년 하반기 공유재산 관리계획 등 행정절차 이행	체 육 진흥과
33	노원	서울과학관 건립	47,166 (5,804)	‣건축공사 착공(’14.1)	‣설비업체선정(’14.4) ‣전시업체선정(’14.8) ‣공사완료(’16.2)	경 제 정책과
34	노원	둘레길 등을 통한 자연생태문화벨트 조성	3,463 (1,332)	‣둘레길 조성완료(‘13년) ‣불암산자락길 대상지 선정중(‘14.2~4)	‣’14년 불암산자락길 조성 (‘14.4~12)	자 연 생태과

자치구		건 명	사업비 (‘14년)	현 진행사항 (‘14.3.20기준)	향 후 계 획	비고
35	노원	영축산 근린공원 조성	599 (599)	‣공원 조성(진도율 90%)	‣2014. 4. 10. : 공사준공	공 원 조성과
36	노원	노원 신경제전략거점(광운대·석계역)조성	-	‣광운대 역세권 개발가이드 라인 검토(’13.10∼)	‣(’14년) 개발가이드라인 마련 (서울시) 및 물류시설 민간 사업자 공모 추진(코레일)	공공개발센터
37	노원	서울 테크노파크 기업지원 거점 기능 강화	1,500 (600)	‣’13.10월 운영지원사업 지원 (3억원) ‣운영방안 숙의(’14.2)	‣’14.6∼ : 세부 실행계획 수립 추진	경 제 정책과
38	노원	직업체험센터(제2하자센터) 추가 건립	7,100 (30)	‣건립부지 확보(’13.12) ‣학술용역 발주(’13.3)	‣학술용역 시행(’14.4∼6) ‣투자심사 등 사전 행정 절차 진행(’14.8∼11)	학 교 지원과
39	노원	상계재정비촉진사업해제구역 개발대책	260 (130)	‣상계3구역 해제를 위한 주민 공람 중(’14.3∼4.7)	‣(’14년)촉진계획 변경 용역 시행 ‣대안사업 마련 중·장기 추진	재 정 비 과
40	노원	중계본동(백사마을) 주택재개발정비	197,340 (2,202)	‣’13.10 : 주거지보존구역 (임대주택건설) 설계 착수	‣’14.10 : 주거지보존구역 설계 완료	주 거 재생과
41	노원	월계로∼창동길간 도로개설	31,000 (1,500)	‣ 설계 추진중	‣ ’14. 8월 착공 예정	도 로 계획과
42	노원 도봉	동부간선도로 확장 및 지하화	383,500 (60,499)	‣도로 확장 공사 중(공정 %) * (지하화) 하나로마트앞 기 반영 타 구간 사업비 과다로 곤란	‣ 도로 확장 ’15.12월 완료 예정	도 로 계획과
43	강북 도봉	북한산 주변 최고고도지구 완화	-	‣’14.3.19 : 도시계획 심의 ‣’14.3.27 : 변경결정 고시 * 층수 폐지, 높이3m이내 계단탑,엘리 베이터 높이 제외 등	완료	도 시 계획과
44	성북 도봉 노원	중랑천 녹색브랜드화 추진	300 (300)	‣’13.10∼’14.3 : 전문가 자문 및 추진계획 수립	‣’14.4∼5 : 자치구별 자체 사업계획 수립 ‣’14.5∼11 : 사업시행(자치구별)	자 연 생태과
45	공통	도시재생 지원센터 운영	300 (300)	‣센터 설립 검토 중	‣센터 설립, 사례 등 다각도로 검토 추진	도 시 계획과
46	강북 노원 도봉	경전철 연장선 조기 착공 추진	250 (250)	‣도시철도 기본계획 변경안 수립·승인 요청(’13.12) ‣도시철도 기본계획 반영 변경안 검토 중(국토부)	‣(’14년하반기)도시철도 기본계획 확정(국토부) ‣’16년하반기 우이·신설선 완공 예정	교 통 정책과

자치구		건 명	사업비 (‘14년)	현 진행사항 (‘14.3.20기준)	향 후 계 획	비고
47	공통	지역사회와 함께하는 교육우선지구 조성	3,000 (3,000)	‣서울형 교육우선지구 선정 (’14.3.25) * 성북,강북,도봉,노원 포함 11개구 * 지원예산 : 구별 337백만원	‣ 자치구별 사업계획 수립 후 보조금 교부 * 문예체창체 협력교사 지원 * 창의적 테마체험활동비 지원 * 진로직업교육 실시 * 지역 선택적 교육 특화사업	학 교 지원과
48	강북 성북	북한산 체류형 힐링관광단지 조성 (템플스테이 지원 : 화계사,길상사)	200 (200)	‣지원계획 수립(’14.3.7) ‣보조금 신청(3.13∼3.25))	‣보조금 배정 심의회 및 배부(’14.4) ‣실태점검 및 모니터링(∼12)	문 화 예술과
49	강북 성북 도봉	윤극영, 함석현 등 주요인물 가옥보존 활용	891 (256)	(윤극영) ‣’14. 1 : 안전진단 및 실시설계 완료 ‣’14. 3 : 리모델링 공사발주 의뢰 -> 도시기반시설본부	(윤극영) ‣’14. 4 : 리모델링 공사예정 ‣14. 4 : 민간위탁 공모예정 ‣14. 7 : 윤극영가옥 개관예정	문 화 정책과
				(함석헌) ‣’14. 2 : 함석헌가옥 매입 ‣’14. 1～ : 안전진단 및 실시설계중	(함석헌) ‣’14. 6 : 안전진단 및 실시설계 완료 ‣’14. 7 : 리모델링 공사예정 ‣’15. 1 : 개관예정
50	노원 도봉	초안산 문화축제와 연계한 전시관 등 건립	-	‣ 사적지내 토지보상 ‣’13년 문화재청 협의 * 유물정비 사업 우선 추진시 국고보조금 지원	‣석물정비 단계별 추진	역사문화재과
51	공동	경전철 역세권 등 변화여건을 고려한 용도지역 조성	-	‣동북권 생활권계획 수립시 검토	‣생활권계획 수립 내용에 따라 검토 추진	도 시 계획과
52	공통	중랑천 마스터플랜 수립	700 (700)	‣사업시행계획 방침 수립 ‣기술용역타당성 심사 및 용역발주 심의 요청	‣’14.4: 사업수행능력평가 및 기술제안서평가 ‣’14.5: 계약 및 착수	하 천 관리과
53	공통	학교밖 체험활동을 통한 창의·인성 교육지원 (키움버스,특별프로그램 운영)	800 (800)	‣지원계획 수립 중	‣’14.4월중 지원계획 수립 예정 * 지원예산 : 구별 200백만원	학 교 지원과
54	공통	우수 대학자원-지역사회 협력의 지역혁신사업	900 (300)	‣지원사업 계획수립(3.24) -「대학-지역 사회간 협력 지원사업(신규) 추진	‣‘14.3~7 : 세부사업계획수립 ‣‘14.8~10 : 사업공고 및 사업자 선정 ‣‘14.11~ : 사업 시행(1개과제)	경 제 정책과

□ 중장기 검토추진(18개 사업)                     (단위 : 백만원)

자치구		건 명	추 진 사 항	비고
1	노원 도봉	KTX수서 ∼ 의정부 연장	‣’13.12월 국가철도망 반영 요청, 기본계획 변경안 검토중(국토부)	교 통 정책과
2	강북	북서울꿈의숲 적환장 공원 조성시 주차장 설치	‣‘북서울꿈의숲’ 서문 언덕 지하주차장 조성 → 지형 및 안전상 불가 : 대안마련 검토 중	공 원 조성과
3	도봉	GTX-3 노선 및 KTX 동북부 연장시 경원선 지하화	‣GTX 재검토중(국토부), KTX 노선계획 구체화시 경원선 지하화 추진을 정부와 협의 예정	교 통 정책과
4	도봉	둘리뮤지엄과 연계한 만화 거리 조성 지원	‣둘리뮤지엄이 완공되는 ’14.12월 이후 타당성 검토 등을 거쳐 지원여부 결정	문 화 산업과
5	도봉	창포원주변 동북권 체육시설 (청소년체육시설)설치	‣장기검토 * 도봉구와 송석문화재단이 MOU 체결 청소년을 위한 텃밭교실로 운영중	체 육 진흥과
6	노원	상계재정비촉진사업 해제구역 광역도로 확충	‣’14년 상반기 구역해제 일정과 연계, 국토부 협의 시행	도 로 계획과
7	성북	안암동 인원마을 조성지원	‣ 보문역사 벽면 활용 인권조형물 게시(’14년 상반기) ‣ 엘리베이터 설치 대안 검토 중	도시철도공 사
8	공통	전 세대의 평생 학습공간 “모두의 학교 설립”	‣’16년 금천구 시범운영 → ’17년이후 설립 검토	평 생 교육과
9	공통	동북권 청년종합활동공간 설치 운영	‣중장기 검토	일자리 정책과
10	공통	생태문화원 안내체계 개선 시범사업(초록길)	‣중장기 검토	자 연 생태과
11	공통	북한산 국립공원 연계 공원녹지 네트워크 조성	‣중장기 검토	공원녹지정책과
12	공통	동북3개 주요문화재 보유 박물관 연계프로그램 개발	‣중장기 검토	문 화 정책과
13	공통	사회적 경제 통합 시범지구 우선 투자지구 지정	‣중장기 검토	정 제 정책과
14	공통	동북4구 산·관·학과 연계한 사회적경제 아카데미 운영	‣중장기 검토	경 제 정책과
15	공통	중랑천과 주변 공원녹지 네트워크	‣중장기 검토	공원녹지정 책 과
16	공통	창업허브 조성(창동 상계, 광운대 석계 대학 창업허브)	‣중장기 검토	경 제 겅책과
17	강북	우이동 가족캠핑장 조성	‣중장기 검토	공 원 조성과
18	공통	대학-고교 연계 희망나눔 배움터	‣중장기 검토	교육격차해소과