♤ 일시 : 2016. 12. 28(수) 15:00~

♤ 대상 : 자치구 업무담당(토목, 기전)

♤ 장소 : 별관1동 8층 하천관리과 회의실

‘17년 신규사업 발주

자치구 업무담당 회의자료

물순환안전국

(하천관리과)

진  행  순  서

1.	회의 참석자 소개(치수설비팀장)
2.	공사 추진일정 및 설계도서 검토내용 발표(자치구)
	가. 공사 추진일정(예정공정표) 나. 설계도서 검토내용
3.	설계도서 검토내용 조치계획(설계용역사)
	※ 한남(용산구), 잠원(서초구) - ㈜이산 행당(성동구), 염창1(강서구) - ㈜제일엔지니어링 상수․당인(마포구) - 동부엔지니어링(주)
4.	협조사항 전달(치수설비팀장)

2017년 빗물펌프장 증설사업 현황

□ 대 상 : 6개소

○ 한남(용산구), 행당(성동구), 상수․당인(마포구), 염창1(강서구), 잠원(서초)

□ 사업개요

연번	펌프장명	위 치	사업개요	총공사비 (백만원)	‘17년 예산액
1	한남	용산구 한남동 531-3	펌프 증설 1,600㎥/분 건축물 증축 512㎡	9,973	2,800
2	행당	성동구 행당1동 90-4	펌프 증설 600㎥/분 유수지 증설 7,000㎡	13,371	2,198 (3,379별도)
3	상수	마포구 상수동 282	펌프 증설 36㎥/분 건축물 증축 781㎡	6,472	1,900
4	당인	마포구 당인동 1-10	펌프 증설 820㎥/분 건축물 증축 275.3㎡	9,974	2,900
5	염창1	강서구 염창동 217-10	유수지 증설 2,160㎡ 건축물 재축 965.7㎡	6,179	1,750
6	잠원	서초구 잠원동 51-45	침투형트렌치 설치 458m 가동보 설치 1식	635	635

□ 협조사항

○ 공사 추진(조기 발주 및 집행)

- ‘17년 대선 일정 고려 및 지역경기 활성화를 위해 예산 조기집행 필요(상반기 중 60%)

- 12.28일 합동회의 후 1.20일까지 설계도서 보완(설계용역사)

- 설계용역사와 긴밀히 협조하여 설계도서에 누락․오류가 없도록 꼼꼼하게 보완       후, 1.25일까지 계약심사 의뢰

- 계약심사 후 공사 발주하여  ‘17. 3월중 공사 착수 → ’18년 수방기간 전 사업       완료 추진

※ 잠원빗물펌프장 시설개량 사업은 ‘17. 6월중 사업 완료 추진

- 금년중 사전절차 이행 철저(설계도서 검토․보완, 예산 집행계획 수립 등)     - 경기 활성화를 위해 상반기 중 예산 60% 이상 조기집행 추진

- 전면책임감리는 건설기술관리법 시행령 제102조 해당공사 준용(총공사비       200억원 이상)

○ 공정관리

- 수방기간 중 빗물펌프장 운영에 차질 없도록 공정계획 수립 및 공정관리        시행

- 사업 착수 후, 월별 공정 보고, 분기별 공정보고회 개최

- 공사 시행 관련,  주요 사업계획 변경 및 공사비 10% 이상 증․감 발생시에는        하천관리과와 사전 협의 후 시행.

- 펌프장내 주민친화시설 설계 반영된 2개소(상수, 염창1)는 구 관계부서와       협의하여, 상반기 중 친화시설 종류, 규모 등 확정하여 추진

- 정밀안전진단 결과 내진성능 확보가 안된 펌프장 시설물(토목구조물․건축물)은       증설공사와 연계하여 내진보강 추진