나들목 신설 · 개선사업 조정 검토

□ 나들목 사업현황 - 신설(4), 개선(4)

나들목명	위 치	규 모(m)			사업비(억원)	비 고
		폭	높이	길이	총사업비
계	8개소				396(국비251)
망 원	성산대교 북단	5.0	3.5	74.5	50 (국비34)	차량 개선, 보행자 신설
석 촌	송파구 잠실동	5.0	3.3	71.0	66 (국비45)	차량 개선, 보행자 신설
광진교 남단	강동구 천호동	5.0	3.5	76.5	104(국비72)	차량 신설
신 마 포	마포대교 북단	5.0	3.5	51.5	76	보행자 신설
잠 실	잠실동 잠실주공5단지	8.0	3.5	90.5	25 (국비25)	개 선
잠실나루	잠실 장미아파트 인근	8.0	3.5	97.9	25 (국비25)	개 선
풍납토성	서울아산병원 인근	8.0	3.5	93.0	25 (국비25)	개 선
나루터길	천호동 광나루수영장 옆	8.0	3.5	81	25 (국비25)	개 선

□ 추진경위

○ ‘16. 10. 12 : 나들목 신설 기본 및 실시설계 용역 착공 (준공 ’17.6월)

○ ‘16. 10. 19 : 나들목 개선 실시설계 용역 착공 (준공 ’17.5월)

○ ‘17. 4월 현재 용역 공정율 (약 70%)

- 나들목 신설은 비개착공법 선정 등 기본계획 완료후 실시설계 중

- 나들목 개선은 차수벽 철거 및 권양기 형식 결정 후 디자인심의 요청 중

□ 부서별 의견

○ 치 수 과 : 나들목 신설은 치수과에서. 개선은 시설과 및 기반과에서 시행

○ 시 설 과 : 나들목 위치별로 구분하고, 신설공사를 포함하여 담당부서 지정

○ 기 반 과 : 발주 검토중에 있는 신마포 나들목과 인접한 망원나들목 분장 요청