- 「2014 북촌 개방의 날」행사 용역 -

착수보고회 개최

<개 최 개 요〉

❍ 일    시 : 2014. 9. 5(금) 17:30~18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 4층 문화체육정책관 집무실

❍ 참 석 자

- 우리시(4) : 문화체육정책관, 한양도성도감과장, 한옥문화팀장, 담당

- 용역업체(2) : ㈜DH크리에이터 김대호 실장(보고자)

<진 행 순 서〉

- 추진배경 및 행사개요 설명

- ‘2014 북촌개방의 날’ 행사 용역’ 착수보고 (용역업체)

- 기타사항 논의

문화관광디자인본부

(한 양 도 성 도 감)

「2014 북촌 개방의 날」착수보고회 개최

「2014 북촌 개방의 날」행사 추진을 위한 용역계약이 체결됨에 따라 사업수행 계획 및 내용에 대한 착수보고회를 개최함.

□ 추진배경

❍ 북촌 내 우수한 유‧무형 문화자산 및 인적자원을 활용한 다양한 프로그램 운영을 통해 살아있는 도시박물관 북촌의 매력 극대화

❍ 주민 참여로 우리 고유 주거문화 홍보의 장 마련과 한옥체험 프로그램을 연계하여 마을의 문화적 체험 확장

❍ 한옥 오픈하우스 운영 등 ‘열린한옥, 체험한옥’ 프로그램 지속 발굴함으로써 서울을 대표하는 한옥문화체험지로 전승 발전

※ ‘북촌 지속가능성을 위한 발전방안’ 보고 (시장지시사항, ’14.2.28)

□ 행사 개요

❍ 행 사 명 : 2014 「북촌 개방의 날」

※ 주제 : ‘숨은북촌찾기’, 미처 알지 못한 북촌의 진정한 가치를 만나다.

❍ 기    간 : ’14.10.24(금)~10.26(일), 3일간

❍ 장    소 : 북촌(삼청동, 가회동) 전역

❍ 프로그램

□ 과업 개요

❍ 과 업 명 : 「2014 북촌 개방의 날」행사 용역

❍ 과업기간 : ’14년 8월 22일 ~ 11월 10일(50일)

※ 행사운영기간 :  ’14.10.24(금)~10.26(일), 3일간

❍ 사업예산 : 19,600천원(부가세 포함)

❍ 과업내용

구 분	사 업 내 용
기획	• 행사 프로그램 기획 및 종합 매뉴얼 작성
	• 각종 전시, 공연, 강연 등의 참여시설 및 전문가 섭외 관리/운영
	• 각종 보도 및 노출내역, 사진, 동영상 등 자료 및 결과보고서
운영	• 행사장 조성과 행사 운영을 위한 각종 필요물품․장치 준비
	• 원활한 행사운영을 위한 현장운영 및 진행요원, 자원봉사자 모집
	• 안내 및 각종 현장 운영체계 구축(현장 사무국 운영)
홍보	• 행사 리플렛, 배너, 현수막 등 홍보물 제작 및 설치
	• 행사 보도자료 작성 및 배포

❍ 행사 사무국 운영(조직도)

□ 사업추진 단계

□ 예정 공정표

구 분		8월		9월					10월
		4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
행사기획	ㆍ참가대상 리스트 정리 및 공문발송
	ㆍ참가대상 현장 방문 및 프로그램 협의
	ㆍ오픈강연 강연자 섭외
	ㆍ행사 매뉴얼 제작
	ㆍ북촌 홈페이지 행사공지 및 팝업
	ㆍ북촌내 학교 자원봉사 모집
	ㆍ보도자료 작성 및 배포
	ㆍ결과보고서 작성
사무국 운영	ㆍ프로그램 운영 및 현장 촬영											24~26
	ㆍ안내도우미 교육 및 현장 운영											24~26
	ㆍ운영물품 제작 및 운영
설치및 제작물	ㆍ텐트, 테이블, 의자, 음향 임대 계약
	ㆍ담벼락 갤러리 사진 취합
	ㆍ담벼락 갤러리 액자구매, 사진 인화
	ㆍ북촌 방문증 재료 구입
홍보물	ㆍ리플렛, 초청장, 현수막 디자인
	ㆍ리플렛, 초청장 인쇄 및 발송
	ㆍ현수막/배너 제작 및 설치

□ 프로그램별 사업추진현황

❍ 북촌 속의 북촌 : 전시, 한옥오픈하우스

- 전시행사 : 13개소 참여프로그램 협의 ‣ 최소 10개소 확정 목표

전시행사 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	현대 미술관 서울관	- 전시공간 활용 안됨, 강연장 외부 임대 불가 - 북촌 행사 기간중 전시되는 프로그램중 선택하여 북촌 행사 참여 가능 <초자연>전 : 보이지 않는 세계의 이면을 체험 <매트릭스>전 : 수학적 사고와 현상을 다양한 장르로 표현 <이불>전 : 현대자동차 후원으로 설치, 조각 작업 - 내부적으로 행사 참여 방안 논의		❍
2	국립민속박물관	- 공문 이메일 발송(담당자 휴가) - <청바지>전 : 청바지를 통한 근현대 생활사 변화			❍
3	LG 상남 도서관	- 공문 현지 전달(담당자 부재) - 디지털 도서관 내용 설명 및 체험			❍
4	현대카드라이브러리	- 공문 현지 전달(담당자 휴가)			❍
5	금호미술관	- 공문 현지 전달(학예관 부재) - 문화예술 아카데미 강좌			❍
6	학고재	- 공문 현지 전달(대표 부재)			❍
7	세계 장신구 박물관	- 공문 현지 전달(대표 부재) - 자체 운영하는 교육 및 체험프로그램 활용 가능		❍
8	북촌 민예관	- 북촌의 전통주 전시 및 시연			❍
9	갤러리 아트링크	- 공문 현지 전달(대표 부재)			❍
10	선재아트센터	- <늘 거울생활>전 : 우리 사회 전반에 나타나는 가르치는 태도와 방식		❍
11	북촌생활사 박물관	- 콩쥐 이야기 프로그램 및 전시관 오픈	❍
12	북촌 동양문화박물관	- 공예 미술품, 민속품 전시		❍
13	청원산방	- 창호 전시 및 창호 이야기		❍

- 한옥오픈하우스 : 23개소 참여프로그램 협의 ‣최소 18개소 확정 목표

한옥오픈하우스 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	가회동 한씨 가옥	- 가회동 178, (재)연강재단			❍
2	안국동 윤보선가옥	- 안국동 8-1, 영안주식회사			❍
3	가회동 이준구 가옥	- 북촌로 11가길 49			❍
4	가회동 김형태 가옥	- 북촌로 46-3			❍
5	원서동 고희동 가옥	- 창덕궁 5길 38, 내셔널 트러스트			❍
6	가회동 백인제 가옥	- 종로구 가회동 93-1			❍
7	원서동 백홍범 가옥	- 종로구 원서동 9-9, 한샘디자인센터			❍
8	김성수 옛집	- 종로구 계동길 84-6, 동아일보			❍
9	심심헌	- 종로구 가회동 31-29, 내셔널 트러스트			❍
10	담소정	- 종로구 북촌로9길 16-2			❍
11	소리울 게스트하우스	- 종로구 율곡로1길 46			❍
12	가회동 오픈하우스	- 세부 사업중 <골목문화 만들기> 일환으로 토요일 오전10시~오후9시 가옥 오픈 - 2014년 12개소 예정	❍

* 2013년(12개소)에 이어 2014년 마을공동체사업에 선정된 ‘가회동 오픈하우스’와 연계 추진

❍ 오픈 강연 릴레이 : 강연, 탐방

- 강연행사 : 7개소 참여프로그램 협의 ‣최소 5개소 확정 목표

강연행사 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	최정인 (우리빛깔 공방)	- 북촌살이 + 한복과 섬유공예		❍
2	한선희 (영화 프로듀서)	- 북촌과 서촌살이 + 북촌을 무대로 한 영화		❍
3	이계영 (큐레이터)	- 북촌의 옛 사진 + 2013 서울사진축제 북촌사람들		❍
4	장계현 (갤러리 담 관장)	- 북촌을 아끼는 사람들 + 북촌 갤러리		❍
5	김상미 (시인)	- 북촌의 시인들과 시 + 북촌살이		❍
6	황동진 (정독도서관 학예사)	- 북촌15년 + 동화 작가가 본 북촌 + 정독 도서관		❍
7	이모션플랜 (젊은 건축가 그룹)	- 건축가가 본 북촌 + 북촌 기획 행사들		❍

- 탐방행사 : 8개소 참여프로그램 협의 ‣최소 5개소 확정 목표

탐방행사 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	옥선희 (북촌탐닉 저자)	- 북촌살이 15년 + 계동길 탐방	❍
2	전우용 (서울은 깊다 저자)	- 시간을 거슬러 떠나는 북촌여행			❍
3	조정구 (구가건축 대표)	- 도시와 한옥 (현재 조정구 대표님 다리 부상중)		❍
4	내셔널트러스트	- 야당 정치의 피난처, 윤보선 가옥			❍
5	가회동 성당	- 북촌 순례길			❍
6	역사문제 연구소	- 북촌의 근대사적 가치			❍
7	아키반	- 북촌의 특별한 건축양식			❍
8	북촌문화포럼	- 북촌의 현재, 그리고 미래			❍

* 오픈강연 릴레이는 ‘북촌 인문학 강좌’마을공동체사업 계획과 연계 추진

❍ 북촌 잔치 : 공연, 체험

- 공연행사 : 4개소 참여프로그램 협의 ‣최소 3개소 확정 목표

공연행사 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	창우극장	- 10월24일 창작 타악 그룹 ‘리듬 콜라주’ - 북촌행사 모집인원 한하여 입장료 조정 가능	❍
2	씨네코드 선재	- 북촌을 배경으로한 영화상영 가능 (우리선희, 자유의 언덕, 북촌방향) - 배급사 통한 ‘홍상수 감독’섭외 예정	❍
3	공명헌	- 전통 한옥 공연장			❍
4	풍문여고 안동별궁	- 조선시대 마지막 왕과 왕비의 가례재현			❍

- 체험행사 : 16개소 참여프로그램 협의 ‣최소 15개소 확정 목표

체험행사 추진현황
구분	장소 및 단체	협의 내용	진행현황
			참여확정	논의중	제안예정
1	서울무형문화재 교육전시장	- 북촌 무형문화재 작품전시 및 시연		❍
2	선아트 스페이스	- 전통미술 교육 및 체험, 북촌 방문증	❍
3	국악사랑공방	- 전통악기 소개 및 장구장단 체험	❍
4	옷칠공방 칠원	- 전통옷칠 작품 소개 및 체험			❍
5	이소정 한복공방	- 전통한복 작품 소개 및 체험			❍
6	심화숙 한지공방	- 전통한지 작품 소개 및 체험			❍
7	리기태 전통연공방	- 전통연 작품 소개 및 체험			❍
8	지형공방 홍벽헌	- 전통한지 작품 소개 및 체험			❍
9	한상수 자수공방	- 전통자수 작품 소개 및 체험			❍
10	금박연	- 전통금박 작품 소개 및 체험			❍
11	동림매듭공방	- 전통매듭 작품 소개 및 체험			❍
12	우리빛깔공방	- 전통규방공예 작품 소개 및 체험			❍
13	초고공방 고드랫돌	- 전통초고공예 작품 소개 및 체험			❍
14	신중현 옷칠공방	- 전통옻칠 작품 소개 및 체험			❍
15	닥종이인형공방	- 전통제지 작품 소개 및 체험			❍
16	가회민화공방	- 전통민화 작품 소개 및 체험			❍

□ 홍보 계획

❍ TV / 신문

- KBS/MBC/SBS외 기타채널 : 시사교양 및 뉴스 프로그램 행사당일 취재 유치

- 4대 일간지, 스포츠지, 온라인 통신사 등 보도자료 배포

❍ 북촌 홈페이지 등 인터넷 홍보

- 북촌 홈페이지내 행사 내용 공지 및 팝업창 홍보

- 건축, 공예, 문화, 예술 관련 학교 및 카페 활용 행사 내용 홍보

❍ 서울시 홍보매체 활용

- 시민소통 담당관을 통한 SNS 홍보

- 서울시 온라인 뉴스 '서울톡톡' 활용 홍보

□ 향후 중점 추진계획

❍ 총 56개소 이상 단체 및 전문가 참여 유도 목표

- 전시행사(10개소), 한옥오픈하우스(18개소), 강연행사(5개소), 탐방행사(5개소), 공연행사(3개소), 체험행사(15개소)

❍「북촌협의회」주관 프로그램 운영

- 게릴라 장터 : 행사 3일간 북촌주민을 위한 임시 장터 개설(재동초교 내)

- 주민 해설사 : 한옥오픈하우스 관람 및 탐방 시 방문객 안내 및 해설

❍ 자원봉사자 활용

- 북촌내 학생 대상으로 자원봉사를 신청 받아 진행되는 행사프로그램과 연계

- 자원봉사자는 서울시에서 발급하는 자원봉사증, 북촌 기념품 증정

❍ 담벼락 사진전(감고당길 예정)

- 서울시청 소장 북촌 옛사진, 북촌 생활사 박물관 소장 북촌 옛사진, 기타 주민들이 소유하고 있는 북촌 옛사진 취합하여 30여점 준비

❍ 북촌 방문증 발급

- 선아트스페이스 연계, 행사일간 방문객에게 문화센터에서 방문증 발급 진행

□ 추진 시 문제점

- 서울시 위탁한옥과 한옥오픈하우스에 참여하는 일반 주민한옥 외 문화재급 비개방한옥(윤보선 가옥, 김성수 옛집 등)은 업체 측에서 직접섭외 어려움 발생

⇒ 서울시 및 ‘북촌협의회’ 네트워크를 활용한 섭외 협조 요청

- 현재까지 참여 희망기관과의 논의 결과, 길거리 공연 및 한옥 음악회 등의 경우 재능기부 형태의 프로그램 참여는 현실적으로 추진 불가

⇒ 길거리 공연 및 한옥음악회 등 공연 프로그램 축소 운영