예 정 공 정 표									문서 번호 : T-0909				1 1
									REV No. : 0
◆ 작 업 명 : 후염소 인젝터 이설 설치공사 ◆ 작업지시일 : 2016년 10월 01일 ◆ 작업완료일 : 2016년 11월 15일 (46일간)
번호	공 종	시작	완료	작업 일수	2016 년
					10월							11월
					5	10	15	20		25	31	5		10	15
1	작업지시서 접수	10월 01일	10월 01일	1일
2	자재 발주 및 입고	10월 02일	10월 15일	14일
3	인젝터 이설 설치	10월 16일	10월 25일	10일
4	염소 진공 및 가압수배관 교체	10월 21일	10월 30일	10일
5	염소 희석수배관 교체	10월 26일	11월 05일	10일
6	조경석 철거 및 재설치	11월 01일	11월 05일	5일
7	인젝터실 설치	11월 06일	11월 10일	5일
8	현장정리 및 시운전	11월 11일	11월 12일	2일
9	준공 및 기성 처리	11월 13일	11월 15일	3일