휴일 및 야간연장작업 계획(20.01.18토 ~ 20.01.24금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

2. 작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 시간	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
			주요작업내용	인원	장비
01월 18일(토)	주간	본선구간 H1 정거장	- 본선시점 현장정리 - 정거장 외부출입구#1 사토반출 - 정거장 외부출입구#2 2단띠장설치 - 정거장 외부출입구#3 사토반출 - 정거장 외부출입구#4 연결통로 동바리설치 고덕천교A1 A2 마이크로파일 천공 및 근입/ P1, A1 터파기 및 토류판설치 환기구#1 현장정리 환기구#2 차수턱거푸집설치	직 영: 10명 목 수: 18명 철 근: 14명 가시설:23명 토류공: 6명 연수생:23명	카고:3대 앵글크레인:2대 살수차:1대 굴삭기:9대	품질 공사 공사 공무 공사 안전 공사	임형근 남용태 최윤식 김재정 김정삼 권현석 김기은	박찬열
	야간	본선1구간	작업예정사항없음	-	-	-	-	-
01월 19일(일)	주간	본선구간 H1 정거장	- 작업예정사항없음	-	-	공무	조성만	-
	야간	본선1구간	작업예정사항없음	-	-	-	-	-
01월 20일(월)	야간	본선1구간	작업예정사항없음	-	-	-	-	-
01월 21일(화)	야간	본선1구간	작업예정사항없음	-	-	-	-	-
01월 22일(수)	야간	본선1구간	작업예정사항없음	-	-	-	-	-
01월 23일(목)	야간	본선1구간	설연휴	-	-	안전	김현식	-
01월 24일(금)	야간	본선1구간	설연휴	-	-	공무	정금환	-