휴일 작업 계획서(토목)

('17. 11. 25. 토 ~ '17. 11. 26. 일)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

2. 휴일 작업 사유 : 관리공정 계획에 따른 휴일작업 실시

3. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			시공사	감리단
‘17. 11. 25. 토	개착1,2구간	개착1구간 복공 해체 및 되메우기 개착2구간 되메우기 및 보조기층 포설	김태일	김기호
	정거장	정거장 우측 주형보 및 복공 해체 도미노피자 앞 되메우기 및 보조기층 포설	조호영
	개착3구간	D2000 광역상수도 하수박스 곡관부 보호콘크리트 타설 준비 23~24S 좌측 되메우기	조호영
‘17. 11. 26. 일	개착1,2구간	개착1구간 복공 해체 및 되메우기 개착2구간 되메우기 및 보조기층 포설	장정식	채종근
	정거장	정거장 우측 주형보 및 복공 해체 도미노피자 앞 되메우기 및 보조기층 포설	조섭훈
	개착3구간	D2000 광역상수도 하수박스 곡관부 보호콘크리트 타설 준비 23~24S 좌측 되메우기	정준영

4. 휴일작업 근무자 명단

‘17. 11. 25. 토				‘17. 11. 26. 일
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고
시공사	현장소장	김광윤	부장	시공사	공사팀	조섭훈	부장
	공사팀	조호영	과장		공사팀	장정식	과장
	공사팀	김태일	대리		공사팀	정준영	과장
	공무팀	박경삼	대리		설계팀	류영희	부장
	안전팀	김동원	부장		공무팀	한병호	대리
	품질팀	강영원	부장		안전팀	김동원	부장
	관리팀	서재범	사원		품질팀	김창섭	사원
					관리팀	권순덕	부장

5. 장비투입현황

날 짜	구 분	장 비	규 격	등록번호	운전자
‘17. 11. 25. 토 ~ ‘17. 11. 26. 일	본선1,2구간	카고크레인	18T	대전87아4204	남정우
		굴삭기	015	서울02하7404	김희종
		굴삭기	035	경기02너5332	김경훈
	931정거장	고소작업대	-	-	-
		진동롤러	10T	인천09아5130	김주석
		굴삭기	030	충남02로8130	전봉준
		카고크레인	25T	경기90자2549	김민수
	본선3구간	바브켓	-	서울03나7290	김충용
		굴삭기	017	강원02오5498	이정윤
		굴삭기	03W	서울02타7137	신호성