휴일 작업 계획서(토목)

('18. 3. 10. 토 ~ '18. 3. 11. 일)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			시공사	감리단
‘18. 3. 10. 토	개착1,2구간	930S1중앙부 아스팔트 기층 포장	노기현	채종근
	931정거장	변전실(급기)덕트 외벽거푸집 조립 3S 우측 KT M/H 기초 철근조립 2~8S 우측(타이어~포스코) 기층 포장 11~14S 중앙부(삼전사거리 교차로)기층 포장 외부 E/V#1 주변 노상/보조기층 포설 및 다짐	조호영
	개착3구간	931E1환기덕트 측벽부 하수관 D600 부설 24S 시상수도(D2200), 도시가스 받침기둥 거푸집 조립 32~34S 우측 상가진입로 복공 해체	장정식
‘18. 3. 11. 일	현장 전체 휴무		류영희 신정섭

3. 휴일작업 근무자 명단

‘18. 3. 10. 토				‘18. 3. 11.일
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
시공사	공사팀	조호영	과장	시공사	설계팀	류영희	부장
	공사팀	장정식	과장		관리팀	장석규	과장
	공사팀	노기현	대리
	공사팀	김태일	대리
	안전팀	박준현	과장

4. 장비투입현황

날 짜	구 분	장 비	규 격	등록번호	운전자
‘18. 3. 10.토	본선1,2구간	카고크레인	18T	대전87아4204	남정우
		굴삭기	03W	서울02하7246	전용호
		굴삭기	035	경기02너5332	김경훈
		진동롤러	10T	인천09아5130	김주석
	931정거장
		굴삭기	030	충남02로8130	전봉준
	본선3구간	카고크레인	25T	경기90자2549	김민수
		굴삭기	03W	서울02거8725	신호성
	포장공사 (본선1, 정거장)	머캐덤롤러	10T	인천09마5082	권태범
		타이어롤러	8T	인천09-6431	이호준
		탠덤롤러	7T	인천09마5127	정재성
		아스팔트피니셔	2.5m-5m	인천17마5014	박병강
‘18. 3. 11. 일	현장 전체 휴무