	|주|서영엔지니어링 135-851 서울 송파구 잠실동 193-9 성지빌딩 4F Tel : 02-413-2962/4 Fax : 02-413-2965 http://www.seoyeong.co.kr

담당 채종근   Tel : 02-413-2962/5   Fax : 02-413-2965   E-mail : khan640@seoyeong.co.kr

문서번호 : 서영감리제2014-253호 시행일자 : 2014-05-08 수 신 : 서울시도시기반시설본부장 참 조 : 도시철도토목부장	선결			지시
	접수	일자 시간
				결 재 . 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자
	심 사 자			심 사 일

제       목 : 휴일 및 야간작업계획 승인요청

1. 『서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사』와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련 진행중인 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 및 야간작업(‘14.05.10~05.16)승인요청이 있어

3. 공사『일괄입찰 등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)』, 감리『입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)』에 의거 휴일작업계획서를 붙임과 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙      임 : 검토의견서 1부. “끝”

서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 책임감리원

검 토 의 견 서

기술검토건명

휴일 및 야간작업계획 검토

공  사   명

서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사

검 토 기 간

2014.05.08

관 련 문 서

SK건설지918 제2014-342호(2014.05.08)

작  성  자

보조감리원  채 종 근 (인)

확인자

책임감리원  오 진 환  (인)

Ⅰ				검토목적

『서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사』 중 계획 공정율 달성 및 원활한 공정추진을 위하여 시공사에서 제출된 휴일 및 야간작업계획에 대한 감리근무계획을 수립하여 공사관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅱ				검토내용

1. 공사개요.

공 사 명 : 서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사

공사금액 : ￦137,676,997,000원(일천삼백칠십육억칠천육백구십구만칠천원정)

공사기간 : 2010. 02. 19 ~ 2016. 02. 17(착공일로부터 2,190일)

공사위치 : 서울시 송파구 잠실동 아시아선수촌앞 ~ 삼전동 잠실병원앞

총 연 장 : L=1,290.7m(파정 10.758m 포함)

(본선개착 L=627.2m 본선터널 L=498.5m,  정거장 L=165m)

규    모 : 정거장 1개소, 본선환기구 3개소, 집수정 1개소

시공회사 : SK건설외 4개사

감 리 사 : (주)서영엔지니어링외 3개사

2. 관련근거

일괄입찰등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)

감리입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

기술검토건명

휴일 및 야간작업계획 검토

3. 휴일 및 야간작업사유

터널굴착 및 본선 ․ 931정거장 굴착․흙막이, 구조물작업 등의 효율성 및 연속성 확보

계획 공정율 달성 및 원활한 공정추진

4. 근무시간 및 근무자현황

구 분	근무일자	근무시간	근 무 자		비고
			감리단	시공사
휴 일 주․야간작업	‘14.05.10(토)	09:00 ~ 18:00	박해원, 오진환	김광윤소장외 8명
		18:00 ~ 익일08:00	박해원	이준경
	‘14.05.11(일)	09:00 ~ 18:00	박해원, 오진환	류병진부장외 8명
		18:00 ~ 익일08:00	김기호	남상택
평 일 야간작업 (본선터널)	‘14.05.12(월)	18:00 ~ 익일08:00	김기호	남상택
	‘14.05.13(화)	18:00 ~ 익일08:00	김기호	남상택
	‘14.05.14(수)	18:00 ~ 익일08:00	김기호	남상택
	‘14.05.15(목)	18:00 ~ 익일08:00	김기호	남상택
	‘14.05.16(금)	18:00 ~ 익일08:00	김기호	이준경

Ⅲ				검토결과

상기 검토내용과 같이 검토한 바 계획 공정율 달성 및 원활한 공정 추진, 진행 중인 작업의 연속성 확보를 위한 휴일작업시행으로

본선개착 및 터널, 정거장작업장에 대한 공사관리(안전, 품질 등) 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 감리원을 배치(공사관리 2명)하여 감리업무를 수행함이 적정하다 판단되며

공사 『일괄입찰 등의 공사계약특수조건 제19조(휴일 및 야간작업)』 및 감리 『입찰안내서 제6장1절6.2(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)』에 의거 휴일 주․야간작업으로 인해 발생되는 추가비용은 시공사가 부담함이 적정

기  타

붙임 : 1. 휴일 및 야간작업계획 1부.

2. 시공사 공문사본 1부.  “끝”

휴일 작업 계획

(’14.05.10 ~ '14.05.11)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일		작업위치	작업내용	관리자		비고
				시공사	감리단
05월 10일(토)	주간	터널1구간 터널2구간	- 하반굴착 - 상반굴착	이준경	박해원
		개착2구간	- 구조물공	이준경	박해원
		931정거장	- 토공굴착 및 가시설 - 구조물공	민석주	오진환
		개착3구간	- 토공굴착 및 가시설 - 지장물매달기	주성용	오진환
	야간 (12H)	터널2구간	- 터널굴착	이준경	박해원
05월 11일(일)	주간	터널1구간 터널2구간	- 하반굴착 - 상반굴착	류병진	박해원
		개착2구간	- 구조물공	정근수	박해원
		931정거장	- 토공굴착 및 가시설 - 구조물공	조호영	오진환
		개착3구간	- 토공굴착 및 가시설 - 지장물매달기	최성구	오진환
	야간 (12H)	터널2구간	- 터널굴착	남상택	오진환

3. 휴일작업 근무자 명단

2014.05.10.(토)				2014.05.11.(일)
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고
시공사	현장소장	김광윤	부장	시공사	공사팀	류병진	부장
	공사팀	이준경	과장(주,야)		공사팀	남상택	부장(야간)
	공사팀	민석주	과장		공사팀	최성구	부장
	공사팀	이준경	과장		공사팀	조호영	과장
	공사팀	주성용	대리		공사팀	정근수	대리
	공무팀	문상연	과장		공무팀	문상연	과장
	공무팀	임정복	대리		공무팀	신정섭	사원
	공무팀	오승열	대리		안전팀	권준철	과장
	안전팀	인태기	과장		품질팀	구본국	부장
	품질팀	구본국	부장		관리팀	정우석	대리

야간 작업 계획

(2014. 05. 12 ~ 2014. 05. 16)

1. 야간 작업 현황 및 사유

- 터널공사구간의 연속성 확보 및 예산소화 대비 조속한 공정 추진.

- 18:00PM ~ 06:00AM

- 2014년 05월 12일	(월)		- 2014년 05월 13일	(화)
- 2014년 05월 14일	(수)		- 2014년 05월 15일	(목)
- 2014년 05월 16일	(금)

2. 작업 계획일

3. 작업 공종 및 구간

구 간			공 종	근무자		비 고
				시공사	감리단
- 2014년 05월 12일	(월)	터널1구간	- 하반 굴착	남상택	김기호
		터널2구간	- 굴착 및 지보설치 - 수평제트그라우팅
- 2014년 05월 13일	(화)	터널1구간	- 하반 굴착	남상택	김기호
		터널2구간	- 굴착 및 지보설치 - 수평제트그라우팅
- 2014년 05월 14일	(수)	터널1구간	- 하반 굴착	남상택	김기호
		터널2구간	- 굴착 및 지보설치 - 수평제트그라우팅
- 2014년 05월 15일	(목)	터널1구간	- 하반 굴착	남상택	김기호
		터널2구간	- 굴착 및 지보설치 - 수평제트그라우팅
- 2014년 05월 16일	(금)	터널1구간	- 하반 굴착	이준경	김기호
		터널2구간	- 굴착 및 지보설치 - 수평제트그라우팅

4. 근무 인원

- 당사 근무자 및 협력업체 전직원

현장대리인 : 남 상 택  (인)

책임감리원 : 오 진 환  (인)