휴일 작업 계획

1. 사업명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사 2공구

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월 18일(토)	2구역 (5정거장)	외부출입구#1 기초 철근 조립(토목, 15명) 4층 벽체 미장 작업(건축 5명) 지상4층 통신신호실 배관작업(전기 3명) 본선연결송수구 배관(기계 9명)	이찬규 상무	민태순 과장
	4구역 (7정거장)	L06S2환기구 거푸집 설치(토목, 15명) 4층 보 및 슬래브 거푸집 설치(건축 15명) 4층 슬래브 매입배관(전기 3명) 화장실 바닥 코어 작업(기계 9명)	이찬규 상무	신현수 대리
7월 19일(일)	2구역 (5정거장)	4층 벽체 미장 작업(건축 5명) 지상4층 통신신호실 배관작업(전기 3명)	박용대 이사	정원교 대리
	4구역 (7정거장)	4층 보 및 슬래브 거푸집 설치(건축 15명) 4층 슬래브 매입배관(전기 3명)	박용대 이사	신현수 대리

3. 휴일작업 근무자 명단

일자	구분	직 무	성 명	비 고
07.18(토)	감리단	기 계	이찬규 상무
	시공사	현장대리인	신현승 소장
		공사팀	민태순 과장
			신현수 대리
		공무팀	정원교 대리
		안전팀	이병홍 부장
		품질팀	정승호 과장
		관리팀	박경미 주임
		전기팀	최원혁 대리
		기계팀	안영철 소장
07.19(일)	감리단	토 목	박용대 이사
	시공사
		공사팀	신현수 대리
		공무팀	권 진 차장
		안전팀	이병홍 부장
		관리팀	김순기 총무

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

구 분		1구역	2구역	3구역	4구역	비고
연 장(m)		1364.5	700	427	741.8
공사내용 (공정률)		구조물시공 (구조물91%)	구조물시공 (구조물86%)	구조물시공 (구조물86%)	구조물시공 (구조물92%)
평일	작업장
	현 장 책임관	김택균 대리	민태순 과장	신현수 대리	백상관 과장
	감리원	감리원 순회근무
07.18 (토)	작업장
	현 장 책임관		민태순 과장		신현수 대리
	감리원	감리원 순회근무
07.19 (일)	작업장
	현 장 책임관		정원교 대리		신현수 대리
	감리원	감리원 순회근무

범례

작업구간