휴일 작업 계획서

일 자	작 업 내 용	인 원	장 비	비고
1주차 (6일)	○ 중계펌프장 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 자동 제어반 제작 및 설치 ○ 활성탄흡착지 공사 - 케이블트레이 및 동력노출배관 설치 - 외장 판넬 철골 구조물 설치 및 판넬 설치 - 공기배관실 세라믹 방수 ○ 오존접촉지 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 오존주입설비 및 AOP 주입설비 설치 - 북축도로 L형 측구 시공 ○ 배슬러지지 공사 - 2단 벽체 철근 및 거푸집 조립	목수 30명 철근 20명 기계공 5명 전기공 8명 설비공 4명 방수공 8명 배관공 4명 용접공 4명	백호 2대 카고크레인 2대
2주차 (13일)	○ 중계펌프장 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 자동 제어반 제작 및 설치 ○ 활성탄흡착지 공사 - 케이블트레이 및 동력노출배관 설치 - 외장 판넬 철골 구조물 설치 및 판넬 설치 - 공기배관실 세라믹 방수 ○ 오존접촉지 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 오존주입설비 및 AOP 주입설비 설치	목수 30명 철근 20명 기계공 5명 전기공 8명 설비공 4명 방수공 8명 배관공 4명 용접공 4명	백호 2대 카고크레인 2대
3주차 (20일)	○ 중계펌프장 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 자동 제어반 제작 및 설치 - 외장 판넬 철골 구조물 설치 및 판넬 설치 - 펌프실 흡음판 설치 ○ 활성탄흡착지 공사 - 케이블트레이 및 동력노출배관 설치 - 외장 판넬 철골 구조물 설치 및 판넬 설치 ○ 오존접촉지 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 오존주입설비 및 AOP 주입설비 설치	목수 30명 철근 20명 기계공 5명 전기공 8명 설비공 4명 방수공 8명 배관공 4명 용접공 4명	백호 2대 카고크레인 2대
4주차 (25일, 27일)	○ 중계펌프장 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 자동 제어반 제작 및 설치 ○ 활성탄흡착지 공사 - 케이블트레이 및 동력노출배관 설치 ○ 오존접촉지 공사 - 전기 케이블 포설 및 단말 작업 - 오존주입설비 및 AOP 주입설비 설치	목수 30명 철근 20명 기계공 5명 전기공 8명 설비공 4명 방수공 8명 배관공 4명 용접공 4명	백호 2대 카고크레인 2대

현장관리자 휴일 근무계획

일 자	건설사업관리단	시 공 사	비 고
12월 6일 토	보조사업관리자 김준기	윤여경 소장
12월 13일 토	보조사업관리자 김문갑	박용학 차장
12월 20일 토	보조사업관리자 이윤선	서용석 부장
12월 25일 금	보조사업관리자 강석봉	황윤상 현장대리인
12월 27일 토	보조사업관리자 김광원	윤여경 소장

※ 건설사업관리단 일요일 근무는 분야별 주요공종(레미콘 타설,기자재설치 및      검측사항 등)이 발생시에만 근무