휴 일 작 업 계 획

(`15.11.14 ~ `15.11.15)

▣ 현 장 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			관리단	시공사
11월14일(토) (07시~18시)	H1 정거장	- H-말뚝 천공 및 항타 (P구간(C.I.P) 5본/105본/191본) - H-말뚝 연결 및 소운반 (6본/123본/191본) - 교통안전시설물 및 보행자 통로 설치/보완	신춘섭	이무현 김오영 윤대식 신민용 오석균 김준성 변근섭
	환기구 #2	- H-말뚝 천공 및 항타 (HM, HC구간 4본/35본/105본) - H-말뚝 연결 및 소운반(3본/45본/105본) - 교통안전시설물 및 보행자 통로 설치/보완
	환기구 #1	- 안전시설물 이동 설치
	본선 1구간	- 고덕주공3단지 테니스장내 파형강관설치(11/02~12/31)
11월15일(일) (07시~18시)	H1 정거장	- H-말뚝 천공 및 항타 (C,W구간 5본/110본/191본) - H-말뚝 연결 및 소운반 (6본/129본/191본) - 교통안전시설물 및 보행자 통로 설치/보완	류선	박원철 이무현 윤대식 정기욱 황인석 김현구
	환기구 #2	- H-말뚝 천공 및 항타 (HC구간 6/41본/105본) - H-말뚝 연결 및 소운반(3본/48본/105본) - 교통안전시설물 및 보행자 통로 설치/보완
	환기구 #1	- 안전시설물 이동설치
	본선 1구간	- 고덕주공3단지 테니스장내 파형강관설치(11/02~12/31)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.11.14(토)		2015.11.15(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
관리단	건설사업관리기술자	신춘섭	건설사업관리기술자	류선
시공사	공사차장	이무현	공사부장	박원철
	공사과장	김오영	공사차장	이무현
	현장소장 (협력업체)	윤대식	현장소장 (협력업체)	윤대식
	관리부장 (협력업체)	신민용	공사부장 (협력업체)	정기욱
	공무부장 (협력업체)	오석균	공사대리 (협력업체)	황인석
	공사차장 (협력업체)	김준성	공사사원 (협력업체)	김현구
	공사차장 (협력업체)	변근섭
	계	8 명	계	7 명