휴 일 작 업 계 획

(`16.11.12 ~ `16.11.13)

▣ 현 장 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작 업 내 용	관리자
			관리단	시공사
11월 12일(토) (07시~18시)	H1 정거장	- 시점 7단 어스앙카 천공 및 주입 - 종점 토사굴착 및 반출, 좌,우측 토류판설치 - 종점 4,6,7단 보걸이, 띠장, 버팀 제작, 설치 - 종점 대구경 직천공 강관 그라우팅 천공 및 주입	류 선	전병준 최윤식 김동억 이무현 조성만 유호진
	환기구 #1	- 안전시설물 정비
	환기구 #2	- 암 천공 및 발파, 락볼트 천공 - 4단 띠장설치
	고덕천교	- 종점 콘크리트/아스콘깨기 - 시점 오수관(D1,000MM) 물돌리기 - 시점 3단버팀구간 굴착
	본선 1구간	- 토사 반출 및 토류판설치 - 주형보 및 복공판 설치
	H1 정거장	- 시점 7단 어스앙카 천공 및 주입 - 종점 토사굴착 및 반출, 좌,우측 토류판설치 - 종점 4,6,7단 보걸이, 띠장, 버팀 제작, 설치 - 종점 대구경 직천공 강관 그라우팅 천공 및 주입
11월 13일(일) (07시~18시)			박상대	박원철 최윤식 이무현 정금환 노기현 조귀연
	환기구 #1	- 안전시설물 정비
	환기구 #2	- 암 천공 및 발파, 락볼트 천공 - B/K 작업, 4단 띠장 설치
	고덕천교	- 종점 콘크리트/아스콘깨기 - 시점 오수관(D1,000MM) 물돌리기 - 시점 3단버팀구간 굴착
	본선 1구간	- 토사 반출 및 토류판설치 - 주형보 및 복공판 설치

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2016.11.12.(토)		2016.11.13.(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
관리단	건설사업 관리기술자	류 선	건설사업 관리기술자	박상대
시공사	현장소장	전병준	현장대리인	박원철
	품질싱장 (품질관리자)	이무현	품질실장 (품질관리자)	이무현
	공사팀장 (안전관리자)	최윤식	공사팀장 (안전관리자)	최윤식
	공무팀장	김동억	공사대리	노기현
	공사대리	조성만	공무대리	정금환
	공무기사	유호진	공사기사	조귀연
	현장소장 (협력업체)-태웅건설	이정록	공무부장 (협력업체)-태웅건설	신일환
	관리부장 (협력업체)-태웅건설	신민용	공사차장 (협력업체)-태웅건설	최은태
	공사차장 (협력업체)-태웅건설	최은태	공사차장 (협력업체)-태웅건설	조현훈
	공사차장 (협력업체)-태웅건설	오세창	관리대리 (협력업체)-태웅건설	서병철
	공사차장 (협력업체)-태웅건설	이민혁	공사대리 (협력업체)-태웅건설	황인석
	공무부장 (협력업체)-성우지오텍	남윤창	공사과장 (협력업체)-성우지오텍	박현진
	공사부장 (협력업체)-계림하이텍	지황근	공사부장 (협력업체)-계림하이텍	지황근
	계	13 명	계	13 명

작성자 : 현   장   대   리   인    박  원  철    (인)

확인자 : 책임건설사업관리기술자    홍  춘  선    (인)

휴일(야간) 작업 승인 요청서

○ 공 사 명: 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

○ 요청번호: 한신하남 제713-    호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
2016.11.12.(토)~13(일) (07:00~18:00)	휴일	본선시점~ 정거장종점부	시공사	○	시공사
			발주청
			관리단
주요작업내용	- 정거장 시점 7단 어스앙카 천공 및 주입 - 정거장 종점 4,6,7단 보걸이, 띠장, 버팀 제작, 설치 - 정거장 종점 대구경 직천공 강관 그라우팅 천공 및 주입 - 암 천공 및 발파, 락볼트 천공, 4단 띠장 설치 - 고덕천교 오수관(D1,000MM) 물돌리기, 3단버팀구간 굴착 - 시점부 토사 상차 및 주형보 및 보공설치

상기와 같은 휴일(야간) 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2016.11.08.

현장대리인   박 원 철 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 의견이 있을시 신속히 조정 가능 하도록 조치

○ 시공사 요청번호 한신하남 제700-   호(휴일)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	관리단 근무계획			비고
		등 급	성 명	서 명
2016.11.12.(토)~13(일) (07:00~18:00)			류 선(토) 박상대(일)

2016.11. 08.

책임건설사업관리기술자   홍  춘  선  (인)

도시기반시설본부장 귀하