휴일 작업 계획

(’14.07.26~’14.07.27)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
7월26일(토)	937정거장	정거장기초철근조립	김기황	김재범,김영균
	본선터널	본선터널 굴착 (집수정 시,종점터널)		이대경,이대석
7월27일(일)	937정거장	정거장기초철근조립	이용빈	김홍석,이규호
	본선터널	본선터널 굴착 (집수정 시,종점터널)		이종환,이호성

3. 휴일작업 근무자 명단

2014.07.26.(토)				2014.07.27.(일)
구분	직 무	성 명	비고	구분	직 무	성 명	비고
감리단	감리원	김기황		감리단	감리원	이용빈
시공사	관리팀	민금식		시공사	-
	공사팀	김재범 이대경			공사팀	이규호
	안전팀	이대석			안전팀	이호성
	품질팀	-			품질팀	이종환 방응현
	공무팀	김영균			공무팀	김홍석

4. 평일 및 휴일작업에 따른 감리원 근무현황

공구	평 일	현 장 감리원수	휴 일	현 장 감리원수
	주요 작업내용		주요 작업내용
922	1구역 [1,2 터널] - 본선 1,2 터널 굴착	2명	- 1구역 본선 : 1,2터널 굴착 - 2구역 본선 : 3터널 인버트철근 937정거장 : 기초철근조립	1명
	2구역 [937 정거장, 3터널] - 본선3터널 구조물 인버트 철근조립 - 정거장 기초철근조립

■검토의견

937정거장(구조물), 본선터널 굴착 작업의 효율성과 원활한 공정 추진을 위하여 시공사의 휴일작업 시행으로 인한 공사 관리의 공백이 발생치 않도록 감리원의 휴일근무를 시행하여 공사 관리코자하며, 휴일작업으로 인하여 발생되는 추가비용은 입찰 안내서 제3장 계약조건3-3 지하철9호선3단계 일괄공사 계약특수조건 제47조(휴일 및 야간작업)에 따라 원인자(시공사)가 부담하는 조건으로 시행코자 함.

지하철 9호선3단계 922공구

책임감리원   신   정   묵

첨부1 <작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 평일과 같은 수준, 평일보다 적은 경우 감리원 배치 (922공구)

구 분		1구역			2구역		비고
연 장		318	10	425	222	496
공사내용 (공정률)		굴착 L=309 (굴착 97%)	굴착완료 (굴착 100%)	굴착 L=401 (굴착 94%)	굴착 211m본체완료 (굴착 95%) 구조물 기초con’c 74m완료	굴착 496m완료 방수 441m완료 구조물 인버트 철근조립
평 일	작업장
	감리원	2명
평일과 같 은 휴 일 작 업	작업장
	감리원	1명

범례

작업구간