【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2018 – 32 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.05.05. 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 방음벽기초옹벽 벽체 거푸집해체(5+604~5+640 우측) 방음벽기초옹벽 방호난간 거푸집설치(5+640~5+767 우측) - 방음벽 지주 및 방음판 설치 (5+015~5+288 우측) - 종배수관 터파기(6+067~320 우측) - 장암지하차도 하부슬래브 철근가공조립 및 거푸집설치(7B/L) - 수락고가차도 코핑 보강 철근정착(P7) 및 거푸집제작(P6∼P8)

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 05. 02.

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 – 32 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2018.05.05. 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	윤성필		토요일

2018. 05. 02.

책임건설사업관리기술자  윤 성 필 (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2018 – 33 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.05.06 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 방음벽기초옹벽 되메우기 및 층 다짐 (5+604~5+640우측) 방음벽기초옹벽 방호난간 거푸집설치(5+640~5+767 우측) - 방음벽 지주 및 방음판 설치 (5+015~5+288 우측) - 종배수관 터파기(6+067~320 우측) - 장암지하차도 하부슬래브 철근가공조립 및 거푸집설치(7B/L) - 수락고가차도 코핑 보강 철근정착(P7) 및 거푸집제작(P6∼P8)

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 05. 02.

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 – 33 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2018.05.06. 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	이해준		일요일

2018. 05. 02.

책임건설사업관리기술자  윤 성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2018 – 34 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.05.07 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 방음벽기초옹벽 되메우기 및 층 다짐(5+604~5+640 우측) 방음벽기초옹벽 방호난간 거푸집설치(5+640~5+767 우측) - 방음벽 지주 및 방음판 설치 (5+015~5+288 우측) - 장암지하차도 하부슬래브 철근가공조립 및 거푸집설치(7B/L) - 수락고가차도 코핑 보강 철근정착(P7) 및 거푸집제작(P6∼P8)

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 05. 02.

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 – 34 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2018.05.07. 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	이흥균		어린이날 대체 휴무

2018. 05. 02.

책임건설사업관리기술자  윤 성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1∼2구간			3구간				비고
연 장		800m	127m	300m	200m	310m	90m	240m	건축공사
공사내용 (공정률)		아스콘포장 (50%)	방음벽기초 옹벽5+700 (80%)	수락고가보강 방음벽설치 (7%)	방음벽기초 옹벽6+200 (10%)	장암U-TYPE 구조물 시공 (58%)	장암BOX 구조물 시공 (98%)	상도지하차도 방음벽신설 (95%)	전기관리실동 (97%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장			공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 3명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장			공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자			안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간