【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2018 – 50 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.06.30 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 장암지하차도 하부슬래브 콘크리트타설(4B/L) - 수락고가차도 코핑보강 콘크리트타설(P1) 및 철근조립(P2) - 방음벽기초옹벽 철근조립(중앙5+500~680) (중앙6+080~280)

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 06 27.

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 – 50 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2018.06.30 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	이흥균		토요일

2018. 06. 27

책임건설사업관리기술자  윤 성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2018 – 51 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.07.01 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 수락고가차도 코핑보강 철근조립(P2) - 방음벽기초옹벽 철근조립(중앙5+500~680) (중앙6+080~280)

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018. 06. 27.

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2018 – 51 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2018.07.01. 09:00～18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-	-	일요일

2018. 06. 27.

책임건설사업관리기술자  윤 성 필  (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1∼2구간			3구간					비고
연 장		267m	752m	300m	500m	273m	310m	90m	240m	건축공사
공사내용 (공정률)		방음벽기초 옹벽(시점)수락고가 전 (90%)	터널형 방음벽설치 (시점) (3%)	수락고가 보강 지붕형 방음벽설치 (10%)	방음벽기초 옹벽(종점)수락고가 후 (67%)	반 터널형 방음벽설치 (종점) (0%)	장암지하차도 U-TYPE 구조물 시공 (70%)	장암BOX 구조물 시공 (100%)	상도 지하차도 방음벽신설 (95%)	전기관리실동 (98%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장			공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 3명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장			공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자			안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간