휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)

◦ 요청번호 : 2015 - 02호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2015.04.04. 시 간 : 07:00～17:30	휴일	터널, 연직갱	시공사	O
			발주청
			감리사
작업일 : 2015.04.05. 시 간 : 07:00～17:30	휴일	터널, 연직갱	시공사	O
			발주청
			감리사
작업내용	■ 연직갱 부지 조성 -연직갱 부지 절토부 법면 절취(04.04.~04.05.)

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2015.  04.  01 .

현장대리인  최  성  욱 (인)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2015- 02호 (휴일)작업요청에 대하여 감리 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2015.04.04. 시 간 : 07:00～17:30 작업일 : 2015.04.05. 시 간 : 07:00～17:30	-장비 신호수 배치 및 전도에 유의 시공 -단순작업으로 인한 감리원 근무 미 시행 예정

2015.  04.  01 .

책임감리원  금 동 욱 (인)

도시기반시설본부장 귀하

휴일작업 현황

□ 터널건설과                                              (2015.04.01)

연번	공 사 명	휴일작업 승인내용		승인시기	비고(토/일) (감리근무자)
		지난주(‘15. 3.28～3.29)	금주(‘15. 4.04～ 4.05)
	신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)	· 작업일 : 3. 28(토), 29(일) · 작업내용 : - 진입로 가복공판 설치 - 세륜기 설치 작업 · 시공 / 감리 : 3 / 0 명	· 작업일 : 4. 04(토), 05(일) · 작업내용 : - 연직갱 부지 절토부 법면 절취 · 시공 / 감리 : 3 / 0 명	매주 승인	단순작업 / 단순작업

[터널건설과]

금주 실적【2015. 3. 30 ~ 2015. 4. 05】

1. 신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)

◦ 신림봉천터널 대인용 피난연결통로

- 라이닝 철근 조립

- 공동구 기초 거푸집조립 및 콘크리트 타설

◦ 연직갱 부지 조성공사

- 연직갱 부지 벌목 및 벌개제근, 절토부 법면 절취

- 진입로 가복공판 설치

․ 시공기간 : 2015. 3. 30.(월)~ 4. 05.(일)

․ 참여인원 : 시공사 업무담당, 감리단, 현장대리인 등

․ 동원장비 : 크레인 25톤 1대,  백호(06W): 1대

◦ 향후계획

- 대인용 피난연결통로 라이닝 작업 및 연직갱 부지 조성공사

다음주 계획【2015. 4. 06 ~ 2015. 4. 12】

1. 신림-봉천터널 도로건설공사(2공구)

◦ 신림봉천터널 대인용 피난연결통로

- 라이닝 콘크리트 타설

- 공동구 기초 거푸집조립 및 콘크리트 타설

◦ 연직갱 부지 조성공사

- 연직갱 부지 절토부 법면 절취 및 정지작업

- 진입로 가복공판 설치

․ 시공기간 : 2015. 4. 06.(월)~ 4. 12.(일)

․ 참여인원 : 시공사 업무담당, 감리단, 현장대리인 등

․ 동원장비 : 크레인 25톤 1대,  백호(06W): 1대

◦ 향후계획

- 대인용 피난연결통로 라이닝 작업 및 연직갱 부지 조성공사