【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2016 – 23 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2016.4.02 시 간 : 09:00～ 18:00	휴 일	본선구간	시공사	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 캔틸레버옹벽 슬래브 철근조립(12B/L) 및 거푸집설치(13B/L) - 수락고가교각 코핑 거푸집설치(P1,P2) - 장암지하차도 하부슬래브 철근거푸집설치(10B/L) 집수정구간 시트파일 이음용접(12B/L) - 방음벽기초 보강구간 앵커 핀 타정 및 철근거푸집 설치

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2016. 03. 29

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2016 – 23 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2016.04.02 시 간 : 09:00～18:00	단순작업으로 감리근무 없음	-	-	-	토요일

2016. 03. 29

책임건설사업관리기술자  윤 성 필 (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2016 – 24 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2016.04.03 시 간 : 09:00～18:00	휴 일	본선구간	시공사	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 캔틸레버옹벽 슬래브 철근조립(12B/L) 및 거푸집설치(13B/L) - 수락고가교각 코핑 거푸집설치(P1,P2) - 장암지하차도 하부슬래브 철근거푸집설치(10B/L) 집수정구간 시트파일 이음용접(12B/L) - 방음벽기초 보강구간 앵커 핀 타정 및 철근거푸집 설치

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2016. 03. 29

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2016 – 24 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2016.04.03 시 간 : 09:00～18:00	단순작업으로 감리근무 없음	-	-	-	일요일

2016. 03. 29

책임건설사업관리기술자  윤  성 필 (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1구간	2구간			3구간			비고
연 장		458m	200m		398m	160m	90m	P.F.빔 제작장	건축공사
공사내용 (공정률)		아스콘포장 (100%)	캔틸레버옹벽 (70%)		수락고가 및 진입램프 시공 (32%)	U-TYPE구간 구조물 시공 (95%)	BOX구간 구조물 시공 (65%)	P. F. Beam제작 (100%)	전기관리실동 (83%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장			공사 과장 협력업체 소장	공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 3명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장				공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자				안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간