【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2017 – 40호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2017.05.27 시 간 : 09:00～ 18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청	-
			감리사
작업내용	- 수락고가하부 A1~P1 호안기초 벽체 콘크리트 타설 - VMS 서울방향 기초타설(1차) - 방음벽기초보강(중분대) 철근정착 및 철근조립작업 -STA.5+400 ~ 5+580(의정부방향) 방음벽 기초 보강구간 띠장설치 및 폐기물깨기

상기와 같이 휴일작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2017.05.24

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2017 – 40호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2017. 05.27 09:00∼18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	오종철		토요일

2017. 05.24

책임건설사업관리기술자  윤 성 필(인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2017 – 41호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2017.05.28 시 간 : 09:00～ 18:00	휴 일	본선구간	시공사	○
			발주청	-
			감리사
작업내용	- 방음벽기초보강(중분대) 철근정착 및 철근조립작업 - STA.5+400 ~ 5+580(의정부 방향) 방음벽 기초보강구간 띠장설치 및 폐기물깨기

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2017.05.24

현장대리인  여 운 무 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2017 – 41호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
2017.05.20 09:00∼18:00	단순공종으로 감리근무 없음	-	-	-	일요일

2017.05.24

책임건설사업관리기술자  윤  성 필 (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1구간	2구간				3구간		비고
연 장		458m		200m		398m	90m	160m
공사내용 (공정률)		아스콘포장 (100%)		캔틸레버옹벽 (100%)		동부간선도로 진입램프 철거 (100%)	가시설 띠장설치 및 용접, 토공작업 (85%)	가시설 띠장설치 및 용접, 토공작업 (100%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장				공사 과장 협력업체 소장	공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 2명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장					공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자					안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간