【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2015 – 97 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2015.12.12 시 간 : 09:00～18:00	휴일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 장암지하차도 22B/L 벽체 거푸집설치 - 장암지하차도 box구간 단부보강철근용접 / 11,14B/L 기초철근조립 - 수락고가차도 P3 기초거푸집 조립 - 수락고가차도 P6,P7,P8 기초철근 조립 및 거푸집조립 - 캔틸레버옹벽 12, 14B/L 기초콘크리트타설

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2015. 12. 08

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2015 – 97 호  휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2015.12.12 시 간 : 09:00～18:00	공정계획에 의한 감리휴일근무	감리사	이흥균		토요일

2015. 12. 08

책임건설사업관리기술자  김 구 환 (인)

도시기반시설본부장 귀하

【별첨서식 #1】

휴일(야간) 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(3공구)

◦ 요청번호 : 2015 – 98 호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2015.12.13 시 간 : 09:00～ 18:00	휴 일	본선구간	시공사	○	○
			발주청
			감리사
작업내용	- 수락고가차도 P3 기초거푸집 조립 - 수락고가차도 P6,P7,P8 기초철근 조립 및 거푸집조립

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2015. 12. 08

현장대리인  권 송 구 (인)

※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

---------------------------------------------------------------------------------------------

◦ 시공사 요청번호 2015 – 98 호 휴일작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및 근무

계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명
작업일 : 2015.12.13 시 간 : 09:00～18:00	단순공정으로 감리근무 없음	-	-	-	일요일

2015. 12. 08

책임건설사업관리기술자  김 구 환 (인)

도시기반시설본부장 귀하

<작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황>

- 작업장 개소가 많은 경우 (동부간선도로확장공사 3공구)

구 분		1구간	2구간				3구간		비고
연 장		458m		200m		398m	160m	90m
공사내용 (공정률)		아스콘포장 (35%)		캔틸레버옹벽 (30%)		수락고가 및 진입램프 시공 (15%)	U-TYPE구간 구조물 시공 (90%)	BOX구간 구조물 시공 (57%)
평일	작업장
	현 장 책임관	공사 과장 협력업체 소장				공사 과장 협력업체 소장	공사 과장 협력업체 소장
	감리원	감리원 2명 순회근무
휴일	작업장
	현 장 책임관	공사과장 협력업체 소장					공사과장 협력업체 소장
	안 전	안전관리자					안전관리자
	감리원	필요시 감리원 1명 순회근무

범례

작업구간