(주)포스코건설 (주)동일기술공사	건설사업관리단 검토의견서	2019. 12.
공 사 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	월드컵대교 휴일(야간)작업 승인요청 검토보고(12월 4주차)

▢ 검토목적

월드컵대교 휴일(야근)작업 승인 요청건에 대하여 작업의 필요성과 휴일(야간) 근무 및 대가지급에 대하여 관련법에 의거 적정성 검토.

▢ 검토근거

▶ 공사계약일반조건 제18조(휴일 및 야간작업)

(계약담당 공무원의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없음)

▶ 서울특별시 도시기반시설본부 휴일작업 현장관리 개선방안(2013.11.14)

▢ 검토내용

▶ 휴일작업 기간 : 2019. 12. 27일(토), 12. 28일(일) (2일간)

▶ 야간작업 기간 : 2019. 12. 27일(토)～2020. 01. 03일(금)  (7일간, 필요시)

▶ 휴일(야간) 작업사유

● 남단 IC 구획 및 토공정리 작업, Ramp-A 강교 가설을 위한 기초 및 구조물작업 강남방향 Ramp 현장타설말뚝시공 등 남단 IC 적기 시공을 통한 금차 공사량 소화 필요

● 휴일작업 불가시 월간 약 8일(주2일, 월평균 4주)의 추가 공사일수 발생으로 해당

공정 지연발생 우려

▶ 야간작업사유

● 남단 Ramp 구간 현장타설말뚝 적기 시공을 통해 연차공사 물량소화 필요

▶ 휴일 및 야간작업 공종

1. 인원투입 현황

일자	번호	계	작업위치	직종 및 인원		작 업 내 용	비고
				직종	인원
12월 28일 (토)	1	8명	북단IC 및 강교조립장	일반공 도장공	5명 3명	북단R-D 거푸집 해체 남단접속교, R-A 도장	주간
	2	12명	남단R-A	심초공 일반공	7명 5명	R-A P2-1 육상부 심초 기초그라우팅
	1	40명	남단IC	일반공	40명	MP15 철근 거푸집조립 MP17 철근 거푸집조립 공사 6구역 GT매트 설치 도수관로 가시설 설치 현장타설말뚝 RCD굴착	주간
12월 29일 (일)	1	8명	북단IC 및 강교조립장	일반공 도장공	5명 3명	북단R-D 거푸집 해체 남단접속교, R-A 도장	주간
	2	12명	남단R-A	심초공 일반공	7명 5명	R-A P2-1 육상부 심초 기초그라우팅
	1	40명	남단IC	일반공	40명	MP15 철근 거푸집조립 MP17 철근 거푸집조립 공사 6구역 GT매트 설치 도수관로 가시설 설치 현장타설말뚝 RCD굴착	주간
12월 28일 ~ 01.03일 (토~금)	1	5명	남단IC	RCD공	5명	현장타설말뚝 RCD 굴착	야간

2. 장비투입 현황

일자	번호	계	작업위치	장비명 및 투입대수		작 업 내 용	비고
				장비명	대수
12월 28일 (토)	1	1대	북단IC 및 강교조립장	카고크레인	1대	자재 인양작업	주간
	2	5대	남단 R-A	카고크레인기중기 굴삭기 천공기	1대 2대 1대 1대	자재 양중작업 심초 굴착작업	주간
	3	9대	남단IC	굴삭기 크레인 RCD	5대 3대 1SET	가시설굴착, 토공정리 자재운반 현장타설말뚝 RCD 가시설굴착	주간
12월 29일 (일)	1	1대	북단IC 및 강교조립장	카고크레인	1대	자재 인양작업	주간
	2	5대	남단 R-A	카고크레인기중기 굴삭기 천공기	1대 2대 1대 1대	자재 양중작업 심초 굴착작업	주간
	3	9대	남단IC	굴삭기 크레인 RCD	5대 3대 1SET	가시설굴착, 토공정리 자재운반 현장타설말뚝 RCD 가시설굴착	주간
12월 28일 ~ 01.03일 (토~금)	1	1대	남단IC	RCD	1SET	남단 현장타설말뚝 RCD 굴착	야간

▢ 휴일(야간)작업 및 근무계획

▶ 휴일(야간)작업 : 국경일, 주말 및 야간, 평일(야간)

● 평일과 동일한 수준의 작업으로 건설사업관리기술인 입회업무 발생

▶ 휴일(야간)작업계획 : 붙임자료

▶ 휴일 및 야간작업 일정 및 공정은 우천 또는 현장여건에 의거 변경가능

▶ 건설사업관리단 및 시공사 직원은 주 52시간 이내에 근무할 수 있도록 근무계획 조정

단, 협력업체는 300인 미만 사업자로 주68시간 범위 내에서 근무

(상시 50명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업장은 2020년 1월 1일부터 시행)

▢ 휴일(야간)근무 감리대가 지급

▶ 휴일(야간)비용은 작업시행 귀책사유에 따라 지급(본부장 방침 토목부-3059, 2010.03.08)

● 시공사 귀책 : 시공사에서 건설사업관리기술인 휴일근무 대가 지급

▢ 검토의견

월드컵대교 2019년 12월 4주차[12월 28일(토) ~ 01월 03일(금) 7일간)] 휴일 및 야간작업사항은 가)휴일작업은 ①북단R-D 거푸집해체, 남단접속교, R-A도장 ②남단 Ramp-A교 P2-1 심초 기초그라우팅 ③MP15 철근,거푸집조립, MP17 철근 거푸집조립, 공사 6구역 GT매트 설치, 도수관로 가시설 설치, 남단 현장타설말뚝 RCD굴착 나)평일 야간작업은 현장여건에 의거 필요시 남단 현장타설말뚝 RCD굴착 공사로 당 공정에 투입되는 근로자의 근무를 건설사업관리기술인 및 시공사 직원은 주당 52시간, 협력업체 근로자는 주당 68시간을 초과하지 않는 조건으로, 작업의 연속성, 11차공사의 적기준공, 작업기간의 단축을 통한 한강공원 시민불편 최소화를 위해 안전, 품질, 시공관리를 철저히 하여 평일과  같이 동일하게 현장을 관리하면 문제가 없을 것으로 사료됨.