휴일 및 야간 작업계획

(`15.03.28 ~ `15.04.03)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월28일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 기초 철근 조립	백인기	이기상 김현규
	932 정거장	- 7Span B1 2단 벽체 외벽방수 - 9Span B1 #2 연결통로 거푸집설치 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 11,12Span 상수도 지장물 복구 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토공작업		이태신 박종현
	933 정거장	- 9Span 2단 벽체 동바리 및 거푸집설치 - 7Span 1단 벽체 철근조립 - 정화조 중간 관리층 외벽 거푸집해체 - #1,2,5,6 출입구 토공작업/ 기존 구조물 깨기	양희석	서성일 박진정
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 그라우팅 작업		조광영 류주열 박지현(야) 이원욱(야)
03월29일(일) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 기초 철근 조립	김완수	이기상 정순길
	932 정거장	- 7Span B1 2단 벽체 외벽방수 - 9Span B1 #2 연결통로 거푸집설치 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 11,12Span 상수도 지장물 복구 철근조립 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 토공작업		이태신 이현탁
	933 정거장	- 9Span 2단 벽체 동바리 및 거푸집설치 - 7Span 1단 벽체 철근조립 - 정화조 중간 관리층 외벽 거푸집해체 - #1,2,5,6 출입구 토공작업/ 기존 구조물 깨기	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 그라우팅 작업		조광영 권우형 홍동우(야) 박지웅(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.03.28(토)		2015.03.29(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	백인기	책임감리원	김완수
	보조감리원	양희석	보조감리원	임승만
시공사	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	이태신
	공사대리	박종현	공사대리	이기상
	공사대리	이기상	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규	공사대리	김현규
	공사과장	서성일	공사사원	정순길
	공사대리	박진정	공사과장	박민주
	공사주임	임희승	공사대리	김세현
	터널차장	조광영	공사주임	이윤구
	터널과장	류주열	공사사원	최동선
	터널과장	김준철	터널차장	조광영
	터널과장	최승부	터널과장	권우형
	터널대리	박지현	터널과장	김준철
	터널대리	이원욱	터널대리	김정연
	터널기능마스터	김양환	터널대리	홍동우
	터널기능마스터	문동식	터널주임	박지웅
	터널반장	이성열	터널기능마스터	김양환
	안전과장	안병욱	터널기능마스터	문동식
	안전주임	이원규	터널반장	이성열
	안전주임	유대우	안전과장	김태화
	안전주임	염찬수	안전대리	김성관
	품질과장	김병호	안전주임	이원규
	품질사원	신길호	안전주임	유대우
			품질과장	전형준
	계	25명	계	26명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월30일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기초 철근 조립	김완수	이기상 정순길
	932정거장	- 7Span B1 2단벽체 외벽방수및 되메우기 - 9Span B1 연결통로#2 거푸집설치 -8,9Span 버팀 해체, 상수도 받침해체 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 6,9,10Span 하수박스 받침타설(4월2일) - 11,12Span 상수도 지장물복구 철근조립 및 거푸집설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 정화조 외벽 방수 및 되메우기 - 6,7Span 채움 con'c타설, 되메우기 - 7Span B1 벽체 거푸집설치 - 9Span B1 2단 벽체 거푸집 동바리설치 - 10Span B1 2단 벽체 철근 조립	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 그라우팅 작업		최승부 박지현
03월31일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기초 철근 조립	양희석	박종현 김현규
	932정거장	- 7Span B1 2단벽체 외벽방수및 되메우기 - 9Span B1 연결통로#2 거푸집설치 -8,9Span 버팀 해체, 상수도 받침해체 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 6,9,10Span 하수박스 받침타설(4월2일) - 11,12Span 상수도 지장물복구 철근조립 및 거푸집설치		이태신 정순길
	933정거장	- 정화조 외벽 방수 및 되메우기 - 6,7Span 채움 con'c타설, 되메우기 - 7Span B1 벽체 거푸집설치 - 9Span B1 2단 벽체 거푸집 동바리설치 - 10Span B1 2단 벽체 철근 조립	백인기	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 그라우팅 작업		최승부 박지현
04월01일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기초 Con`c 타설	김선태	박종현 이기상
	932정거장	- 7Span B1 2단벽체 외벽방수및 되메우기 - 9Span B1 연결통로#2 거푸집설치 -8,9Span 버팀 해체, 상수도 받침해체 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 6,9,10Span 하수박스 받침타설(4월2일) - 11,12Span 상수도 지장물복구 철근조립 및 거푸집설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 정화조 외벽 방수 및 되메우기 - 6,7Span 채움 con'c타설, 되메우기 - 7Span B1 벽체 거푸집설치 - 9Span B1 2단 벽체 거푸집 동바리설치 - 10Span B1 2단 벽체 철근 조립	유승필	박민주 김세현
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 작업		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월02일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기초 Con`c 양생	김완수	이기상 정순길
	932정거장	- 7Span B1 2단 벽체 외벽방수 및 되메우기 - 9Span B1 연결통로#2 거푸집설치 -8,9Span 버팀 해체, 상수도 받침해체 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 6,9,10Span 하수박스 받침타설(4월2일) - 11,12Span 상수도 지장물복구 철근조립 및 거푸집설치		박종현 김현규
	933정거장	- 정화조 외벽 방수 및 되메우기 - 6,7Span 채움 con'c 타설, 되메우기 - 7Span B1 벽체 거푸집설치 - 9Span B1 2단 벽체 거푸집 동바리설치 - 10Span B1 2단 벽체 철근 조립	임승만	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 작업		최승부 박지현
04월03일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 기초 Con`c 양생	양희석	이기상 이현탁
	932정거장	- 7Span B1 2단 벽체 외벽방수 및 되메우기 - 9Span B1 연결통로#2 거푸집설치 -8,9Span 버팀 해체, 상수도 받침해체 - 4Span 2단 버팀 해체 - 6Span 보조파일설치 - 6,9,10Span 하수박스 받침타설(4월2일) - 11,12Span 상수도 지장물복구 철근조립 및 거푸집설치		이태신 김현규
	933정거장	- 정화조 외벽 방수 및 되메우기 - 6,7Span 채움 con'c 타설, 되메우기 - 9Span B1 2단 벽체 거푸집 동바리설치 - 10Span B1 2단 벽체 철근 조립	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- 디스크커터 교체 작업		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	03.30일(월)	03.31일(화)	04.01일(수)	04.02일(목)	04.03일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O			O
	보조감리원	유승필			O
	보조감리원	임승만	O			O
	보조감리원	백인기		O			O
	보조감리원	김선태			O
	보조감리원	양희석		O			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O		O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O	O
	공사대리	김현규		O		O	O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			17명	18명	17명	18명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)