휴일 및 야간 작업계획

(`14.12.27 ~ `15.01.02)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
12월27일(토) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 암 굴착 및 소할	양희석	이기상 정순길
	932 정거장	- 4Span B1 1단 벽체 측벽 되메우기 - 8Span B1 동바리설치 - 9Span B1 동바리보강 및 슬래브 거푸집 설치 - 9Span B1 1단 버팀보 해체 - 10Span B1 상부슬래브 철근 및 거푸집 설치 - 12Span 하수박스 받침 거푸집 설치 및 해체 - 12Span 우측 덕트 배기 거푸집 조립 및 철근조립 - #1,4출입구 토사굴착 및 반출, 피스설치,주형보 및 복공설치		이태신 박종현
	933 정거장	- 7Span B2 5,6단 버팀보 해체 - 9Span B2 벽체 2단 거푸집 설치, 동바리 보강 - 10Span B2 슬래브 철근조립, 동바리 보강 - 정화조 중간관리층 기초 철근 조립 - #1,2 출입구 주형보 및 복공판 설치 - #5,6 출입구 파일 천공 및 항타	하송호	박민주 박진정
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		조광영 권우형
12월28일(일) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 현장휴무	-	박성환 이찬수
	932 정거장	- 현장휴무
	933 정거장	- 현장휴무
	쉴드터널	- 현장휴무
01월01일(목) (07:00~18:00)	931S1 환기구	- 현장휴무	-	조재훈 정태익
	932 정거장	- 현장휴무
	933 정거장	- 현장휴무
	쉴드터널	- 현장휴무

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2014.12.27(토)		2014.12.28(일)		2015.01.01(목)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	양희석
	보조감리원	하송호
시공사	현장대리인	서용범	공무대리	박성환	관리대리	조재훈
	공사과장	이태신	관리주임	이찬수	공무대리	정태익
	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁
	공사대리	이기상
	공사대리	김현규
	공사사원	정순길
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사사원	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	권우형
	터널과장	류주열
	터널과장	서성일
	터널과장	김준철
	터널과장	최승부
	터널과장	김양환
	터널대리	김정연
	터널주임	박지현
	터널주임	홍동우
	터널주임	박지웅
	안전과장	안병욱
	안전과장	김태화
	안전대리	박현제
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	31명	계	2명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
12월29일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일	931S1환기구	- 931환기구 암굴착 및 소할	임승만	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 측벽 동발목설치 - 6Span 1단버팀 해체 및 동발목설치 - 8Span 지하1층 동바리 설치 - 9Span 지하1층 연결통로1 동바리설치 - 9Span 지하1층 1단버팀 해체 - 10Span 지하1층 상부슬래브 철근 및 동바리보강 - 10Span 지하1층 상부슬래브 동바리 설치 - #1,4출입구 토사굴착 및 반출, 주형보 및 복공설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 9Span B2 벽체 2단 거푸집 설치, 동바리 보강 - 10Span B2 슬래브 철근조립, 동바리 보강 - 정화조 중간관리층 기초 철근 조립	하송호	김학준 최동선
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		최승부 박지현
12월30일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일	931S1환기구	- 931환기구 암굴착 및 소할	백인기	박종현 김현규
	932정거장	- 4Span 지하1층 측벽 동발목설치 - 6Span 1단버팀 해체 및 동발목설치 - 8Span 지하1층 동바리 설치 - 9Span 지하1층 연결통로1 동바리설치 - 9Span 지하1층 1단버팀 해체 - 10Span 지하1층 상부슬래브 철근 및 동바리보강 - 10Span 지하1층 상부슬래브 동바리 설치 - #1,4출입구 토사굴착 및 반출, 주형보 및 복공설치		이태신 정순길
	933정거장	- 9Span B2 벽체 2단 거푸집 설치, 동바리 보강 - 10Span B2 슬래브 철근조립, 동바리 보강 - 정화조 중간관리층 기초 철근 조립	임승만	박민주 박진정
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		최승부 박지현
12월31일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일	931S1환기구	- 931환기구 암굴착 및 소할	김선태	이기상 이현탁
	932정거장	- 4Span 지하1층 측벽 동발목설치 - 6Span 1단버팀 해체 및 동발목설치 - 8Span 지하1층 동바리 설치 - 9Span 지하1층 연결통로1 동바리설치 - 9Span 지하1층 1단버팀 해체 - 10Span 지하1층 상부슬래브 철근 및 동바리보강 - 10Span 지하1층 상부슬래브 동바리 설치 - #1,4출입구 토사굴착 및 반출, 주형보 및 복공설치		이태신 박종현
	933정거장	- 9Span B2 벽체 2단 거푸집 설치, 동바리 보강 - 10Span B2 슬래브 철근조립, 동바리 보강 - 정화조 중간관리층 기초 철근 조립	백인기	김학준 김세현
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		최승부 박지현
01월02일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일	931S1환기구	- 931환기구 암굴착 및 소할	박지훈	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 측벽 동발목설치 - 6Span 1단버팀 해체 및 동발목설치 - 8Span 지하1층 동바리 설치 - 9Span 지하1층 연결통로1 동바리설치 - 9Span 지하1층 1단버팀 해체 - 10Span 지하1층 상부슬래브 철근 및 동바리보강 - 10Span 지하1층 상부슬래브 동바리 설치 - #1,4출입구 토사굴착 및 반출, 주형보 및 복공설치		박종현 김현규
	933정거장	- 9Span B2 벽체 2단 거푸집 설치, 동바리 보강 - 10Span B2 슬래브 철근조립, 동바리 보강 - 정화조 중간관리층 기초 철근 조립	김선태	박민주 박진정
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	12.29일(월)	12.30일(화)	12.31일(수)	01.02일(금)
감리단	책임감리원	연규범
	보조감리원	박지훈				O
	보조감리원	임승만	O	O
	보조감리원	백인기		O	O
	보조감리원	김선태			O	O
	보조감리원	양희석
	보조감리원	하송호	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O
	공사대리	김현규		O		O
	공사대리	이현탁	O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주		O		O
	공사과장	김학준	O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사대리	김세현	O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사사원	최동선	O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O
	안전팀장	김태화	O		O
	안전과장	안병욱		O		O
	안전대리	김성관	O		O
	안전대리	유대우		O		O
	안전대리	박제현	O		O
	안전주임	이원규		O		O
	안전주임	염찬수	O		O
	품질과장	김병호		O		O
	품질대리	전형준	O		O
	품질기사	신길호		O		O
	품질기사	김용석	O		O
합계			18명	18명	18명	18명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   연  규  범   (인)