휴일 및 야간 작업계획

(`15.01.17 ~ `15.01.23)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
01월17일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 - 암 파쇄 및 상차	김선태	이기상 이현탁
	932 정거장	- #2,3번 출입구 토사굴착 및 반출, 피스 및 주형보 받침 설치 - #2,3번 출입구 작업장 이동, 보도정리 - 8Span B1 역무실 기둥거푸집 해체 - 8Span B1 동바리 설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 9Span B1 동바리 보강 및 철근조립 - 10Span B1 되메움토 다짐 정리 - 10Span B1 상부슬래브 내부 거푸집 해체 - 11,12Span 하수박스받침 거푸집설치(지장물 복구)		이태신 박종현
	933 정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리설치 - 10Span B2 슬래브 철근조립 - #1,2번 출입구 주형보, 복공설치 - #5,6번 출입구 피스 및 주형보 받침 설치, 아스콘포장	양희석	박민주 김세현
	쉴드터널	- 쉴드TBM 정비 - 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		권우형 김준철 최승부(야) 문동식(야) 박지현(야)
01월18일(일) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 - 암 파쇄 및 상차	하송호	박진정 정순길
	932 정거장	- #2,3번 출입구 토사굴착 및 반출, 피스 및 주형보 받침 설치 - #2,3번 출입구 작업장 이동, 보도정리 - 8Span B1 역무실 기둥거푸집 해체 - 8Span B1 동바리 설치 및 슬래브 거푸집 설치 - 9Span B1 동바리 보강 및 철근조립 - 10Span B1 되메움토 다짐 정리 - 10Span B1 상부슬래브 내부 거푸집 해체 - 11,12Span 하수박스받침 거푸집설치(지장물 복구)		이태신 김현규
	933 정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리설치 - 10Span B2 슬래브 철근조립 - #1,2번 출입구 주형보, 복공설치 - #5,6번 출입구 피스 및 주형보 받침 설치, 아스콘포장	김완수	김학준 최동선
	쉴드터널	- 쉴드TBM 정비 - 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입		조광영 류주열 박지웅(야) 김양환(야) 서성일(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.01.17(토)		2015.01.18(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	김선태	책임감리원	김완수
	보조감리원	양희석	보조감리원	하송호
시공사	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	이태신
	공사대리	박종현	공사대리	김현규
	공사대리	이기상	공사대리	정순길
	공사대리	이현탁	공사과장	김학준
	공사과장	박민주	공사대리	박진정
	공사대리	김세현	공사사원	최동선
	공사주임	이윤구	터널차장	조광영
	공사사원	임희승	터널과장	류주열
	터널과장	권우형	터널과장	서성일
	터널과장	김준철	터널과장	김준철
	터널과장	최승부	터널과장	김양환
	터널과장	문동식	터널과장	이성열
	터널대리	최민수	터널주임	박지웅
	터널대리	김정연	품질과장	김병호
	터널주임	박지현	품질사원	신길호
	터널주임	임원욱	안전과장	김태화
	터널주임	홍동우	안전대리	박현제
	품질부장	오중규	안전주임	유대우
	품질대리	전형준	안전주임	염찬수
	품질사원	김용석
	안전과장	김태화
	안전대리	박현재
	안전대리	김성관
	안전대리	이원규
	계	27명	계	22명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
01월19일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 / 암 파쇄 및 상차	김완수	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 기둥 철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 매몰버팀 해체구간 con`c타설 - 7Span B1 기둥 철근조립, 동바리설치 - 8Span B1 상부슬래브 동바리보강 및 거푸집설치 철근조립 - 9Span 지하1층 상부슬래브 거푸집설치 및 con`c타설 - 11,12Span 하수박스 받침 거푸집 및 타설 - 12Span 상수도 받침 철근배근 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 주형보 설치 / 토사굴착 및 반출		이태신 이현탁
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입 / TBM정비	하송호	최승부 박지현
01월20일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 / 암 파쇄 및 상차	임승만	박종현 김현규
	932정거장	- 4Span 지하1층 기둥 철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 매몰버팀 해체구간 con`c타설 - 7Span B1 기둥 철근조립, 동바리설치 - 8Span B1 상부슬래브 동바리보강 및 거푸집설치 철근조립 - 9Span 지하1층 상부슬래브 거푸집설치 및 con`c타설 - 11,12Span 하수박스 받침 거푸집 및 타설 - 12Span 상수도 받침 철근배근 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 주형보 설치 / 토사굴착 및 반출		이태신 정순길
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입 / TBM정비	김완수	최승부 박지현
01월21일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 / 암 파쇄 및 상차	백인기	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span 지하1층 기둥 철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 매몰버팀 해체구간 con`c타설 - 7Span B1 기둥 철근조립, 동바리설치 - 8Span B1 상부슬래브 동바리보강 및 거푸집설치 철근조립 - 9Span 지하1층 상부슬래브 거푸집설치 및 con`c타설 - 11,12Span 하수박스 받침 거푸집 및 타설 - 12Span 상수도 받침 철근배근 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 주형보 설치 / 토사굴착 및 반출		이태신 이현탁
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입 / TBM정비	임승만	최승부 박지현
01월22일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 / 암 파쇄 및 상차	김선태	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 지하1층 기둥 철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 매몰버팀 해체구간 con`c타설 - 7Span B1 기둥 철근조립, 동바리설치 - 8Span B1 상부슬래브 동바리보강 및 거푸집설치 철근조립 - 9Span 지하1층 상부슬래브 거푸집설치 및 con`c타설 - 11,12Span 하수박스 받침 거푸집 및 타설 - 12Span 상수도 받침 철근배근 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 주형보 설치 / 토사굴착 및 반출		박종현 김현규
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입 / TBM정비	백인기	최승부 박지현
01월23일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 락볼트 및 숏크리트 시공 / 암 파쇄 및 상차	유승필	이기상 이현탁
	932정거장	- 4Span 지하1층 기둥 철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 매몰버팀 해체구간 con`c타설 - 7Span B1 기둥 철근조립, 동바리설치 - 8Span B1 상부슬래브 동바리보강 및 거푸집설치 철근조립 - 9Span 지하1층 상부슬래브 거푸집설치 및 con`c타설 - 11,12Span 하수박스 받침 거푸집 및 타설 - 12Span 상수도 받침 철근배근 및 거푸집설치 - #1~4번 출입구 주형보 설치 / 토사굴착 및 반출		이태신 김현규
	쉴드터널	- 잔여공사 구간 그라우팅 천공 및 주입 / TBM정비	김선태	최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	01.19일(월)	01.20일(화)	01.21일(수)	01.22일(목)	01.23일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O	O
	보조감리원	유승필					O
	보조감리원	임승만		O	O
	보조감리원	백인기			O	O
	보조감리원	김선태				O
	보조감리원	양희석					O
	보조감리원	하송호	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O		O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O	O
	공사대리	김현규		O		O	O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			14명	15명	14명	15명	14명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   연  규  범   (인)