휴일 및 야간 작업계획

(`15.02.14 ~ `15.02.20)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
02월14일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00) 933정거장 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 보호벽 철근 조립 및 거푸집 설치	유승필	이현탁 임희승
	932 정거장	- 4Span B1 기둥철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 방수 및 몰탈타설 - 7Span B1 기둥 거푸집조립 및con'c 타설 - 7Span B1 상부슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 7Span B1 2단 벽체 철근조립 - 8Span B1 상부슬래브 시공 이음부 및 역거더 치핑 - 9Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 10Span 상수도 받침해체 및 잭설치 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체		이태신 정순길
	933 정거장	- 7span B2 슬래브 철근조립 및 동바리 보강 - 9span B2 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - 9span 4단 버팀보 해체 - 10span B2 내벽 거푸집 해제 - #1,2번 출입구 주형보 및 복공설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 ,복공설치 / 아스콘포장	김완수	박민주 김학준 김세현(야) 이윤구(야)
	쉴드터널	- 지상그라우팅 천공 및 주입 / 수평그라우팅 천공 및 주입		조광영 류주열 홍동우(야) 이성열(야)
02월15일(일) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00) 933정거장 (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 보호벽 철근 조립 및 거푸집 설치	양희석	이기상 임희승
	932 정거장	- 4Span B1 기둥철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 방수 및 몰탈타설 - 7Span B1 기둥 거푸집조립 및 con'c 타설 - 7Span B1 상부슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 7Span B1 2단 벽체 철근조립 - 8Span B1 상부슬래브 시공 이음부 및 역거더 치핑 - 9Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 10Span 상수도 받침해체 및 잭설치 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체		박종현 김현규
	933 정거장	- 7span B2 슬래브 철근조립 및 동바리 보강 - 9span B2 슬래브 거푸집 및 동바리 해체 - 9span 4단 버팀보 해체 - 10span B2 내벽 거푸집 해제 - #1,2번 출입구 주형보 및 복공설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 ,복공설치 / 아스콘포장	임승만	박민주 박진정 김세현(야) 이윤구(야)
	쉴드터널	- 지상그라우팅 천공 및 주입 / 수평그라우팅 천공 및 주입		조광영 류주열 박지현(야) 이성열(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.02.14(토)		2015.02.15(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	임승만
	보조감리원	유승필	보조감리원	양희석
시공사	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁	공사대리	이기상
	공사사원	정순길	공사대리	김현규
	공사과장	박민주	공사과장	박민주
	공사과장	김학준	공사대리	김세현
	공사대리	김세현	공사대리	박진정
	공사대리	박진정	공사주임	이윤구
	공사주임	이윤구	공사사원	최동선
	공사사원	최동선	공사사원	임희승
	공사사원	임희승	터널차장	조광영
	터널차장	조광영	터널과장	류주열
	터널과장	류주열	터널과장	권우형
	터널과장	김준철	터널과장	서성일
	터널과장	최승부	터널과장	김준철
	터널과장	김양환	터널과장	최승부
	터널과장	최민수	터널기장	문동식
	터널대리	김정연	터널대리	최민수
	터널주임	홍동우	터널대리	김정연
	터널반장	이성열	터널주임	박지현
	안전대리	박현재	터널주임	박지웅
	안전대리	김성관	터널반장	이성열
	안전주임	이원규	안전대리	박현재
	안전주임	유대우	안전대리	김성관
	안전주임	염찬수	안전주임	이원규
	품질부장	오중규	안전주임	염찬수
	품질대리	전형준	품질과장	김병호
	품질사원	김용석	품질사원	신길호
	계	30명	계	30명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
02월16일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 보호벽 콘크리트 타설 및 양생	양희석	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span B1 기둥철근 및 거푸집설치 - 5Span 상부슬래브 방수 및 몰탈타설 - 7Span B1 기둥 양생 및 치핑 - 7Span B1 상부슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 7Span B1 2단 벽체 철근조립 - 8Span B1 상부슬래브 시공이음부 및 역거더 치핑 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 거푸집 해체 - 9Span B1 상부슬래브 동바리 해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단띠장 및 사보해체		이태신 이현탁
	933정거장	- 7Span B2 슬라브 철근 조립 및 동바리 보강 - 9Span B1 벽체1단 철근 조립 - 10Span B2 되메우기 및 4단 버팀보, 보강재 해체 - 10Span B2 내벽 거푸집 해체 - 정화조 중간관리층 동바리 및 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 주형보 및 복공설치 - #5,6번 출입구 주형보 받침보 설치 / 아스콘포장	김완수	박민주 김세현
	쉴드터널	- 그라우팅 천공 및 주입 / 쉴드TBM 커터교체		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	02.16일(월)	02.17일(화)	02.18일(수)	02.19일(목)	02.20일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O	설 연휴
	보조감리원	유승필
	보조감리원	임승만
	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태
	보조감리원	양희석	O
시공사	현장대리인	서용범	O
	공사과장	이태신	O
	공사대리	박종현
	공사대리	이기상	O
	공사대리	김현규
	공사대리	이현탁	O
	공사기사	정순길	O
	공사과장	박민주	O
	공사과장	김학준
	공사대리	김세현	O
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구	O
	공사주임	최동선
	공사사원	임희승	O
	터널과장	최승부	O
	터널주임	박지현	O
	안전팀장	김태화
	안전과장	안병욱	O
	안전대리	김성관
	안전대리	유대우	O
	안전대리	박제현
	안전주임	이원규	O
	안전주임	염찬수
	품질과장	김병호	O
	품질대리	전형준
	품질기사	신길호	O
	품질기사	김용석
합계			18명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)