휴일 및 야간 작업계획

(`15.02.28 ~ `15.03.06)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

▣ 휴일작업 근무자 명단

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
02월28일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 종점부 보호벽 거푸집 해체 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	임승만	이기상 김현규
	932 정거장	- 7Span 지하1층 상부슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 7Span 중앙기둥 con'c타설 - 7Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 8Span 지하1층 2단 벽체 외벽 방수 - 10Span 상부슬래브 역거더 con'c타설 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 절단		이태신 박종현
	933 정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - 10Span 슬래브 동바리 해체 / 4단 버팀해체 - 정화조 중간관리층 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 주형보, 복공설치 - #5,6번 출입구 피스브라켓, 주형보 받침보 설치	김선태	박민주 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립 / 지상 보강 그라우팅		조광영 류주열 최민수(야) 홍동우(야)
03월01일(일) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 종점부 보호벽 거푸집 해체 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	백인기	서용범 이현탁
	932 정거장	- 7Span 지하1층 상부슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 7Span 중앙기둥 con'c타설 - 7Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 8Span 지하1층 2단 벽체 외벽 방수 - 10Span 상부슬래브 역거더 con'c타설 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬절단		이태신 정순길
	933 정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - 10Span 슬래브 동바리 해체 / 4단 버팀해체 - 정화조 중간관리층 슬래브 동바리 및 거푸집 설치 - #1,2번 출입구 주형보, 복공설치 - #5,6번 출입구 피스브라켓, 주형보 받침보 설치	양희석	김세현 이윤구
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립 / 지상 보강 그라우팅		권우형 김준철 문동식(야) 이성열(야)

구 분	2015.02.28(토)		2015.03.01(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	보조감리원	임승만	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태	보조감리원	양희석
시공사	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	이태신
	공사대리	박종현	공사대리	이현탁
	공사대리	이기상	공사사원	정순길
	공사대리	김현규	공사대리	김세현
	공사과장	박민주	공사주임	이윤구
	공사대리	박진정	터널과장	권우형
	공사사원	최동선	터널과장	김준철
	공사사원	임희승	터널과장	문동식
	터널차장	조광영	터널대리	김정연
	터널과장	류주열	터널반장	이성열
	터널과장	서성일	안전주임	이원규
	터널과장	김양환	안전주임	염찬수
	터널대리	최민수	품질대리	전형준
	터널주임	박지현
	터널주임	이원욱
	터널주임	박지웅
	터널주임	홍동우
	안전과장	안병욱
	안전대리	김성관
	안전주임	이원규
	안전주임	유대우
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	26명	계	16명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월02일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문 기초철근 조립 및 거푸집 설치 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	김선태	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span B1 기둥 간섭부 2단 버팀해체 - 7Span B1 상부슬래브 동바리, 거푸집설치 / 철근조립 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 되메우기 - 8Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 9,10Span 상부슬래브 방수 (역거더 구간) - 11Span 하수박스 받침해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 해체인양		이태신 이현탁
	933정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 복공턱 덧씌우기, 빗물받이 및 연결관 설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치/기존출입구 깨기 및 반출	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립 / 지상 보강 그라우팅		최승부 박지현
03월03일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문 기초철근 조립 및 거푸집 설치 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	유승필	박종현 김현규
	932정거장	- 4Span B1 기둥 간섭부 2단 버팀해체 - 7Span B1 상부슬래브 동바리, 거푸집설치 / 철근조립 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 되메우기 - 8Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 9,10Span 상부슬래브 방수 (역거더 구간) - 11Span 하수박스 받침해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 해체인양		이태신 정순길
	933정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 복공턱 덧씌우기, 빗물받이 및 연결관 설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치/기존출입구 깨기 및 반출	김선태	김학준 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립 / 지상 보강 그라우팅		최승부 박지현
03월04일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문 기초철근 조립 및 거푸집 설치 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	백인기	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 기둥 간섭부 2단 버팀해체 - 7Span B1 상부슬래브 동바리, 거푸집설치 / 철근조립 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 되메우기 - 8Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 9,10Span 상부슬래브 방수 (역거더 구간) - 11Span 하수박스 받침해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 해체인양		이태신 이현탁
	933정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 복공턱 덧씌우기, 빗물받이 및 연결관 설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치/기존출입구 깨기 및 반출	유승필	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립 / 지상 보강 그라우팅		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월05일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문 기초철근 조립 및 거푸집 설치 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	양희석	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span B1 기둥 간섭부 2단 버팀해체 - 7Span B1 상부슬래브 동바리, 거푸집설치 / 철근조립 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 되메우기 - 8Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 9,10Span 상부슬래브 방수 (역거더 구간) - 11Span 하수박스 받침해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 해체인양		박종현 김현규
	933정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 복공턱 덧씌우기, 빗물받이 및 연결관 설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치/기존출입구 깨기 및 반출	백인기	김학준 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
03월06일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문 기초철근 조립 및 거푸집 설치 - 시점부 보호벽 거푸집 설치	김완수	이기상 이현탁
	932정거장	- 4Span B1 기둥 간섭부 2단 버팀해체 - 7Span B1 상부슬래브 동바리, 거푸집설치 / 철근조립 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 되메우기 - 8Span B1 상부슬래브 동바리해체 - 9,10Span 상부슬래브 방수 (역거더 구간) - 11Span 하수박스 받침해체 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 및 찬넬 해체인양		이태신 김현규
	933정거장	- 7Span B2 슬래브 동바리 보강 / 철근조립 - 9Span B2 슬래브 동바리 해체 - #1,2번 출입구 복공턱 덧씌우기, 빗물받이 및 연결관 설치 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치/기존출입구 깨기 및 반출	양희석	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	03.02일(월)	03.03일(화)	03.04일(수)	03.05일(목)	03.06일(금)
감리단	책임감리원	김완수					O
	보조감리원	유승필		O	O
	보조감리원	임승만	O
	보조감리원	백인기			O	O
	보조감리원	김선태	O	O
	보조감리원	양희석				O	O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O		O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O	O
	공사대리	김현규		O		O	O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	김학준		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사사원	임희승	O		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			18명	18명	18명	18명	18명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)