휴일 및 야간 작업계획

(`15.03.07 ~ `15.03.13)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월07일(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 기초 방수 / 갱문 기초 철근조립	김완수	박종현 김현규
	932 정거장	- 7Span 지하1층 상부슬래브 철근조립 - 7Span 지하1층 상부슬래브 내벽 거푸집설치 - 8Span 지하1층 2단 벽체 외벽 방수 - 12Span 덕트 좌우측 1단 띠장 및 사보해체 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 - #1,2번 출입구 토사굴착 / 주형보 및 복공설치		이태신 임희승
	933 정거장	- 7Span B2 슬래브 거푸집 설치 - 9Span B1 1단 벽체 철근조립 - 정화조 중간관리층 슬래브 철근조립 - #5,6번 출입구 주형보 및 복공설치	임승만	박민주 박진정
				조광영 류주열 최승부(야) 박지현(야)
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립
03월08일(일)	931S1 환기구	- 현장휴무	-	전형준 최민수
	932 정거장	- 현장휴무
	933 정거장	- 현장휴무
	쉴드터널	- 현장휴무

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.03.07(토)		2015.03.08(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수
	보조감리원	임승만
시공사	현장대리인	서용범	품질과장	전형준
	공사과장	이태신	터널대리	최민수
	공사대리	박종현
	공사대리	김현규
	공사과장	박민주
	공사대리	박진정
	공사대리	김세현
	공사주임	이윤구
	공사주임	최동선
	공사주임	임희승
	터널차장	조광영
	터널과장	류주열
	터널과장	서성일
	터널과장	김준철
	터널과장	최승부
	터널과장	문동식
	터널주임	박지현
	터널주임	이원욱
	터널주임	박지웅
	터널반장	이성열
	안전과장	김태화
	안전대리	김성관
	안전주임	이원규
	안전주임	유대우
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	28명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월09일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문기초 철근조립 및 거푸집 설치	임승만	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span B1 2단 버팀 해체 및 중앙 기둥거푸집설치 - 5.6Span 하수박스 받침 거푸집설치 - 7Span B1 상부슬래브 철근조립 / 외벽거푸집 설치 - 8~10Span 상수도받침 잭설치 및 받침해체 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 측벽 되메우기 - 8~10Span 상부슬래브 중앙부 방수 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 및 면정리 , 철근조립 - #1,2번 출입구 토사굴착 / 주형보 및 복공설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 9Span B1 1단 벽체 거푸집설치 - 정화조 중간슬래브 거푸집 설치 - 10Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #5,6 번 출입구 주형보 및 복공설치	김완수	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
03월10일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문기초 철근조립 및 거푸집 설치	김선태	박종현 김현규
	932정거장	- 4Span B1 2단 버팀 해체 및 중앙 기둥거푸집설치 - 5.6Span 하수박스 받침 거푸집설치 - 7Span B1 상부슬래브 철근조립 / 외벽거푸집 설치 - 8~10Span 상수도받침 잭설치 및 받침해체 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 측벽 되메우기 - 8~10Span 상부슬래브 중앙부 방수 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 및 면정리 , 철근조립 - #1,2번 출입구 토사굴착 / 주형보 및 복공설치		이태신 정순길
	933정거장	- 9Span B1 1단 벽체 거푸집설치 - 정화조 중간슬래브 거푸집 설치 - 10Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #5,6 번 출입구 주형보 및 복공설치	임승만	김학준 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
03월11일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문기초 철근조립 및 거푸집 설치	유승필	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span B1 2단 버팀 해체 및 중앙 기둥거푸집설치 - 5.6Span 하수박스 받침 거푸집설치 - 7Span B1 상부슬래브 철근조립 / 외벽거푸집 설치 - 8~10Span 상수도받침 잭설치 및 받침해체 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 측벽 되메우기 - 8~10Span 상부슬래브 중앙부 방수 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 및 면정리 , 철근조립 - #1,2번 출입구 토사굴착 / 주형보 및 복공설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 9Span B1 1단 벽체 거푸집설치 - 정화조 중간슬래브 거푸집 설치 - 10Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #5,6 번 출입구 주형보 및 복공설치	김선태	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
03월12일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문기초 철근조립 및 거푸집 설치	백인기	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span B1 2단 버팀 해체 및 중앙 기둥거푸집설치 - 5.6Span 하수박스 받침 거푸집설치 - 7Span B1 상부슬래브 철근조립 / 외벽거푸집 설치 - 8~10Span 상수도받침 잭설치 및 받침해체 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 측벽 되메우기 - 8~10Span 상부슬래브 중앙부 방수 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 및 면정리 , 철근조립 - #1,2번 출입구 토사굴착 / 주형보 및 복공설치		박종현 김현규
	933정거장	- 9Span B1 1단 벽체 거푸집설치 - 정화조 중간슬래브 거푸집 설치 - 10Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #5,6 번 출입구 주형보 및 복공설치	유승필	김학준 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
03월13일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 갱문기초 Con`c타설	양희석	이기상 이현탁
	932정거장	- 4Span B1 2단 버팀 해체 및 중앙 기둥거푸집설치 - 5.6Span 하수박스 받침 거푸집설치 - 7Span B1 상부슬래브 철근조립 / 외벽거푸집 설치 - 8~10Span 상수도받침 잭 설치 및 받침해체 - 8Span B1 2단 벽체 외벽 방수 및 측벽 되메우기 - 8~10Span 상부슬래브 중앙부 방수 - 12Span 중앙파일 오픈구간 치핑 및 면정리 , 철근조립 - #1,2번 출입구 아스콘 포장		이태신 김현규
	933정거장	- 9Span B1 1단 벽체 거푸집설치 - 정화조 중간슬래브 거푸집 설치 - 10Span B1 1단 벽체 철근조립 및 거푸집설치 - #5,6 번 출입구 주형보 및 복공설치	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	03.09일(월)	03.10일(화)	03.11일(수)	03.12일(목)	03.13일(금)
감리단	책임감리원	김완수	O
	보조감리원	유승필			O	O
	보조감리원	임승만	O	O
	보조감리원	백인기				O	O
	보조감리원	김선태		O	O
	보조감리원	양희석					O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O		O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O	O
	공사대리	김현규		O		O	O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사과장	김학준		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구	O		O		O
	공사주임	최동선		O		O
	공사사원	임희승	O		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			18명	18명	18명	18명	18명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)