휴일 및 야간 작업계획

(`15.04.11 ~ `15.04.17)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월11(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 1단 벽체 철근조립	김선태	이현탁 정순길
	932 정거장	- 7Span B1 2단 벽체 되메우기 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 10,11Span 보조 파일설치 - #1~4번 출입구 토공작업 / 지장물 매달기		이태신 임희승
	933 정거장	- 10Span B1 2단 벽체 거푸집해체 - 7Span B2 슬래브 거푸집 동바리 해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 - 7Span B1 비내력벽 철근조립 - 9Span B1 2단 벽체 철근조립 - #1,2 번 출입구 기존 출입구 깨기, 지장물 매달기, 토류판설치	김완수	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		조광영 류주열 이원욱(야) 박지웅(야)
04월12일(일) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 1단 벽체 철근조립	임승만	이기상 최동선
	932 정거장	- 7Span B1 2단 벽체 되메우기 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 - 10,11Span 보조 파일설치 - #1~4번 출입구 토공작업 / 지장물 매달기		박종현 김현규
	933 정거장	- 10Span B1 2단 벽체 거푸집해체 - 7Span B2 슬래브 거푸집 동바리 해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 - 7Span B1 비내력벽 철근조립 - 9Span B1 2단 벽체 철근조립 - #1,2 번 출입구 기존 출입구 깨기, 지장물 매달기, 토류판설치	백인기	서성일 박진정
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		권우형 김준철 이원욱(야) 박지웅(야)

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.04.11(토)		2015.04.12(일)
	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수	보조감리원	백인기
	보조감리원	김선태	보조감리원	임승만
시공사	현장대리인	서용범	현장대리인	서용범
	공사과장	이태신	공사과장	박종현
	공사대리	이현탁	공사대리	이기상
	공사사원	정순길	공사대리	김현규
	공사과장	박민주	공사과장	서성일
	공사대리	김세현	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구	공사사원	최동선
	공사주임	임희승	터널차장	조광영
	터널차장	조광영	터널과장	류주열
	터널과장	류주열	터널과장	권우형
	터널과장	권우형	터널과장	김준철
	터널대리	김정연	터널대리	이원욱
	터널대리	이원욱	터널주임	박지웅
	터널대리	최민수	안전과장	김태화
	터널대리	홍동우	안전주임	이원규
	터널주임	박지웅	안전주임	염찬수
	안전과장	안병욱	품질과장	전형준
	안전대리	김성관
	안전주임	이원규
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	24명	계	19명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월13일(월) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 철근조립	양희석	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 2단 버팀해체 - 7Span B1 2단 벽체 되메우기 / 동바리 해체 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 7~9Span 상부슬래브 방수 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집설치 - 10,11Span 중앙파일절단 / 보조파일설치 - 12Span 지장물 복구 기초철근 및 거푸집 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 7Span 4단 버팀보 해체 / B1 1단 비내력벽 거푸집설치 - 7Span B3 동바리해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 / 거푸집 설치 - 9Span B1 2단 벽체 및 마감벽 철근조립 - 10Span B1 2단 벽체 방수, 되메우기	김선태	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
04월14일(화) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 철근조립	백인기	박종현 김현규
	932정거장	- 4Span 2단 버팀해체 - 7Span B1 2단 벽체 되메우기 / 동바리 해체 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 7~9Span 상부슬래브 방수 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집설치 - 10,11Span 중앙파일절단 / 보조파일설치 - 12Span 지장물 복구 기초철근 및 거푸집 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 7Span 4단 버팀보 해체 / B1 1단 비내력벽 거푸집설치 - 7Span B3 동바리해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 / 거푸집 설치 - 9Span B1 2단 벽체 및 마감벽 철근조립 - 10Span B1 2단 벽체 방수, 되메우기	유승필	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
04월15일(수) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 철근조립	김완수	박종현 이기상
	932정거장	- 4Span 2단 버팀해체 - 7Span B1 2단 벽체 되메우기 / 동바리 해체 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 7~9Span 상부슬래브 방수 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집설치 - 10,11Span 중앙파일절단 / 보조파일설치 - 12Span 지장물 복구 기초철근 및 거푸집 설치		이태신 이현탁
	933정거장	- 7Span 4단 버팀보 해체 / B1 1단 비내력벽 Con`c타설 - 7Span B3 동바리해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 / 거푸집 설치 - 9Span B1 2단 벽체 및 마감벽 철근조립 - 10Span B1 2단 벽체 방수, 되메우기	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월16일(목) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 철근조립	양희석	이기상 정순길
	932정거장	- 4Span 2단 버팀해체 - 7Span B1 2단 벽체 되메우기 / 동바리 해체 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 7~9Span 상부슬래브 방수 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집설치 - 10,11Span 중앙파일절단 / 보조파일설치 - 12Span 지장물 복구 기초철근 및 거푸집 설치		박종현 김현규
	933정거장	- 7Span 4단 버팀보 해체 - 7Span B3 동바리해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 / 거푸집 설치 - 9Span B1 2단 벽체 및 마감벽 철근조립 - 10Span B1 2단 벽체 방수, 되메우기	백인기	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
04월17일(금) (18:00~21:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 철근조립	김선태	이기상 이현탁
	932정거장	- 4Span 2단 버팀해체 - 7Span B1 2단 벽체 되메우기 / 동바리 해체 - 7,8Span 측벽 되메우기 - 7~9Span 상부슬래브 방수 - 9Span B1 #2연결통로 슬래브 철근조립 및 거푸집설치 - 10,11Span 중앙파일절단 / 보조파일설치 - 12Span 지장물 복구 기초철근 및 거푸집 설치		이태신 김현규
	933정거장	- 7Span 4단 버팀보 해체 - 7Span B3 동바리해체 - 5~6Span B1 1단 벽체 철근조립 / 거푸집 설치 - 9Span B1 2단 벽체 및 마감벽 철근조립 - 10Span B1 2단 벽체 방수, 되메우기	유승필	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	04.13일(월)	04.14일(화)	04.15일(수)	04.16일(목)	04.17일(금)
감리단	책임감리원	김완수			O
	보조감리원	유승필		O			O
	보조감리원	임승만			O
	보조감리원	백인기		O		O
	보조감리원	김선태	O				O
	보조감리원	양희석	O			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O	O	O		O
	공사대리	박종현		O	O	O
	공사대리	이기상	O		O	O	O
	공사대리	김현규		O		O	O
	공사대리	이현탁	O		O		O
	공사기사	정순길	O	O		O
	공사과장	박민주	O		O		O
	공사대리	김세현	O		O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O		O
	안전대리	박제현		O		O
	안전주임	이원규	O		O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	품질과장	김병호	O		O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O		O
	품질기사	김용석		O		O
합계			17명	18명	17명	18명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)