휴일 및 야간 작업계획

(`15.04.25 ~ `15.05.01)

▣ 현장명 : 지하철 919공구 건설공사

▣ 휴일작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월25(토) (07:00~18:00) 쉴드TBM (18:00~익일06:00)	931S1 환기구	- 1단 벽체 거푸집 설치	김완수	이기상 김현규
	932 정거장	- 931S2E2환기구 포장작업 - 4Span B1 동바리설치 - 6,7,8Span 상부슬래브 방수 - 7Span 지하1층 동바리해체 - 7Span 1단버팀 해체 및 치핑 - 9Span B1 연결통로 #2 벽체거푸집해체 - 10Span 중앙파일 절단 - 12Span 상부슬래브 파일박스 거푸집해체 및 치핑 - 출입구 지장물 매달기 및 버팀보 설치		이태신 이현탁
	933 정거장	- 7Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집 동바리 설치 - 9Span B1 2단벽체 마감벽 철근 조립 - 9Span B1 2단벽체 거푸집설치 - 5Span B1 1단벽체 되메우기 - #1,2 번 출입구 지장물 매달기, 토사집토, 기존구조물 깨기 - #5,6 번 출입구 기존구조물깨기, 지장물매달기, 토사집토, 주형보 복공판 설치	임승만	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		조광영 권우형 류주열(야) 김준철(야)
04월26일(일)		- 작업장 휴무	-	우정우 이찬수
05월01일(금)		- 근로자의 날 휴무	-	정재유 임희승

▣ 휴일작업 근무자 명단

구 분	2015.04.25(토)		2015.04.26(일)		2015.05.01(금)
	직 책	성 명	직 책	성 명	직 책	성 명
감리단	책임감리원	김완수
	보조감리원	임승만
시공사	현장대리인	서용범	공무대리(당직)	우정우	공무과장(당직)	정재유
	공사과장	이태신	관리주임(당직)	이찬수	공사주임(당직)	임희승
	공사대리	이기상
	공사대리	이현탁
	공사대리	김현규
	공사사원	정순길
	공사과장	박민주
	공사과장	서성일
	공사대리	김세현
	공사대리	박진정
	공사주임	이윤구
	공사주임	임희승
	공사사원	최동선
	터널차장	조광영
	터널과장	권우형
	터널과장	류주열
	터널과장	김준철
	터널기장	최승부
	터널기장	김양환
	터널기장	문동식
	터널기장	이성열
	터널대리	최민수
	터널대리	김정연
	터널대리	박지현
	터널대리	이원욱
	터널대리	홍동우
	터널주임	박지웅
	안전과장	안병욱
	안전주임	이원규
	안전주임	염찬수
	안전사원	박재원
	품질과장	김병호
	품질사원	신길호
	계	35명	계	2명	계	2명

▣ 야간작업 공종 및 구간

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월27일(월) 931S1환기구 932,933정거장 931S2E2환기구 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 거푸집 조립	김선태	박종현 이기상
	932정거장	- 931S2E2환기구 줄파기 작업 - 4Span B1 동바리 설치 - 7Span 1단버팀해체 및 면정리 - 7,8,9Span 하수박스 받침거푸집설치 - 10Span 보조파일설치 및 중앙파일해체 인양 - 9~12Span 2000, 2200상수관 지장물 복구공 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 거푸집해체 및 치핑 - 출입구 지장물 매달기 및 버팀보 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 4Span 3단 버팀보 해체 - 5Span B1 1단벽체 되메우기 - 정화조 화장실 1단벽체 철근조립 - 6Span 1단벽체 및 기둥거푸집 설치 - 7Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집, 동바리설치 - 9Span B1 2단벽체 거푸집설치 - 10Span 3단 버팀보해체 - #1,2 번 출입구 지장물 매달기, 토사집토, 기존구조물 깨기 - #5,6 번 출입구 기존구조물깨기, 지장물매달기, 토사집토, 주형보 복공판 설치	유승필	박민주 김세현
	쉴드터널	- 굴진 및 세그먼트 조립		최승부 박지현
04월28일(화) 931S1환기구 932,933정거장 931S2E2환기구 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 con’c 타설	김완수	이기상 김현규
	932정거장	- 931S2E2환기구 줄파기 작업 - 4Span B1 동바리 설치 - 7Span 1단버팀해체 및 면정리 - 7,8,9Span 하수박스 받침거푸집설치 - 10Span 보조파일설치 및 중앙파일해체 인양 - 9~12Span 2000, 2200상수관 지장물 복구공 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 거푸집해체 및 치핑 - 출입구 지장물 매달기 및 버팀보 설치		박종현 이현탁
	933정거장	- 4Span 3단 버팀보 해체 - 5Span B1 1단벽체 되메우기 - 정화조 화장실 1단벽체 철근조립 - 6Span 1단벽체 및 기둥거푸집 설치 - 7Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집, 동바리설치 - 9Span B1 2단벽체 거푸집설치 - 10Span 3단 버팀보해체 - #1,2 번 출입구 지장물 매달기, 토사집토, 기존구조물 깨기 - #5,6 번 출입구 기존구조물깨기, 지장물매달기, 토사집토, 주형보 복공판 설치	임승만	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 토류벽 깨기 및 관통준비		최승부 박지현

작업일시	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
04월29일(수) 931S1환기구 932,933정거장 931S2E2환기구 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 con’c 양생	양희석	이태신 김현규
	932정거장	- 931S2E2환기구 줄파기 작업 - 4Span B1 동바리 설치 - 7Span 1단버팀해체 및 면정리 - 7,8,9Span 하수박스 받침거푸집설치 - 10Span 보조파일설치 및 중앙파일해체 인양 - 9~12Span 2000, 2200상수관 지장물 복구공 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 거푸집해체 및 치핑 - 출입구 지장물 매달기 및 버팀보 설치		이현탁 정순길
	933정거장	- 4Span 3단 버팀보 해체 - 5Span B1 1단벽체 되메우기 - 정화조 화장실 1단벽체 철근조립 - 6Span 1단벽체 및 기둥거푸집 설치 - 7Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집, 동바리설치 - 9Span B1 2단벽체 거푸집설치 - 10Span 3단 버팀보해체 - #1,2 번 출입구 지장물 매달기, 토사집토, 기존구조물 깨기 - #5,6 번 출입구 기존구조물깨기, 지장물매달기, 토사집토, 주형보 복공판 설치	백인기	박민주 김세현
	쉴드터널	- 토류벽 깨기 및 관통준비		최승부 박지현
04월30일(목) 931S1환기구 932,933정거장 931S2E2환기구 (18:00~21:00) 쉴드터널 (18:00~익일06:00)	931S1환기구	- 1단 벽체 con’c 양생	김선태	박종현 이기상
	932정거장	- 931S2E2환기구 줄파기 작업 - 4Span B1 동바리 설치 - 7Span 1단버팀해체 및 면정리 - 7,8,9Span 하수박스 받침거푸집설치 - 10Span 보조파일설치 및 중앙파일해체 인양 - 9~12Span 2000, 2200상수관 지장물 복구공 - 11,12Span 상부슬래브 파일박스 거푸집해체 및 치핑 - 출입구 지장물 매달기 및 버팀보 설치		이태신 정순길
	933정거장	- 4Span 3단 버팀보 해체 - 5Span B1 1단벽체 되메우기 - 정화조 화장실 1단벽체 철근조립 - 6Span 1단벽체 및 기둥거푸집 설치 - 7Span B1 2단벽체, 마감벽 거푸집, 동바리설치 - 9Span B1 2단벽체 거푸집설치 - 10Span 3단 버팀보해체 - #1,2 번 출입구 지장물 매달기, 토사집토, 기존구조물 깨기 - #5,6 번 출입구 기존구조물깨기, 지장물매달기, 토사집토, 주형보 복공판 설치	유승필	박진정 이윤구
	쉴드터널	- 토류벽 깨기 및 관통준비		최승부 박지현

▣ 야간작업 근무자 명단

구 분			야 간
구분	직책	성 명	04.27일(월)	04.28일(화)	04.29일(수)	04.30일(목)
감리단	책임감리원	김완수		O
	보조감리원	유승필	O			O
	보조감리원	임승만		O
	보조감리원	백인기			O
	보조감리원	김선태	O			O
	보조감리원	양희석			O
시공사	현장대리인	서용범	O	O	O	O
	공사과장	이태신	O		O	O
	공사대리	박종현	O	O		O
	공사대리	이기상	O	O		O
	공사대리	김현규		O	O
	공사대리	이현탁		O	O
	공사기사	정순길	O		O	O
	공사과장	박민주	O		O
	공사대리	김세현	O		O
	공사대리	박진정		O		O
	공사주임	이윤구		O		O
	공사주임	최동선	O		O
	공사사원	임희승		O		O
	터널과장	최승부	O	O	O	O
	터널주임	박지현	O	O	O	O
	안전팀장	김태화		O		O
	안전과장	안병욱	O		O
	안전대리	김성관		O		O
	안전대리	유대우	O		O
	안전주임	이원규	O		O
	안전주임	염찬수		O		O
	안전사원	박재원		O		O
	품질과장	김병호	O		O
	품질대리	전형준		O		O
	품질기사	신길호	O		O
합계			17명	17명	17명	17명

작성자 : 현장대리인   서  용  범   (인)

확인자 : 책임감리원   김  완  수   (인)